2016년 시 주민참여예산 작은 도서관 지원 사업

성동구 도서관 좌석발급 시스템,

CCTV설치 등 환경개선사업 변경계획서

2016. 10.

서울특별시 성동구

성동구 도서관 좌석발급시스템, CCTV설치 등 환경개선사업 변경계획서

안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성을 위해 추진하는『성동구 도서관 좌석발급시스템, CCTV설치 등 환경개선』에 대한 사업계획을 아래와 같이 변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 사업개요

❍ 사업명: 성동구 도서관 좌석발급시스템, CCTV설치 등 환경개선(서울시 주민참여예산)

❍ 기  간: 2016. 2. ~ 12.

❍ 장  소: 관내 구립도서관 5개소(성동구립, 금호, 용답, 성수, 청계)

❍ 내  용: 구립도서관 內 일반열람실 좌석발급 시스템 설치, 장비확충

(CCTV·책 소독기) 및 휴게실 공사 등 환경개선

- 대상도서관별 개선내역

도 서 관	개 선 내 역
	좌석발급 시스템	휴게실 공사	CCTV	책 소독기
① 성동구립	2대	1식	1식(12대)	4대
② 금 호	1대			1대
③ 용 답	1대			1대
④ 성 수	1대			1대
⑤ 청 계				1대
합 계	5대	1식	1식(12대)	8대

❍ 사업비: 165,150천 원(시 주민참여예산)

Ⅱ. 교부신청액 및 산출내역

구 분	계	산출내역
합 계	165,150,000
① 좌석발급시스템설치	109,050,000	○ 좌석발급시스템 - 키오스크: 9,700천원x5대=48,500천원 - 영상정보시스템: 11,350천원x4대=45,400천원 - 통합 서버: 9,250천원x1대= 9,250천원 - SMS발송모듈 등: 5,900천원x1식= 5,900천원
② CCTV 설치	10,300,000	○ CCTV 설치 - CCTV 자재: 8,200천원x1식=8,200천원 - 배관배선: 2,100천원x1식=2,100천원
③ 책 소독기 설치	32,800,000	○ 책 소독기: 4,100천원x8대=32,800천원
④ 휴게실 개선	13,000,000	○ 휴게실 개선 - 자재비: 5,870천원 - 인건비: 3,660천원 - 기타 부대비: 3,470천원

Ⅲ. 변경계획 보고

❍ 변경사항

예산 산출내역	변경내역			변경예산 산출내역
	변경 전(A)	변경 후(B)	증감(B-A)
① 좌석발급시스템(1식)	109,050,000원	109,050,000원	-
② CCTV설치(1식)	10,300,000원 (12대)	14,210,000원 (16대)	증3,910,000원 (증4대)	· 당초 계획(12대) 대비 4대 추가 설치 예산 증액(지하 1층 문화강좌 1·2실, 컴퓨터실, 영화감상실 4곳)
③ 책소독기설치(8대)	32,800,000원 (8대)	28,890,000원 (8대)	감3,910,000원	· 당초 계획대비 설치수량 변동없음(낙찰차익으로 인한 집행잔액 감액)
④ 휴게실개선(1식)	13,000,000원	13,000,000원	-
합 계	165,150,000원	165,150,000원	-

❍ 변경사유

- 공개경쟁 입찰 계약을 통해 책 소독기 구매가 당초 배정된 예산                (32,800,000원) 보다 낮은 금액(28,890,000원)으로 계약 체결되었고,         낙찰차액으로 인한 집행잔액(3,910,000원) 발생

- 2015년 7월 성동구립도서관 지하1층이 당초 전자정보실에서 프로그램        준비실, 문화강좌 1·2실 및 컴퓨터 강좌실로 공간이 개편됨에 따라 지하        1층 강의실, 컴퓨터실, 영화 감상실 내부에 CCTV 추가(4대) 설치 필요

- 책 소독기 집행잔액(3,910,000원)을 CCTV 추가 설치에 사용하여         도서관 보안 사각지대의 안전사고 및 도난사고에 대비하고자 함

Ⅳ. 세부추진계획

❍ 집행방법: 구립도서관 운영주체인 성동문화재단에 민간위탁 후 정산

민간위탁 협약체결		사업비교부		사업시행		실적보고		정산
성동구 성동문화재단		성동구		성동문화재단		성동문화재단		성동구

Ⅴ. 추진일정

❍ 2016.  6.: 민간위탁 협약체결

❍ 2016. 10.: 사업시행 및 완료

❍ 2016. 11.: 정산 및 실적보고

❍ 2016. 12.: 정산완료

❍ 2017.  2.: 정산보고서 서울시 제출

Ⅵ. 기대효과

❍ 이용자 출입이 빈번한 공간에 CCTV 추가 설치하여 공간 내·외부에서        발생할 수 있는 안전 도난 사고 적극 대비