시유공원내 테마놀이터 조성

(공원조성과/동부공원녹지사업소 서울숲공원)

□ 사업개요

◦위치 : 서울숲공원 숲속놀이터, 응봉공원 A, B놀이터

◦규모 : 3개소 3,300㎡

◦기간 : 2013. 9. 04. ～  2014. 4. 30.

◦총사업비 : 608,384천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 시유공원내 테마놀이터 조성, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '11이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		608,384,000	608,384,000	606,875,410	315,084,360	291,791,050	1,508,590
공 사 비		563,927,000	563,927,000	562,615,410	287,454,360	275,161,050	1,311,590
	도 급 비	518,499,410	518,499,410	517,187,820	254,770,820	262,417,000	1,311,590
	관 급 비	45,427,590	45,427,590	45,427,590	32,683,540	12,744,050	0
폐기물처리비		16,748,000	16,748,000	16,630,000	0	16,630,000	118,000
용 역 비		27,709,000	27,709,000	27,630,000	27,630,000	0	79,000
이 전 비		0	0	0	0	0	0

◦이월사유

- 설계용역, 심의ㆍ심사 등 관련 절차이행으로 인해 2013년 10월에 착공.

- 터널상부에 설치되는 구조물의 구조검토 및 터널추가하중 검토 등안전사고 예방조치로 일부공정 추진 지연

- 레미콘 운송업체 무기한 총파업으로 자재 수급 지연

- 겨울철 공사품질 저하 우려로, 공사 중지(12월~2월)

사고이월(공사) 조서

□ 시유공원내 테마놀이터 조성(401-01) : 동부공원녹지사업소 서울숲공원

(단위:원)

공 종	도․관급 구분	계약금액	지출액	이월금액	비 고
총 계		606,875,410	315,084,360	291,791,050
조경공사	도급	517,187,820	254,770,820 (기성금, 노무비)	262,417,000
	관급	45,427,590	32,683,540 (기성금)	12,744,050
건설폐기물 처리용역	도급	16,630,000	0	16,630,000
설계용역비	도급	27,630,000	27,630,000 (준공금)	0