<서식 3>

백두산호랑이 숲 조성

(서울대공원 총무과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울대공원 맹수사 일대(과천시 대공원광장로 102)

◦규모 : 맹수사 리모델링 및 방사장 정비(약 5,000㎡)

◦기간 : ‘12.12.27 ~ ’14.2.28(공정율90%)

◦총사업비 : 2,800백만원(‘12년 1,000백만원, ’13년 1,800백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 백두산호랑이 숲 조성, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,800,000,000	1,800,000,000	1,781,856,330	570,726,340	1,211,129,990 ( )	18,143,670
공 사 비		1,800,000,000	1,800,000,000	1,781,856,330	570,726,340	1,211,129,990 ( )	18,143,670
	도 급 비	1,800,000,000	1,800,000,000	1,781,856,330	570,726,340	1,211,129,990 ( )	18,143,670
	관 급 비	-	-	-	-	- ( )	-
보 상 비		-	-	-	-	- ( )	-
이전비․기타		-	-	-	-	- ( )	-

※ 본사업과 관련된 전기공사 및 통신공사 포함

◦이월사유

- 노후된 호랑이사를 재조성하는 사업으로서 공사마무리 전 동물탈출 및 안전사고 방지를 위한 전문가 자문, 사육사 토론회, 내부검토회의를 개최하였는 바, 수렴된 다양한 요구사항에 대한 검토 및 보완조치를 위한 기간과 개장 전 동물적응 기간이 필요하나

- 겨울철 공사중지 상태로 절대공기 부족하여 사고이월이 불가피함