2-1-a		시 공공건물 태양광 보급(소방재난본부) - 2018년 소방관서 태양광 보급

□ 추진부서 : 소방재난본부 소방행정과

□ 대상시설 현황 : 7개소 197kW

건물명	연면적(㎡)	주구조	지붕구조	건축년도	추 진 내 용
소방학교	18,452,5	철골철근콘크리트	스라브조	2018	6.30 공사완료 예정
영등포소방서 여의도안전센터	827.3	철근콘크리트	스라브조	1992	공사완료(한전서류 진행중)
영등포소방서 대림안전센터	708.3	철근콘크리트	스라브조	2000	공사완료(한전서류 진행중)
양천소방서 신월안전센터	772.1	철근콘크리트	스라브조	2000	전기공사 전자공개수의시담
관악소방서	4,895.4	철근콘크리트	스라브조	1994	착공(6.28),완공(7.18)예정
관악소방서 봉천안전센터	730.4	철근콘크리트	스라브조	2001	착공(6.28),완공(7.18)예정
동작소방서 노량진안전센터	801.5	철근콘크리트	스라브조	2003	성능검사 요청(7.12완공예정)

□ 설치목표

○ 당    초 : 태양광 시설 243kW

○ 변    경 : 태양광 시설 197kW [46kw 축소]

○ 변경사유 : 소방학교 신축 설계시 법적기준 15%를 초과(18%)하여 설계

하였으나 예산부족으로 법적기준에 맞게 재 설계 함.

□ ’18년 예산확보 현황

○ 시비 : 166백만원, 민자추진(예정) : 0

□ 추진일정

○ ’18. 2.  : 기본계획 수립(시장조사 및 공사계획 수립)

○ ’18. 3~6.  : 공사 입찰 등(업체 선정 및 공사 착공)

○ ’18. 6~8.  : 설치완료 (해당소방서별 준공 및 운영)

□ 추진실적 (‘18.6.20.기준)

○ 2개소, 15KW 설치완료 한전서류 진행중, 1개소 138KW는 6.30 완공예정

4개소 44KW는 현재 공사중으로 7~8월 준공 예정임.

○ ’18. 8. 30.   : 사업 완료

작성자	소방행정과장 : 김선영 ☎ 3706-1300 경리팀장 : 권오덕 ☎ 1340 담당 : 김태돈 ☎ 1341

□ 문제점 및 현안사항

○ 없음

□ 연차별 추진계획

구 분	계 (A+B)	추진계획
		~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
추진대상(개소)	54	23	31	7	9	8	4	3
설치용량(kW)	738	324	414	197	89	66	42	20

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계 (A+B)	투자계획
			~’17(A)	소계(B)	’18	’19	’20	’21	’22
총사업비		762		762	166	250	184	116	46
	예산	762		762	166	250	184	116	46
	민자	0		0

※ 사업비 산출근거 : 2,800천원/kW(’18년 정부지원단가 기준)×설치용량(kW), 연도별 설치비 하락률(약 10%) 적용

※ 2018.6.30 소방행정타운 태양광설치 준공예정(2개소 137.988kW, 700백만원) - 공사비 별도산정