양재대로 녹지연결로 추가 예산 재배정(확보)요청 세부현황

□. 공사개요

○ 위    치 : 서울시 강남구 개포동 1274번지 일원

○ 공사규모 : 녹지연결로 폭20m, 총 연장 90.65m

○ 공사기간 : 2016.06.20.~2017.10.30.

○ 감리/시공 : ㈜제일엔지니어링 / 우륭건설

□. 사업비 변경 현황

(단위 : 천원)

구 분		계			2015년	2016년	2017년 예산 형황			비고
		당초	변경	증·감			계	본예산	추가요청
계		6,759,913	6,894,913	증135,000	444,000	2,006,913	4,444,000	4,309,000	135,000	0
설 계 비		285,000	285,000	-	274,000	11,000	-	-	-
보 상 비		271,352	271,352	-	170,000	101,352	-	-	-
공 사 비	계	5,942,561	6,077,561	증135,000	-	1,877,561	4,200,000	4,065,000	135,000
	도급비	5,279,813	5,414,813	증135,000	-	1,214,813	4,200,000	4,065,000	135,000
	관급비	479,477	479,477	-	-	479,477
	폐기물	52,505	52,505	-	-	52,505
	이설비	130,766	130,766	-	-	130,766
감 리 비		261,000	261,000	-	-	17,000	244,000	244,000	-

□. 사업비 변경 세부현황

○ 공사비(시설비) 변경 현황

(단위:천원)

구 분		변 경 사 유	당초 공사비	변경 공사비	증감액	비 고
시설비 (공사비)	교통소통대책	DPS거더 거치를 위한 교통소통대책 용역사 선정을 위한 공사비 반영	-	8,000	8,000	승인완료
	토취장 및 사토장 변경	터파기 발생토에 대한 사토누락 반영 및 보강토 옹벽 뒷채움 토취장 선정에 따른 공사비 반영	66,000	179,000	113,000	승인완료
	교량받침형식변경	설계사 교대 안정성 검토에 따른 교량받침을 포트받침→탄성받침 으로 형식을 변경하여 요청하여 공사비에 적용	83,000	132,000	49,000	승인완료
	교대날개벽 보강방안추가	설계사 교대 안전성 검토에 따라 날개벽 상단부 추가 보강 공사비 적용	-	8,000	8,000	승인완료
	교통안전시설추가	DPS거더 거치를 위한 유관기관(수서경찰서)협의조건(전면통제) 결과를 공사비 반영	-	24,000	24,000	승인완료
	보도점용에 따른보도복구	구조물 터파기와 한전 및 통신선로 지중화에 따른 보도 원인자 복구비를 공사비 반영	6,000	78,000	72,000
	순성토 및교대 뒷채움재 인양	교량 슬래브 및 교대 뒷채움재의 투입 방법 누락으로 크레인 등을 이용한 순성토 인양공사비 반영 필요	-	250,000	250,000
	H-PILE 사장	기 설치된 가시설 H-PILE 인발이 현장여건상 어려워 매몰 불가피 함.	14,000	36,000	22,000
	기존옹벽절단	기존옹벽 복구에 따른 기존옹벽 절단 비용 반영	-	4,000	4,000
	조경토 반입	상부 상재토사는 조경 목적의 토사로 일반토사는 부적합하여 조경토 반입비용이 소용됨에 따라 공사비 반영.	-	40,000	40,000
	조경보완설계 반영	-강남구 주민민원사항 반영 1. 기존 동선의 차폐 동물이동로 확보 및 시점부 기존 산책로 보완 2. 종점부 경사면 계단 설치, 양재대로와 녹지연결로간 연결계단 설치 3. 교면배수공 추가	-	240,000	240,000
	계		169,000	999,000	830,000
적 용 금 액		기 확보 금액 693,649천원 – 증감액 830,000천원 = 136,351천원(부족예산) ※ 요청액 : 135,000천원

□. 예산과목 및 추가확보 요청 금액

1) 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동물 보호, 생태계복원, 단절된 녹지축 연결, 시설비(401-01)

- 추가확보 요청액 : 135백만원