예산서 P.

자동차전용도로 가로수 교체 식재 공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2016. 1 ~ 10
사업위치	올림픽대로 동작대교 ∼ 한남대교 4.0㎞ 등 3개소 6.5㎞
총사업비	총 300,000천원/ [국비] 0 [시비] 300,000천원
사업내용	수간부패 등 위험 및 시민불편 가로수 교체
사업형태	□ 직접수행 □자치단체 보조 □민간보조 □민간위탁 □ 출연출자 ☑ 기타
사업시행주체	서울시설공단
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	□
경상	투자
☑	□
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
□	□	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시안전본부	도로시설과	이덕기	이앙식	성기선
2133-1413	2133-1661	2133-1662

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 결산	2015 최종예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	-	-	300,000	300,000	100
민간 대행사업비	-	-	300,000	300,000	100

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 최종예산	2016년 예산(안)	증감사유
민간 대행사업비	-	300,000천원	- 회화나무 등 식재 482주 x 347,385원 ≒ 167,439천원 - 위험수목 제거 482주 x 275,022원 ≒ 132,561천원 (임목폐기물 포함)

3		사업설명

□  사업목적

○ 자동차전용도로내 노후화 되고 전도위험이 있는수간부패(동공), 수간

피해 가로수 및 이용시민 불편을 주는 은행나무(암나무)을 교체하여

도로이용 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

□  사업근거

○  법령상 근거

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

- 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 서울특별시 자동차전용도로 관리사무 위,수탁 협약 (도로시설과-16447호, ‘13.9.13)

□  사업내용

○  위    치 : 올림픽대로 동작대교 ∼ 한남대교 4.0㎞ 등 3개소 6.5㎞

○  규    모 : 회화나무 등 2종 수목제거 및 가로수 교체 482주

○  사업기간 : 2016. 1 ~ 10월

○  총사업비 : 300백만원

올림픽대로 동작대교~한남대교(회화나무)		가로수 수간피해(근경사진)
양재대로 양재IC~수서IC (은행열매로 보도상 악취로 조기채취)		올림픽대로 청담교~잠실대교(수간동공)

□  추진경위

○  2015. 3 ~ 4월말 : 가로수 수간부패 및 쓰러짐 위험예상 수목 조사

○ 2015. 5.11 : 국립산림과학원 수목관리 자문의뢰(병충해, 대형수목위험도 등)

○ 2015. 6. 9 : 국립산림과학원 자문결과 병충해 회화나무 등의 제거 및 교체 의견

* 은행나무(암나무) 교체 식재는 단계적 추진사업(2015년 30주 시행)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 → 계약심사 → 공사발주 → 계약체결 → 공사시행 → 준공

○  계약체결

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거하여 도급자 선정 및 계약

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		300백만원
계획수립 및 공사 설계	2016. 1~2월	-	현황 조사 등
공사 발주	2016. 3월	90백만원 (선급금)	발주 및 계약
공사 추진 및 준공	2016.4~10월	210백만원	공사관리 및 준공

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	-
2014년도	-
2015년도	은행나무(암나무) 교체식재 30주 - 양재대로

□   향후 기대효과

- 가로수 쓰러짐으로 안전사고 사전예방

- 이용시민 불편사항을 해소하고 쾌적한 도로환경 제공으로 시민만족도 향상

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012
2013		해	당	없	음
2014

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

7		중기재정계획

(이호조 입력데이터 연동)