여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업

｢한강 자연성 회복 기본계획｣에 의거 여의도샛강 합류부(상류) 구간에 생태거점 조성 및 생물서식처 복원 등 한강의 자연성 회복

□ 사업개요

○  위    치 : 여의도샛강 합류부(상류) 주변

○  규    모 : 약 190,000㎡

○  사업내용 : 하안구조 개선, 수변식생 개선 및 수림대 조성, 편의시설 설치 등

○  사업기간 : 2016. 1 ~ 2018. 12

○  총사업비 : 6,000백만원 (‘16년:400, ‘17년:1,500, ‘18년:4,100)

□ 추진실적

○ 2016.01.28 : 사업계획 수립

○ 2016.02.03 : 기술용역타당성 심사 완료

○ 2016.03.16 : 설계용역 발주 (2.18 용역발주 심의)

○ 2016.04.12 : 설계용역 사업수행능력평가(PQ)

○ 2016.05.17 : 설계용역 착수 (동부엔지니어링+유신)

○ 2016.07.19 : 소규모 환경영향평가용역 착수 (이엔씨기술)

○ 2016.09.28 : 제17회 한강시민위원회 본회의 자문

○ 2016.10.14 : 한강시민위원회 소위원회 현장 자문

○ 2017.01.23 : 한강시민위원회 소위원회(생태분과위원회) 자문

○ 2017. 2     : 실시설계

□ 향후계획

○ 2017. 3               : 소규모 환경영향평가 협의, 계약심사

○ 2017. 4               : 하천점용허가, 공사발주

○ 2017. 5 ~ 2018. 12 : 공사 시행 및 완료

작 성 자	공원부장 : 문길동 ☎ 3780-0627 생태공원과장 : 최병언 ☎0857 담당 : 장창수 ☎0631