		한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단

○ 규    모 : 고가차도 철거 폭15m, 연장 340m

중앙버스전용차로 설치 연장 2km,  버스정류소 3개소

○ 공사기간 : 2018.01. ~ 2018.11.

□ 공사추진계획

○ ‘18.7월초 : 공사홍보, 보도자료 배포, 우회경로 안내 등

○ '18.07.10 ~ 08.31 : 고가철거 시행

⇒ 고가 전면통제일 : 2018. 7. 10(화) 0시

○ '18.09.~11. : 중앙버스전용차로 설치 완료 및 개통

□ 위치도

한남2고가 철거

(폭 15m, 연장340m)

한남대로 중앙버스전용차로

(연장 2km, 정류소 3개소)

한남대교

한남IC

남산1호

터   널