[제출서식]

서부수도사업소 내진보강공사 추진결과

□ 건축물 현황

○ 소 재 지 : 서대문구 통일로26길 41(대지 : 6,285㎡)

○ 층  수 : 지상5층, 지하0층(연면적 : 4,316㎡)

○ 구  조 : 철근콘크리트 기와

○ 준공년도 : 1966.11.12.

○ 내진성능평가 내용 : 본관-붕괴위험, 별관-거주가능, 팔각정-인명안전

□ 사업개요

○ 공사개요

- 공사기간 : 2019.4.18.~2019.7.16.(90일)

- 계약상대자 : ㈜대덕이엔지

- 계약금액 : 금460,894,500원

- 사업물량 : 내진댐퍼 2,3,4층 각8개소 전체24개소 설치 내진보강 및 마감공사

○ 감리개요

- 용역명 : 기술감리용역

- 용역기간 : 2019.4.18.~2019.7.21.(95일)

- 계약상대자 : 주식회사 씨에이엘건축사사무소

- 계약금액 : 금7,281,560원

○ 내진성능 특정제품

- 특정제품명 : 슬릿 플레이트를 구비한 건축구조용 댐퍼(Easy 댐퍼)

- 특징 : 시공성 용이, 성능 향상효과 우수한 벽식 댐퍼

□ 추진효과

○ 청사 내진성능을 인명안전 수준으로 보강

- 근무직원 및 불특정 다수의 시민들이 출입하는 공공청사에 대한 지진발생으로부터 안전성을 확보

□ 기타 특기사항

○ 공사일정 조정

- 상시 근무공간내에서 공사 추진어려움으로 인한 공휴일 및 주말 집중공사 진행에 따른 계약상대자의 인건비 상승 민원

○ 실내 근무공간내 공사에 따른 근무직원 건강 대책

- 실내 구조물 파괴공정에 따른 콘크리트 분진발생, 실내 용접에 따른 가스발생, 마감공사(도장 등)에 따른 페인트 냄새 등 근무직원 건강 대책 마련