서울특별시성북구고시 제2016-  호

서울특별시고시 제2008-111호(2008.04.03.)로 장위재정비촉진지구 재정비촉진계획 결정, 서울특별시고시 제2011-290호(2011.09.29.) 및 서울특별시고시 제2013-10호(2013.01.17.)로 재정비촉진계획 변경결정고시되고 2008.07.30. 조합설립인가, 서울특별시성북구고시 제2009-79호(2009.07.22.) 및 서울특별시성북구고시 제2014-01호(2014.01.02.), 서울특별시성북구고시 제2015-31호(2015.02.26.)로 사업시행인가 및 변경인가고시 된 장위1구역 주택재개발정비사업에 대하여 도시 및 주거환경정비법 제28조제1항에 의거 사업시행변경인가하고, 같은법 제28조제4항 및 같은법 시행규칙 제9조제3항에 의거 이를 고시합니다.

2016년 7월   일

성 북 구 청 장

장위1구역 주택재개발정비사업 사업시행변경인가 고시

1. 사업의 종류 : 주택재개발정비사업

2. 사업의 명칭 : 장위1구역 주택재개발정비사업

3. 위치 및 면적 : 서울특별시 성북구 장위동 144-24일대 (80,513.30㎡)

4. 사업시행자 : 장위1구역 주택재개발정비사업조합 조합장 이덕재

5. 정비사업시행기간

변 경 전	변 경 후	변 경 사 유
사업시행인가일로부터 84개월	사업시행인가일로부터 144개월	사업시행기간 만료예정(2016.07.21.)에 따른 사업시행기간 60개월 연장

6. 사업시행변경인가일 : 2016년 07월 21일

7. 수용 또는 사용할 토지 또는 건축물 명세 및 소유권외의 권리 명세 : 변경없음

8. 건축계획

구분	대지면적 (㎡)	용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이 (m)	건축계획
						전용면적(㎡)	세대수	비고
택지 1	36,018.00	공동주택	17.75	259.51	82.85	60㎡미만	356
						60㎡ ~ 85㎡이하	556
						85㎡초과	27
						합 계	939
택지 2	2,844.60	공동주택 근린생활시설 교육연구시설	45.97	229.72	41.15	60㎡미만	90
						60㎡ ~ 85㎡이하	-
						85㎡초과	-
						합 계	90

9. 법 제65조 규정에 의한 정비기반시설 및 토지 등의 귀속에 관한 사항 : 변경없음

10. 관계도서 : 생략 ≪성북구청 주거정비과 (☏02-2241-2832)에 비치≫