가압장 노후시설 개량사업 공정표

기관명	사 업 명	사업비	추 진 공 정 표															담 당
계	합 계 29개 사업 5,386,300		1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월		8월		9월		10월
중부	ㅇ배밭A증압 외 2개소 감시제어반 교체	200,000																정희종
	ㅇ월곡소배수지 외 3개소 초음파 수위계 교체	82,000																정희종
	ㅇ보광가압장 외 1개소 기전설비 개량	260,000																황필권
	ㅇ월곡배수지 CCTV설비 개량	61,700																정희종
	ㅇ가압장․배수지 LED 등 교체	21,400																황필권
	ㅇ보광가압장 모터펌프 교체	42,000																양우창
	ㅇ삼청가압장 모터펌프 증설	63,000																양우창
	ㅇ월곡증압장 모터펌프 교체	70,000																양우창
서부	ㅇ가좌배수지 모터펌프 교체	270,00																이두영
	ㅇ백련가압장 노후 밸브 교체	140,000																이두영
	ㅇ연희증압장 감시제어반 교체	70,000																이상연
	ㅇ상암증압장 감시제어반 교체	65,000																이동열
	ㅇ홍제4증압장 감시제어반 교체	65,000																이상연
	ㅇ수색배수지 외 9개소 수위반 교체	140,000																신인철
동부	ㅇ대현산 통합제어센터 구축	600,000																오정훈
	ㅇ대현산 및 금호배수지 수위계반 교체	70,000																오정훈
북부	ㅇ수유가압장 수전전압 저압화	394,000																김충완
	ㅇ수락산증압장 모터펌프 교체	53,000																배길동
	ㅇ배수지 3개소 수위계반 교체	84,000																김충완
	ㅇ방학증압장 외 1개소 감시제어반 교체	130,000																김충완
	ㅇ공릉 및 상계배수지 밸브전동구동장치 교체	80,000																배길동
강서	ㅇ우장산가압장 수전전압 저압화	653,000																장준원유준영
	ㅇ가압장 배수지 CCTV설비 개선	17,200																배형진
남부	ㅇ신림6가압장 수전전압 저압화	315,000																최경호
	ㅇ상도배수지 감시제어반 교체	120,000																박병환
	ㅇ노량진배수지 통합제어센터 구축	250,000																박병환
강남	ㅇ삼성가압장 통합제어센터 구축	570,000																박원모
강동	ㅇ거마가압장 수전전압 저압화	350,000																박종희
	ㅇ거마가압장 모터펌프 교체	150,000																강순길

’14년 가압장 노후시설 개량사업 추진계획 일정

(단위 : 천원)

기관명	사 업 명	사업비	추 진 일 정
			펌프 용량심사	설계 완료	계약 심사	발주	계약	완료	담 당
계	합 계 29개 사업 5,386,300
중부	ㅇ배밭A증압 외 2개소 감시제어반 교체	200,000		2/10	2/20	2/25	3/14	6/15	정희종
	ㅇ월곡소배수지 외 3개소 초음파 수위계 교체	82,000		2/10	2/20	2/25	3/14	6/15	정희종
	ㅇ보광가압장 외 1개소 기전설비 개량	260,000		2/10	2/20	2/25	3/14	6/30	황필권
	ㅇ월곡배수지 CCTV설비 개량	61,700		2/10	2/20	2/25	3/14	6/30	정희종
	ㅇ가압장․배수지 LED 등 교체	21,400		2/10	2/20	2/25	3/14	6/15	황필권
	ㅇ보광가압장 모터펌프 교체	42,000	1/20	2/10	2/20	2/25	3/14	6/15	양우창
	ㅇ삼청가압장 모터펌프 증설	63,000	1/20	2/10	2/20	2/25	3/14	6/15	양우창
	ㅇ월곡증압장 모터펌프 교체	70,000	1/20	2/10	2/20	2/25	3/14	6/30	양우창
서부	ㅇ가좌배수지 모터펌프 교체	270,00	1.30	2.15	2.28	3.15	3.30	8.31	이두영
	ㅇ백련가압장 노후 밸브 교체	140,000		2.15	2.28	3.15	3.30	7.31	이두영
	ㅇ연희증압장 감시제어반 교체	70,000		1.30	2.15	2.25	3.25	6.30	이상연
	ㅇ상암증압장 감시제어반 교체	65,000		1.30	2.15	2.25	3.25	6.30	이동열
	ㅇ홍제4증압장 감시제어반 교체	65,000		1.30	2.15	2.25	3.25	6.30	이상연
	ㅇ수색배수지 외 9개소 수위반 교체	140,000		1.30	2.15	2.25	3.25	6.30	신인철
동부	ㅇ대현산 통합제어센터 구축	600,000		1.30	2.15	2.28	3.15	6.30	오정훈
	ㅇ대현산 및 금호배수지 수위계반 교체	70,000		2.10	2.15	3.10	3.20	6.30	오정훈
북부	ㅇ수유가압장 수전전압 저압화	394,000		1.30	2.10	2.28	3.25	5.30	김충완
	ㅇ수락산증압장 모터펌프 교체	53,000	1.30	2.20	2.28	3.10	3.30	6.30	배길동
	ㅇ배수지 3개소 수위계반 교체	84,000		2.07	2.20	3.05	3.30	6.30	김충완
	ㅇ방학증압장 외 1개소 감시제어반 교체	130,000		2.05	2.15	2.28	3.25	6.30	김충완
	ㅇ공릉 및 상계배수지 밸브전동구동장치 교체	80,000		2.20	2.28	3.10	3.30	6.30	배길동
강서	ㅇ우장산가압장 수전전압 저압화	653,000	1.30	2.10	2.20	2.28	3.30	6.30	장준원 유준영
	ㅇ가압장 배수지 CCTV설비 개선	17,200		2.15		2.20	3.31	5.30	배형진
남부	ㅇ신림6가압장 수전전압 저압화	315,000		1.17	1.20	2.7	2.25	6.30	최경호
	ㅇ상도배수지 감시제어반 교체	120,000		1.29	2.3	2.14	2.28	6.30	박병환
	ㅇ노량진배수지 통합제어센터 구축	250,000		1.17	2.20	2.7	2.25	6.30	박병환
강남	ㅇ삼성가압장 통합제어센터 구축	570,000		1.20	1.23	1.29	2.20	6.30	박원모
강동	ㅇ거마가압장 수전전압 저압화	350,000		1.25	2.1	2.5	2.20	6.30	박종희
	ㅇ거마가압장 모터펌프 교체	150,000	1.20	1.25	2.1	2.5	2.20	6.30	강순길