문서번호	정수시설과-1384
결재일자	2016.4.11.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
협 조
	주무관

『정수지(#3) 내부 방수․방식공사』

사업추진 및 기술심의위원회 개최계획

2016. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『정수지(#3) 내부 방수․방식공사』

사업추진 및 기술심의위원회 개최 계획

‘16년 시행예정인 뚝도정수장 정수지(#3) 내부 방수․방식공사에 대하여 본부 내부검토회의에서 구조물 부위별 계열선정이 완료됨에 따라, 공법선정을 위한 기술심의위원회를 개최하여 정수지 내부 방수․방식 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

1. 추진근거

❍ 상수도본부 시설관리과-36호(2016.01.05.) 상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준 개정(안)

❍ 상수도본부 시설관리과-2887호(2016.03.28.) 시설물 유지관리『내부 검토회의』개최결과

2. 본부 내부검토회의 결과 구조물 부위별 계열선정 현황

사업 대상	구조물 부위별	계 열	비 고
정수지(#3)	천 장	도 막
	벽 체	도 막	기둥, 도류벽 포함
	바 닥	패 널

Ⅱ		사업 개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수․방식공사

❍ 공사기간 : 2016. 4. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 비 : 1,500백만원

❍ 사업내용 : #3정수지

시설물	구조물 부위별	계 열	방식면적 (㎡)	비 고
정수지(#3)	계		9,238
	천 장	도 막	2,866
	벽 체	도 막	3,506	기둥, 도류벽 포함
	바 닥	패 널	2,866

Ⅲ		세부추진 계획

【업무 흐름】				【주요 내용】	【기간】
	구조물 부위별 계열 선정요청 (발주부서)			▪구조물 규모, 특성, 환경 등을 고려하여 부위별 계열 선정 검토(안)를 작성 계열 선정요청 ▪발주부서 → 본부(시설관리과, 생산관리과)에 요청	완료 ‘16.3.11
	구조물 부위별 계열 선정 (내부 검토회의 개최)			▪구조물 환경 및 형식에 따라 부위별(바닥,벽체,천정) 계열(도막,시트,패널) 선정을 위한 내부 검토회의 ▪본부(시설관리과, 생산관리과) → 발주부서에 결과통보	완료 ‘16.3.24
	사업 추진방침 (발주 부서)			▪사업 추진 및 기술심의위원회 개최방침(결재권자 기관장)
	사업참여신청 공고			▪공법별 기술협약 및 평가자료 요청 ▪시, 상수도 및 자치구 홈페이지 공지	14일
					7일
	객관적 평가 및 기술심의자료 준비			▪기술심의위원회 개최에 필요한 자료 준비
	기술심의위원회 개최			▪심의위원 선정 ▪평가표에 의한 평가 시행 (배점, 주관적 평가, 종합평가) ▪심의결과 상수도 홈페이지 공개	1일
	신기술 활용심의 및 공사설계 등			▪선정 공법이 건설신기술인 경우 신기술 활용심의 요청 (본청 기술심사담당관)	30일
	계약심사, 입찰공고 등 사업추진			▪계약심사 및 계약의뢰	30일 (최대 82일)

1. 업무 흐름도

2. 기술심의 개최전 사전준비 사항

❍ 내부방식 공법 평가자료 제출 요청 : 발주부서 ⇒ 업체

❍ 요청대상 : 본부 내부검토회의에서 선정된 공법계열에 대하여 기술 사용협약서 및 평가자료 등을 업체에 요청.

❍ 요청방법 : 서울시, 상수도 및 자치구 홈페이지에 공고(기간:14일)

❍ 객관적 평가 : 객관적 요소는 발주담당이 기술심의위원회 개최전 평가

3. 기술심의위원회 구성 및 운영

❍ 위원장 : 선정된 위원중 호선으로 선출

❍ 위  원 : 7인(건설기술심의 위원중 7개분야 97명중 개최당일 선정

❍ 간 사 : 정수시설과장

❍ 기 능 : 배점결정, 주관적 평가, 적용공법 선정 등

- 적용공법 선정 : 기 결정된 구조물 부위별 도막 및 패널계열과 관련된 공법(자재)을 기술심의위원회(발주청)에서 선정

❍ 업체 선정의 공정성 및 투명성 확보를 위해 심의(평가)위원회 개최시에는 시민감사옴부즈만위원회에 의뢰하여 “시민참여 움부즈만”이 입회토록 조치

❍ 참여업체 공법 설명

- 발표일자 : 기술심의위원회 개최시 업체에서 설명

- 발표시간 : 업체당 최대 15분(참가업체수에 따라 조정 가능)

※ 위원회 주관 부서는 평가 대상 업체 수가 과다하여 위원회 운영에 지장을 초래할 경우 업체의 발표를 생략할 수 있다.

- 발표순서 : 기술심의위원회 개최 당일 업체대표 입회하에 추첨

- 공법설명 : 업체 관계자인 발표자 1명만 회의장 입장(PT 설명)

4. 항목별 평가기준

구 분

평가

배점

점수 계산방법

비 고

1차

2차

객관적

평  가

요  소

방식

성능

일반

조건

건조면

절대

평가

기술

심의

위원

배점

5%

1등급

2등급

3등급

4등급

5등급 적용 제외

100%

90%

80%

70%

수중침지

절대

평가

10%

1등급

2등급

3등급

4등급

100%

90%

80%

70%

습윤면

절대

평가

20%

부풀음, 박리·박락 현상 없을 것

내화

학성

염산

절대

평가

15%

1등급

2등급

3등급

4등급

100%

90%

80%

70%

차아염소산

절대

평가

15%

1등급

2등급

3등급

4등급

100%

90%

80%

70%

1등급

2등급

3등급

4등급

수산화나트륨

절대

평가

15%

100%

90%

80%

70%

내후성

습윤건조 반복시험

100cycle

절대

평가

15%

1등급

2등급

3등급

4등급

100%

90%

80%

70%

내충격성

절대

평가

5%

1등급

2등급

3등급

4등급

100%

90%

80%

70%

투수저항성능

절대

평가

투수 발생 시 적용 제외

품질

관리

기술

인증

신기술 및 특허 보유여부

절대

평가

2

보호기간내 신기술 : 1점

특허 건당 0.6점

(경과기간에 따라 가중치 부여)

5년 미만 100%, 5년 이상 10년 미만 80%, 10년 이상 60%

PQ 기준 준용

(PQ 기준 변경시

변경 기준 적용)

시공성

용제계 재료

사용 有·無

절대

평가

1

용제 미사용

용제 사용

1

0

주관적

평  가

요  소

시공성

상대

평가

수

우

미

양

가

100%

90%

80%

70%

60%

유지관리성

상대

평가

수

우

미

양

가

100%

90%

80%

70%

60%

경제성

초기 공사비를

참고하여 평가

상대

평가

수

우

미

양

가

100%

90%

80%

70%

60%

기 타

가감점

시공실적

절대

평가

5

5천㎡

이하

1만㎡

이하

2만㎡

이하

3만㎡

이하

3만㎡

초과

2016년 이후

실적(발주시공분)

(7년 이내 실적)

1

2

3

4

5

하자사례

절대

평가

-5

하자면적비율	1%이하	2%이하	3%이하	4%이하	5%이하	5%초과
감점	0.6	1	2	3	4	5

2016년 이후

하자(발주시공분)

(7년 이내 하자)

균열 대응성

절대

평가

1

균열 미발생 시, 각각 0.5점씩 가점

(20℃와 –20℃에 대하여 시험)

도막계열간 평가

시에만 선택 적용

내피로 성능

절대

평가

1

파단 미발생

파단 발생

패널계는 줄눈제, 시트계는 접합부

1

0

❍ 평가 항목별 배점 결정 방법

- 위원별로 평가한 우선순위를 점수로 환산

- 전체 점수에 대한 가중값으로 환산하여 항목별 배점 결정

Ⅳ		기술심의위원회 개최후 향후 계획

1. 신기술 활용심의

❍ 기술심의위원회 의결로 확정된 공법에 따라 설계

❍ 본청 기술심사담당관에게 심의 요청

- 신기술의 경우 서울시 건설기술심의위원회 심의 대상임

2. 공사설계

❍ 설계시 적용공종

- 장비반입구 설치 및 단면보수(치핑 등) ⇒ 바탕조정 ⇒ 방식공사

❍ 하자보증기간(상수도 시설물 유지관리방안 용역: 본부 시설관리과)

- 기 간 : 7년(공사계약 특수조건에 명시)

3. 입찰공고 및 공사계약 체결

❍ 입찰참가 자격(본청 재무과 계약부서와 협의 적용)

- 건설산업기본법에 의한 “시설물 유지관리업” 등록을 필한 자

Ⅴ		세부추진 일정(예정)

❍ ’16. 4. 12 : 사업참여 신청공고(시,상수도 및 자치구 홈페이지 공지)

❍ ’16. 4. 29 : 내부방식 공법계열 평가자료 요청 및 접수

❍ ’16. 5. 06 : 기술심의위원회 개최에 필요한 자료준비

❍ ’16. 5. 09 : 외부자문위원 기술심의위원회 개최

❍ ’16. 5. 13 : 신기술 활용심의 요청(본청 기술심사담당관)

❍ ’16. 6. 20 : 공사설계(본청 신기술 심의결과 반영)

❍ ’16. 6. 23 : 계약심사 요청(본부 재무회계과)

❍ ’16. 7. 07 : 공사발주 및 계약의뢰(본청 재무과)

❍ ’16. 7. 21 : 입찰공고 및 낙찰자 결정(본청 재무과)

Ⅵ		행정사항

❍ 구조물 계열별 공법선정 기술심의위원회 개최

- 일 시 : 2016. 05. 09(화) 09:00~18:00

- 장 소 : 뚝도정수센터 1층 회의실

❍ 본부와 협조 체제 유지

- 상수도기술심의위원회 운영 및 평가에 따른 업무추진 협의

- 외부 기술심의위원 위촉 관련 전문가 POOL 운영 협의

❍ 공법선정의 공정성 및 투명성 확보

- 심의(평가)위원회 개최시에는 시민감사움부즈만위원회에 의뢰하여 “ 옴부즈만”이 입회토록 조치

- 평가대상 업체 대표(대리인 가능) 입회하에 범용 스프레드시트 등을 활용하여 심의위원 당일 선정

붙  임 : 1.시설물 유지관리 내부 검토회의 개최결과 공문.

2.사업참여 신청 공고문 1부.  끝.