(26번)다산로 72~98간 하수관로 개량(주민참여)

□ 사업목적

○ 노후된 하수관 개량으로 도로함몰 등 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 다산로 72~98

○ 규    모 : D1,200㎜, L=183m

○  기    간 : 2016.2 ~ 2016.12

○ 총사업비 : 200백만원

□ 사업진행 현황 및 계획

○ ’16.04 : 공사 착공

○ ’16.07월 현재 : 추진공정률 35%

○ ’16.10 : 준공예정

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년 이후
계	200	0	200	0
시 설 비	200	0	200	0

□ 효    과

○ 노후 원형관로 보수보강으로 도로함몰 등의 차량 및 보행자 안전사고 예방 및 내구성 연장

작성자	물재생계획과	담당:김일구(☎2133-3791)	하수관리팀장:김재승(☎3789)	과장:하상문(☎3780)

□ 위치도

D1,200mm L=183m

□ 현황사진

(64번)필동배수분구 하수관로 종합정비

□ 사업목적

○ 균열, 침하, 경사불량, 통수능부족 등 노후불량 하수관로를 배수분구 단위로 정비하여 침수피해 해소, 배수체계 및 시민생활환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 명동, 필동, 광희동, 을지로동 일대

○ 규    모 : D300㎜ ~ □2.5×2.0m, L=19.5㎞

(’16년 D300㎜ ~ □2.5×2.0m, L=2.2㎞)

○  기    간 : 2011.1 ~ 2017.12

○ 총사업비 : 38,880백만원(설계비898, 공사비35,452, 감리비2,530)

[’16년 5,000백만원(공사비4,670, 감리비330)]

□ 추진현황 및 계획

○ ’11.04~’12.02 : 실시설계용역 시행

○ ’12.06~’15.12 : 공사시행(1구역~3구역, 6구역, 7구역)

○ ’16.03 : 공사 착공(4구역~8구역)

○ ’16.07월 현재 : 추진 공정율 총차분 61.6%(금차분 46.5%)

○ ’16.12 : 공사 준공(4구역~8구역)

○ ’17.12 : 배수분구 공사준공(예정)

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년 이후
계	38,880	15,420	5,000	18,460
시 설 비	36,350	14,650	4,670	17,030
감 리 비	2,530	770	330	1,430

□ 효    과

○ 배수체계 개선, 통수능 확보 등 기능회복으로 도시침수 예방

○ 노후·불량 관로 개보수 등으로 시민안전 및 시설물 내구 연한 유지

○ 하수누수 및 불량수 유입을 차단하여 토양오염 방지 및 처리장의 효율증대

작성자	물재생계획과	담당:정성오(☎2133-3795)	하수정비팀장:(최병출☎3794)	과장:하상문(☎3780)

□ 위치도

		범 례
			공 구 구 분
			기 시 공 분
			2016년 시행 (노후불량)
			장래분

(65번)필동20~38일대 사각형거 보수보강

□ 사업목적

○ 노후 사각형거 구조 안전성을 확보하여 도로함몰 등 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 필동20-38외 1개소

○ 규    모 : □1.0×1.0m~□2.5×2.0m, L=0.35㎞

(단면보수 1,830㎡)

○  기    간 : 2016. 3.~ 2016. 10.

○ 총사업비 : 1,000백만원

□ 추진현황 및 계획

○ ’14. 12. ~’15. 04. : 정밀안전점검 용역 시행

○ ’16. 03. : 공사 착공

○ ’16.07월 현재 : 추진공정율 50%

○ ’16. 10. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년 이후
계	1,000	0	1,000	0
시 설 비	1,000	0	1,000	0

□ 효    과

○ 구조물의 내구성 및 안전성을 확보하고 원활한 배수기능 및 사각형거의 공용성 증대

작성자	물재생계획과	담당:김일구(☎2133-3791)	하수관리팀장:김재승(☎3789)	과장:하상문(☎3780)

□ 위치도 (필동로20~38)

▣2.2×2.2m~▣2.5×2.0m, L=197m(D등급)

- 단면보수 : 37㎡

- 철근노출 : 310㎡

- 토사퇴적 : 341m³

□ 현황사진

(66번)신당동372-31~359-6 일대 사각형거 보수보강

□ 사업목적

○ 노후 사각형거 구조 안전성을 확보하여 도로함몰 등 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 신당동 372-31~359-6외 11개소

○ 규    모 : □0.7×0.8m~□3.5×2.5m, L=1.30㎞

(단면보수 2,944㎡)

○  기    간 : 2016. 3.~ 2016. 10.

○ 총사업비 : 1,100백만원

□ 추진현황 및 계획

○ ’14.06. ~’14. 11. : 정밀안전점검 용역 시행

○ ’16.03. : 공사 착공

○ ’16.07월 현재 : 추진공정율 50%

○ ’16.10. : 공사 준공

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년 이후
계	1,100	0	1,100	0
시 설 비	1,100	0	1,100	0

□ 효    과

○ 구조물의 내구성 및 안전성을 확보하고 원활한 배수기능 및 사각형거의 공용성 증대

작성자	물재생계획과	담당:김일구(☎2133-3791)	하수관리팀장:김재승(☎3789)	과장:하상문(☎3780)

□ 위치도 – 1구간(신당동 372-31 ~ 359-6)

▣3.0×1.5m~▣1.2×1.1m, L=320m(D등급)

- 단면복구 : 770㎡

- 철근노출 : 129㎡

- 토사퇴적 : 18m³

□ 현황사진

(67번)다산로 56-98간 원형관로 보수보강

□ 사업목적

○ 노후 원형관로 구조 안전성을 확보하여 도로함몰 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 다산로 56~98

○ 규    모 : D900~1,000㎜, L=295m

○  기    간 : 2016.3 ~ 2016.11

○ 총사업비 : 300백만원

□ 추진현황 및 계획

○ ’16.04 : 공사 착공

○ ’16.07월 현재 : 추진공정율 30%

○ ’16.10 : 공사 준공

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년 이후
계	300	0	300	0
시 설 비	300	0	300	0

□ 효    과

○ 노후 관로의 내구성 및 안전성을 확보하여 원활한 배수기능과  도로함몰 등의 안전사고 예방

작성자	물재생계획과	담당:김일구(☎2133-3791)	하수관리팀장:김재승(☎3789)	과장:하상문(☎3780)

□ 위치도

D900~1,000mm L=295m

□ 현황사진