		한강대교남단 보행교(백년다리)조성공사

□노들섬 개장과 함께 노들섬과 노량진일대 도시재생활성화를 위해 시민들의 노들섬 접근성 향상과 한강 인도교의 역사성 복원, 한강의 새로운 경관명소를 제공코자 기존의 한강대교를 활용하여 공중 보행교 조성공사를 추진.

1		사업개요

○ 위    치 : 한강대교 남단(노들섬~한강대교~노량진 본동 일대)

○ 규    모 : 폭 8m, 연장 = 567m (3개구간 보행교)

○ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 12.

○ 총사업비 : 38,251백만 원 ('21년 예산 12,000백만 원)

2		추진현황

(공정률 : 0% 발주 전)

○  '19. 03. : 백년다리 조성 추진계획 수립

○  '19. 09. : 기본 및 실시설계용역 착수 (교량안전과)

○  '20. 05. : 투자심사완료

○  '20. 06. : 백년다리 실시설계 요청 (교량안전과 → 도기본)

○  '20. 09. : 특정공법 선정위원회 개최 (상부거더 등 4건)

○  '20. 12. : 기본 및 실시설계 용역 준공 (도시기반시설본부)

○  '21. 01. : 계약심사완료

3		'21년 추진계획

('21년말 목표 공정률 : 50%)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
공 정 률	3%	15%	30%	50%
추진내용	공사발주 및 실착공	SHOP DWG 작도 견치석 철거 강재교각 자재발주	- SHOP DWG 작도(강재교각) 견치석 철거 콘크리트기초타설 콘크리트교각 타설 강재교각 제작 상부거더 자재발주	콘크리트 기초타설 콘크리트교각 타설 강재교각 거치 - 상부거더 제작

추진부서	토목부장 : 김용제 ☎ 3708-2540 도시고속도로과장 : 장수철 ☎ 8665 담당 : 이상욱 ☎ 8661

4		향후계획

○ '21. 02. : 계약심의위원회 완료

○ '21. 03. : 공사발주

○ '22. 12. : 공사준공

5		연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분(내용)		계	'20년 이전	'21년	'22년 이후
총사업비(ⓐ+ⓑ)		38,893	1,500	12,000	25,393
본부(재배정)예산 ⓐ		38,893	1,500	12,000	25,393
	설계비	1,500	1,500	-	-
	감리비	2,328	-	875	1,453
	공사비	35,065	-	11,125	23,940
보상비 기타 ⓑ		-	-	-	-

【 위치도 및 조감도 】