문서번호	시설보수과-4555
결재일자	2017.10.12.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
협 조
	주무관

사업 예산 추가 사용 계획

2017. 10

남부도로사업소

(시설보수과)

사업 예산 추가 사용 계획

도림천1복개 보수공사 구간에 설치되어 있는 메쉬휀스에 대하여 철거후 재설치에 따른 사업 예산 추가 사용계획에 대한 보고임.

Ⅰ		사업개요

사업명 : 도림천1복개 보수공사

위  치 : 서울시 관악구 신림동 산32-1~ 신림동 110

규  모

- 절삭후 아스팔트 덧씌우기 61.7a, 교면방수 4301㎡, 균열보수 169.3m,신축이음장치설치 133.9m

공사비

- 도급비 : 513,514천원, 관급자재비 24,200천원, 이전비 19,861천원

시공사 : 공운건설  대표 김인식

기  간 : 2017. 06. 22 ~ 11. 30

Ⅱ		사업예산 추가 사용의 필요성

도림천1복개보수공사 구간에 설치되어 있는 시설물(메쉬휀스)에 대하여 철거후 재설치가 필요함.

⇒ 현재 도림천1복개(완전복개) 상부에 안전지대를 활용하여 주차장으로  이용되고 있으며 안전지대 경계로 메쉬휀스(약 220경간)가 설치되어 있어 공사 시행을 위해서는 메쉬휀스 철거후 재설치가 필요함.

⇒ 개략 공사비

공 종	규 격	수 량	공 사 비		비 고
			당 초	변 경
매쉬휀스 철거후 재설치	H:1,500×W:2,100	220경간	-	24,415천원

사업 예산 추가 사용계획

예 산	재배정예산	배정잔액 (계약심사절감액)	필요예산	비 고
700,000	639,402	60,598	25,000천원

⇒ 메쉬휀스 철거 및 재설치에 필요한 예산은 계약심사절감액에서 추가 예산배정 요청하여 사용코자함.

Ⅲ		행정사항

추가 소요 예산은 도로시설과에 재배정 요청.  끝.