< 구로궁동청소년문화의집 건립 추진현황 및 성과 >

1. 사 업 명 : 구로(궁동) 청소년문화의집 건립 지원

① 총괄

- 사업규모 : 지하1층, 지상 3층, 연면적 1,240㎡

사 업 명	2013년 주요 성과
구로(궁동)청소년문화의집 건립	▪ ‘13. 8. 12 건축설계 완료 ▪ ‘13. 11~12월 공사발주 및 계약

② 세부 내용

○ 사업목적 : 지역 내 청소년의 건전한 여가 및 활동을 활성화하고 다양한 교육 및 정보제공을 통해 구로구의 청소년들이 지역과 글로벌 사회의 주역으로 성장

○ 사업 추진방식 : 건립보조금(국·시비)을 지원하여 구로구에서 공사시행

○ 사업기간 : 2011년 11월 ∼ 2014년 10월

○ `13년도 사업 추진내용

· 당초 목표 : 건축설계(1~3월) 및 공사완료(5~10월)

· 추진 실적 : 토지매입 완료, 건축설계 완료(5~8월), 공사계약 및 착공(12월)

· 주요 추진내용 :

- ‘13. 2 : 시유지 계약체결(토지매입 완료)

- ‘13. 8. 12 : 실시설계 완료

- ‘13. 11 ~ 12 : 공사 발주 및 계약, 공사착공(기존 건물철거)

· `13년도 예산투입액

(단위 : 백만원)

구분	국비						지방비	민자	합계
	일반 회계	특별회계			기타	소계
		광역 계정	지역 계정	제주 계정
2013			360	-		360	870		1,230

③ 사업 추진상 문제점(해당사항이 있는 경우 작성) : 해당없음

④ 향후 계획

- ‘14. 10 : 준공 예정