공  기  연  장    사  유  서

가. 공 사 명 : 금천교 내진성능개선공사

나. 공사기간 : 2013년 5월 2일(계약 4월 30일) ~ 2014년 2월 28일

다. 공 사 비 : 일금 일십사억팔천삼백칠십만팔천칠백원정(\1,483,708,700)

라. 공사개요 : 탄성받침(구교,램프교) : 110개소, HDRB(신교) : 110개소, 잭업보강공 428개소

위 공사와 관련하여 서울특별시시설관리공단 시행(공사감독1처-854)에 의거 철도보호지구와 인접한 금천교(신교) P11,P12 작업협의 결과에 따라 준공일인 2월 28일까지 공사완료가 불가한바 3월 31일까지 공기연장을 요청합니다.

[ 첨 부 ]

1. 공사감독1처-854(2014.02.05) 철도저촉구간 작업관련 업무지시(서울특별시시설관리공단)