사전 설계도서 검토 결과

1		공 사 현 황

가. 공 사 명: 한강변 보행네트워크 조성공사

나. 공사기간: 착공일로부터 12개월

다. 설계금액: 금7700백만원

라. 발 주 처: 한강사업본부 기반시설과

마. 설 계 사: 랩디에치설계사무소

2		검 토 내 용

구 분

검  토  내  용

내역서

(공통)

건설근로자 퇴직공제제도 개정에 따라 20.05.27이후 1억이상의 발주 대상 공사, 공제부금 일액 인상(5,000원/일 → 6,500원/일)에 따른 설계서 반영 여부 확인.

▹고용개선지원비(PS단가), 전자인력단말기 비용 공사원가 반영 필요

(2020. 7. 1. 이후 신규 발주 공사 : 낙찰차액 활용하여 발주내역 포함)

- 서울시 건설혁신과-8427(2020.06.29.) 및 안전고용개선지원비

공사원가 반영 및 집행 매뉴얼(ver.02) 참고

자전거도로 철거, 설치공사 시 보행도우미, 신호수 반영 필요

내역서

(조경)

내역서와 도면 상이.

구 분	내 역	도면	비 고
삼색조팝	300 + 70 = 370주	200+570+570 =1,340주
대왕참나무	59주	56주
전망휴게쉼터	1식	2식
사고석경계석	350.4M	140M
난 간 A	1,161.9M	850M
난 간 B	160.19M	117M
난 간 C	68M	39M
난 간 D	19M	15M

일위대가

(조경)

No.72~ No.75 관목이식

- 굴취시 식재품으로 반영되어 굴취품 미적용 (식재품을 굴취품변경)

▹No.85~ No.102호 보행데크, 보행로, 계단

- 오일스테인 판재측면, 단면 누락 (측면 2. 단면 2, 총4면)

No.76 스툴 적용 오류 - 단위 1개소, 일위수량 0.4적용.

※ 데크설치시 서울형품셈 적용 필요(잡철물 제작설치)

일위대가

(포장)

No.308 석재판붙임(습식,바닥)

- 석공 : 0.31인 적용, 서울형품셈 0.284인

서울형품셈 적용 요망

도 면(포장)

No.콘크리트보도블럭 포장

- 투수블럭 및 일반보도블럭 포장단면 모호

레미콘 타설후 상부에 보도포장시 불투수블럭을 적용하거나

보조기층단면을 증대하고 투수블럭을 적용 선택 요망

- 서울시 보도포장 매뉴얼 참고, 차량통행 있는곳은 보도블럭 t6cm→      t8cm적용

- 차량통행하는 포장구간 콘크리트  강도 180kg/㎠으로는 약할 것

으로 판단됨, 보강 필요( 참고로 차도용 측구 180kg/㎠)

- 보도포장시 하부 보강 콘크리트포장을 할 경우 골재층 상부

PE필름포설 요망

보강콘크리트를 제외할 경우 골재층 상하부 부직포 포설(내역반영 요망)

도 면(조경)

No.L6.85 연결거점 안내판상세도 공란

기 타

▹공공건설공사 공사기간 산정기준(국토교통부훈령 제1140호)을

적용하여 적정 공사기간 산정 및 반영 필요

▹건설현장 근로환경개선 및 근로자 편의를 위하여 현장에 화장실·

식당·탈의실 등 시설 설치 및 근로자 이용 조치 등 설계반영 필요

(건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제7조의 2)

▹공정관리를 위한 현장사무실, 가설창고 반영 필요.

▹포플러(R20) 수급현황 사전 확인 필요

▹전기공사는 건설산업기본법에 따라 분리발주 필요

※전기공사업법 제11조, 제43조4호

※ 수량산출서 없어 조경시설물 등 검토 곤란.

끝.