문서번호	교량안전과-12923
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장	도시안전기획관		도시안전본부장
협 조	서부도로사업소장
	시설보수과장
	강북일반교량팀장

사천교 성능개선 방안

2015. 7.

도시안전본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사천교 성능개선방안

가재울 뉴타운(3, 4구역) 주택재개발정비사업에 따른 교통대책 일환으로 사천교 확장계획(DB-24)추진중 1962년에 건설된 구교는 DB-18로 장기적 안전성 확보를 위해 성능개선공사를 추진코자 함.

Ⅰ		시설물 현황

□ 시설물명 : 사천교

□ 위    치 : 서울시 서대문구 연희동 ~ 서대문구 남가좌동

□ 시설물개요

○ 규  모 : 폭 30m, 연장 90m

○ 구조형식

- 상부 : RC슬래브, PSC Beam, RC T-Beam

- 하부 : 교대 반중력식, 교각 벽식

○ 준공년도 : 신설 1962년 (B=8.6m, 2차로) , 확장 1975년 (B=30m, 6차로)

□ 관리주체 : 서울시 서부도로사업소

Ⅱ		관련근거

□ 사천교 확장계획(안) 검토보고회 결과 보고(시설보수과-3097, ‘15.4.8)

○ 사천교의 확장은 장래 사용성 및 안전성까지 고려하여 교량성능 개선

(DB-18→DB-24)방향으로 추진

□ 사천교 확장계획(안) 검토보고회 결과 보고(시설보수과-5152, ‘15.6.12)

○ 신설되는 확장 구간은 현 설계기준인 DB-24로 건설하는 것이 타당하며,

1962년에 건설된 사천교 기존 교량은 DB-18로 도로교 설계 기준에 맞추어       (DB-18→DB-24) 성능개선이 필요함.

Ⅲ		검 토 배 경

□ 가재울 뉴타운 3,4구역 주택재개발사업의 인가조건인 “사천교 확장”[L=90m, B=30m(6차로)→37.5m(8~9차로)]을 이행하기 위해 시-재개발조합 간 협약에 의거 조합의 교통개선분담금을 납부 받아 시행하는 사업으로 교통여건 개선 및 주변 개발로 인한 교통량 증가에 대비하기 위한 사업과 연계하여

□ 확장방안 보고시 제기된 사천교의 현 상태에 대한 성능개선 여부 등의 검토에 따라 기존교량의 정밀안전진단을 실시한 결과 1962년에 건설된 구교의 상판 슬래브 구간이 DB-24를 만족하지 못하는 것으로 나타남

□ 교량의 장기적인 안전성 확보 및 도로교 설계기준에 근거한 사천교 확장공사와 연계하여 기존 교량의 성능개선 공사 시행이 필요함

Ⅳ		추 진 경 위

□ 그간 주요 추진경위

○ ‘15. 01. 02 : 사천교 확장 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘15. 03. 26 : 본부장지시사항(교량안전과와 기본계획안 사전협의)

○ ‘15. 04. 03 : 관련부서 합동 검토회의(1차)

- 기존교량 정밀안전진단 실시후 추가 협의

○ ‘15. 04.~05 : 기존교량 정밀안전진단 실시(내하력평가 및 구조검토)

- 신교 (1,3교) : 공용내하력 DB-24이상

- 구교 (2교) : 공용내하력 DB-18이상

○ ‘15. 06. 01 : 관련부서 합동 검토회의(2차)

○ ‘15. 06. 08 : 검토보고회의 개최(도시안전기획관 집무실)

- 기존교량 성능개선

Ⅴ		시행방안 검토

□ 실시설계 추진

○ 사천교 확장 기본 및 실시설계 용역 수행중에 있으므로 성능개선을 위한    실시설계를 포함하여 시행

□ 공사시행

○ 원활한 교통처리를 감안 확장공사 후 성능개선 공사 시행

□ 예산확보

○ 실시설계비 : 기존교량의 성능개선을 위한 실시설계 용역비가 기확보 되어 있지    않아 금년도 도로시설물(교량) 일상유지보수공사비를 사용하여 실시설계 시행   (75백만원)

○ 공사비 : 2016년도 예산 반영하여 성능개선(5,300백만원)

Ⅵ		향후계획

□ ‘15. 07. : 투자심사의뢰

□ ‘15. 09. : 제4차 투자심사

□ ‘15. 11. : 용역준공

□ ‘16. 02. ~ 12  : 공사시행

Ⅶ		행정사항

□ 성능개선 방안을 서부도로사업소에 통보

□ 2016년 사업예산 편성시 성능개선공사 소요예산 반영

붙임 : 1. 성능개선 위치도 1부.

2. 실시설계비 및 개략공사비 산출내역 1부.  끝.