문서번호	토목부-19711
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조
	주무관

사토장 위치 변경 검토보고

【동부간선도로확장공사(3공구)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

사토장 위치 변경 검토보고

【동부간선도로확장공사(3공구)】

『동부간선도로확장공사(3공구)』의 사토장 위치 변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

※관련근거 : 동삼감 제2015 - 116호(2015. 8.25)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

○ 공사규모 : 폭 4차로 → 6차로, 연장 2.25km

○ 도 급 비 : 57,594백만원

○ 공사기간 : ‘08. 2.15.～’15.12.31.

○ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 1

○ 시 공 사 : 세원건설㈜ 외 1

2		감리단 보고내용

○ 장암지하차도 공사시 발생되는 사토를 당초 설계된 사토장(김포매립지)으로 반출하고 있으나『천호대로(광나루역)확장공사』현장에서 토사반입 요청이 있어

○ 남은 사토량(923㎥)은 경제성 및 시공성 측면에서 유리한 인근 현장으로 우선 사토장 위치를 변경, 조치 완료하였음.

- 추진 경위

날 짜	주 요 내 용	비 고
‘15.05.04	- 천호대로 확장공사 현장으로 사토 검토지시	발주처
‘15.05.06	- 천호대로 현장관계자 등 현장 방문답사	천호대로현장 관계자
‘15.05.08	- 당 현장 관계자 천호대로현장 방문 답사	당 현장 관계자

- 사토장 위치 변경 현황

구 분	당 초		변 경	비 고
위 치	김포매립지		천호대로(광나루역) 확장공사 현장
사토수량	7,796㎥ (기 반출)	923㎥	923㎥
운반거리	44.5km		19.6km	(감) 24.9km

- 공사물량(증․감) 대비표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
1.토공
1.05 사토운반
a 토사	(L=44.5km,김포매립지)	m3	8,719	7,796	감 923
b 토사	(L=19.6km, 천호대로 확장공사)	m3	-	923	증 923

- 단가적용

구분

주 요 내 용

비고

협의일자

○ 일  시 : 2015.05.11

○ 참석자 : 공사관리관, 시공사 현장대리인

신규 비목

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 동시행령, 동시행규칙 및 공사계약

일반조건 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 사토장 위치 변경으로 인한 운반비 변경 단가는 최초 계약 공종의 단가

낙찰율을 적용하여 산출

* 공종낙찰율 : 41.012%

○ 운반단가 검토 및 적용단가

구 분	최 초 (공종낙찰율:41.012%)	운반단가 비교
		1 안 (공종낙찰율:41.012%)	2 안 (전체낙찰율:73.29%)
산출가	19,443원	10,221원	10,221원
운반거리	44.5km	19.6km	19.6km
운반단가	7,974원	4,192원	7,491원
요 청 안		◎

기존 비목

○ 계약단가 적용

- 공사비(증․감) 대비표

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
1. 토 공	69,525	66,035	감 3,490
직접공사비	69,525	66,035	감 3,490
제 경 비	13,357	12,687	감 670
부가가치세	8,288	7,872	감 416
도 급 액	91,170	86,594	감 4,576

3		조치계획

○ 장암지하차도 공사시 발생되는 사토량(923㎥)을 당초 설계되어 있는 사토장(김포매립지)으로 반출할 계획이었으나,

○ 천호대로(광나루역)확장공사 인근 현장에서 토사반입을 요청함에 따라 사토장 위치 변경이 공사비 절감 및 원활한 공사추진에 유리하다는 감리단 검토의견이 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙  임 : 1. 감리단 검토의견서  1부.

2. 사토장 운반거리(당초, 변경) 위치도  1부.  끝.