삼성-동탄 1공구 위․수탁구간

공정계획 검토회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일  시 : 2018. 6. 15.(금) 10:30~11:30

○ 장  소 : 도시철도국 10층 회의실

○ 참석자 : 15명

- (서 울 시) 도시철도계획부장, 영동대로복합개발과장, 건축계획과장

- (철도공단) ***(토목설계처) /- (동부링)***, ***

- (용 역 사) ***********(유신)/***(공간)/***(태조)

□ 회의사진

□ 삼성-동탄 1공구 현황(`18.8 설계준공 예정)

□ 회의결과 주요내용

(한국철도시설공단)

○ 삼성-동탄 1공구 위수탁구간(746m) 터널공사 공사기간은 약 22개월이 소요되며, 작업구는 영동대로 지하공간 복합개발 구간의 환기구를 활용하는 것으로 검토함(한국철도시설공단)

○ 사유지 통과구간 및 양재천 통과구간은 무진동, 강관다단 그라우팅 등 안전을 고려하여 설계하였음(한국철도시설공단)

(도시철도계획부장 요청사항)

○ 위․수탁 구간 터널굴착 시 영동대로 지하공간 복합개발 구간내의 환기구를 활용하는 것은 공정계획 상 상당한 시일이 소요될 것으로 예상됨

○ 사유지 하부(건물 직하부) 통과 부분은 안전 등을 위하여 설계도서를 충분히 검토 후 보완요청 시 반영 협조

○ 설계 진행 중에 있는 관련 설계도면 등 자료 신속히 협조요청 최종 서울시 의견 수렴 후, 준공협조 요청

※ 한국철도시설공단 : 관련도면 협조요청하겠음.

□ 향후계획

○ 삼성-동탄 1공구 위 수탁 구간 실시설계도서 인수 검토 후 공정계획 검토 재협의 예정. 끝.