-동부간선도로 확장공사 (2공구)-

상계교하부 교각보호공 시공 협의안

2014. 10

도시기반시설본부

-동부간선도로 확장공사 (2공구)-

상계교 하부 교각보호공 시공협의안

1		공사개요

□ 공사위치 :  도봉구 상계교 하부(STA 3+961~3+991)

□ 공사개요 :

○도봉지하차도 설치 : L=1900m(BOX구간: 1,570m, U-TYPE: 330m)

※도봉지하차도 시공관련 상계교 하부 통과

□ 공사기간예정기간 : 2014.10. ~ 2015.05(8개월)

2		관련도면

위치도
평면도

3		기존교각 보강 계획(안)

□ 쉬트파일 배면 기존교각 보강그라우팅 실시 ( P-1, P2-3 )

○ 기존교각 전면부에 보강그라팅을 실시하여 시공중 (H-PILE천공, S/P항타) 배변지반 교란 및 지반의 공극등을 밀실하게 채워

버팀보의 응력이 지반에 잘 전달될 수 있도록 보강시행 계획임.

단면도	A - A'	B - B'

□ 쉬트파일 및 H-파일인발시 상계교 안전을 위한 형강류 매몰

○ 도봉지하차도 구조물시공 완료후 P-1,P2-3 교각의 안전성 확보를

위해 그라우팅 보강구간은 형강류를 매몰처리 계획임

※강재 인발시 진동 및 충격등으로부터 교각기초 보호

평면도

□ 상계교 계측관리 시행

○ 가시설의 안전성을 확인하기 위해 지중경사계, 지하수위계,응력계

단면도	A - A'	B - B'

하중계를 설치하고 계측관리를 통해 가설의 안전성을 확인.

□ 공사중 슬라브 충돌 방지 방안

○ 공사중 슬라브 형하공간 제한 시설물 설치하여 공사를 시행

□ 상계교 슬라브 균열점검 및 합동점검 실시

4		공사추진계획

□ ´14.10월 : 가도 및 축도공사

□ ´14.10월~12월 : 쉬트파일 및 H-파일 항타

□ ´14.12월~15.01월 : 토공 및 가시설공사

□ ´15.02월~15년5월 : 구조물공사 및 복구공사

※ 상계교 교각보호공 협의 회의록 별첨 1부