문서번호	토목부-5108
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
협조

“응봉교 확장 및 성능개선공사”

상부구조물 분리시공 정산 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

(토  목  부)

상부구조물 분리시공 정산 검토보고

【 응봉교 확장 및 성능개선 공사 】

시점부 신설교량을 단계별 교통처리계획에 의거 교통 우회(왕복 4차로 유지)하기 위해 슬래브(캔틸레버부)를 분리 시공함에 따라 시행한 단면보수 등에 대하여 정산 결과를 보고드림

관련근거

○ 응봉감 제2015-058호(2015. 3.10.) : 실정보고

(왕십리방향 분리시공에 다른 내구성 확보방안)

공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 공사

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동(기존 응봉교 구간)

○ 공사규모 : 응봉교 확장 및 성능개선

- 확장폭 : 왕복 4차로 → 6차로, 연장 633m

- 성능개선 : DB18 → DB24

○ 공사기간 : 2008.10. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 738억원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜건화엔지니어링

○ 설 계 사 : 제일엔지니어링

감리 실정보고 내용

○ 단계별 교통처리계획에 따라 왕십리 방향 1차 시공한 구간에 차량 공용후 2차 시공함에 따라 진동 및 하자발생 방지를 위해 시공이음부 단면보수 필요(압축강도 400kg/㎠ 이상의 몰탈 충진)

- 시공이음부 단면보수 및 아스팔트 포장 절단(폐기물 처리)

○ 단면도(캔틸레버부 분리시공)

1차

2차

신설교량

기존교량

1차가설교량

- 개략공사비

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
시설비	도급공사비	-	16,720	16,720
	관급자재비	4,951	5,251	300
	폐기물처리비	-	68	68
	소 계	4,951	22,039	(증) 17,088

조치의견

○ 상기 감리의견과 같이 단계별 교통처리계획에 따라 상부구조물을 분리시공(1차, 2차)함에 따라 신설교량의 내구성 증진(품질확보)을 위해 시공이음부를 보강(단면처리)한 것이므로 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 실정보고서 사본 1부.  끝.