설계변경 요약서 (총괄 1회)

(단위 : 천원)

공사비 증․감 현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	158,496,059	164,006,000	증 5,509,941	물가변동(1회) ES (3.08%) (증 4,541,018천원), 실정보고 7건 (증 968,923천원)
관급자재비	50,057,000	50,057,000	-
이전비	-	7,000,000	증 7,000,000
보상비	3,100,000	3,100,000	-
총공사비	211,653,059	224,163,000	증 12,509,941

설계변경 내역

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 (ES/1회 : 3.08%) : 증 4,541,018천원

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1. 물가변동(1회) ES	-	-	3.08%	4,541,018	3.08%	증 4,541,018

□ 실정보고(7건) : 증 968,923천원

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1. 강교조립장 접안시설 보강설치	Sheet Pile 3,000m	212,939	Sheet Pile 3,440m Tie-cable 33공	381,896	Sheet Pile 440m 추가 Tie-cable 33공 추가	증 168,957
2. 북단IC 안전시설 및 진입로설치		-	방음휀스 976m 이미지sheet 722㎡ 진입로개설 1,968㎡	407,579	방음휀스 976m 추가 이미지sheet 722㎡ 추가 진입로개설 1,968㎡ 추가	증 407,579
3. P13, P14 강재우물통 규격변경	P13 H=7.0m P14 H=4.5m P14 H=6.0m	861,861	수상구간 지반 변동으로 인한 높이조정 P13 H=8.0m P14 H=8.0m P14 H=8.0m	904,116	수상구간 지반 변동으로 인한 높이조정 P13 H=1.0m 추가 P14 H=3.0m 추가 P14 H=2.0m 추가	증 42,255
4. 남산물길조성사업 탄성포장공사		-	탄성포장칩 600㎡ 엠보싱 780㎡ 탑코팅 4,770㎡	190,000	탄성포장칩 600㎡ 추가 엠보싱 780㎡ 추가 탑코팅 4,770㎡ 추가	증 190,000
5. 북단IC 하부 수목이식 및 시설물 이설		-	교목 52주 관목 5,630주	160,132	교목 52주 추가 관목 5,630주 추가	증 160,132
6. 주탑(P11) 이중 가물막이 가시설 변경	수중 Tie-cable 2단 Sheet pile(L=15.7m)	907,306	수상 Tie-cable 1단 수중 Tie-cable 1단 Sheet pile(L=16.3m)	907,306		-	위치변경
7. 관급자재(레미콘) 규격변경	25-35-18(수중) 2,462㎥ 25-35-15 5,558㎥ 25-30-15 13,483㎥	2,884,486	25-35-18(수중) 4,617㎥ 25-35-15 0㎥ 25-30-15 16,886㎥	2,884,486		-	규격변경
합 계		4,866,592		5,835,515		증 968,923

설계변경 요약서 (총괄 2회)

(단위 : 천원)

공사비 증․감 현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	164,006,000	170,391,000	증 6,385,000	물가변동 증5,014,990천원, 실정보고 11건증1,370,010천원
관급자재비	50,057,000	49,454,000	감 603,000	주탑공 증816,218천원 보호공 감1,419,218천원
이전비	7,000,000	7,000,000	-
보상비	3,100,000	3,100,000	-
총공사비	224,163,000	229,945,000	증 5,782,000

설계변경 내역

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 (ES/2회 : 3.77%) : 증 5,014,990천원

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1. 물가변동(2회) ES	-	-	3.77%	5,014,990	3.77%	증 5,014,990

□ 실정보고(11건) : 증 1,351,104천원

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1. 주탑(P11) 우물통기초 물량내역 오류분 변경	레미콘 8,395㎥	350,667	레미콘 19,331㎥	798,124	레미콘 증10,936㎥	증447,457
2. 주탑(P11) 가물막이 Sheet Pile 상단 증고	Sheet Pile 704ton	365,609	Sheet Pile 735ton	381,632	Sheet Pile 증31ton	증16,023
3. 주탑(P11) 가물막이 (내측) 모래채움	내부모래채움 6,812㎥	212,020	내부모래채움 9,960㎥	315,713	내부모래채움 증3,148㎥	증103,693
4. 주탑(P11) 가물막이 공사중 계측	-	-	지중경사계 4개소 지하수위계 4개소	28,289	지중경사계 증4개소 지하수위계 증4개소	증28,289
5. 강교조립장 기초지반 보강 및 수상부 준설	토사준설 16,016㎥	151,442	토사준설 37,430㎥ 지반보강 1식	679,217	토사준설 증21,414㎥ 지반보강 증1식	증527,775
6. 주탑(P11)가물막이 외벽 하단부 세굴 보강방안	-	-	톤마대+철망 144개	24,623	톤마대+철망 증144개	증24,623
7. 폭우로 인한 침수 피해 긴급복구	-	-	주탑(P11)가물막이 3회 강교조립장 2회	95,910	주탑(P11)가물막이 증3회 강교조립장 증2회	증95,910
8. 우면산 폭우인한 긴급수해복구 작업	-	-	장비 508대 인원 83명	360,000	장비 증508대 인원 증83명	증360,000
9. 분류하수관 보호공 변경	강관말뚝 42,023m	17,759,800	강관말뚝 2,867m 복합말뚝 36,729m	17,135,000	강관말뚝 감39,156m 복합말뚝 증36,729m	감624,800
10.수상운반거리 변경	1.8km	15,763,000	가양대교북단 3.2km 양화대교남단 1.3km	16,224,000	가양대교북단 증1.4km 양화대교남단 증0.5km	증461,000
11.기타(차량비)등	업무차량관리 66개월 품질시험 유류 10L/일	306,349	업무차량관리 12개월 품질시험 유류 8L/일	236,389	업무차량관리 감54개월 품질시험 유류 감2L/일	감69,960
합 계		34,908,887		36,278,897		증1,370,010

설계변경 요약서 (총괄 3회)

(단위:천원)

(단위 : 천원)

공사비 증․감 현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	170,391,000	171,022,000	증 631,000	실정보고 7건 증631,000천원
관급자재비	49,454,000	48,968,000	감 486,000	우물통패턴변경 감547,930천원 우물통연장변경 증61,930천원
이전비	7,000,000	7,000,000	-
보상비	3,100,000	3,100,000	-
총공사비	229,945,000	230,090,000	증 145,000

설계변경 내역

□ 실정보고(7건) : 증 631,000천원                                             (단위:천원)

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1. 남단IC(Ramp-A) 우물통 가이드프레임(3기)누락	가이드프레임 1기	10,941	가이드프레임 4기	43,765	가이드프레임 증3기	증32,824
2. 축중기 설치	-	-	축중기 설치 1식	12,700	축중기 설치 증1식	증12,700
3. 세굴방지공 물량내역 오류분 반영	토사준설37,783㎥ 사석채움43,835㎥ 피복석고르기12,258㎡	4,774,390	토사준설44,741㎥ 사석채움37,976㎥ 피복석고르기15,051㎡	4,683,002	토사준설 증6,958㎥ 사석채움 감5,859㎥ 피복석고르기 증2,793㎡	감91,388
4. 오염수 처리	-	-	오염수처리시설 1식	218,000	오염수처리시설 증1식	증218,000
5. 북단IC(Ramp-B,C) 수목이식 실정보고	-	-	교목이식 596주 관목이식 16,396주 수목제거 7,850주	730,000	교목이식 증596주 관목이식 증16,396주 수목제거 증7,850주	증730,000
6. 분류하수관 실적공사비 적용 변경	실적공사비 100%	19,737,900	실적공사비 82.004%	19,590,900	실적공사비 감17.996%	감147,000
7. 암선변경에 따른 우물통 연장 및 수량 변경	토사굴착20,187㎥ 풍화암굴착15,211㎥ 연암굴착3,365㎥	18,126,700	토사굴착21,305㎥ 풍화암굴착15,337㎥ 연암굴착3,365㎥	18,002,564	토사굴착 증1,118㎥ 풍화암굴착 증126㎥ 연암굴착 0㎥	감124,136
합 계		42,649,931		43,280,931		증631,000

(단위 : 천원)

설계변경 요약서 (총괄 4회)

(단위 : 천원)

공사비 증․감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	171,022,000	176,063,000	증 5,041,000	물가변동 증5,414,300천원 실정보고 15건 감373,300천원
관급자재비	48,968,000	49,115,900	증 147,900	우물통연장변경 증22,884천원 분류하수관보호공 증94,016천원 지장물이설 증31,000천원
총공사비	219,990,000	225,178,900	증 5,188,900

설계변경 내역

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(ES/3회 : 3.84%) : 증 5,414,300천원

(단위:천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1. 물가변동(3회) ES			3.84%	5,414,300	3.84%	증5,414,300

□ 실정보고(15건) : 감 373,300천원

(단위 : 천원)

(단위:천원)

구 분	당 초		변 경		증 감		비 고
	주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
1.북단IC 분류하수관 보호공변경 (말뚝길이축소,역T형거더 길이증가)	말뚝길이 34.7M 역T형거더 13.8M	17,135,000	말뚝길이 25.1M 역T형거더 14.8M	14,780,956	말뚝길이 감9.6M 역T형거더 증1.0M	감2,354,044
2.북단IC 교통안전시설물 설치	교통안전시설물 1식	390,500	교통안전시설물 1식 휀스설치 1식	1,127,000	교통안전시설물 증1식 휀스설치 1식	증736,500
3.우물통기초 실정보고(암정산외)	굴착 40,008M3 굴착토 운반 55,560M3	4,398,200	굴착 40,008M3 굴착토운반 67,982M3	4,950,500	굴착 – M3 굴착토운반 증 12,422M3	증552,300
4.북단IC 지장물이설(토목)			상수도 및 관개용수 이설 1식	550,600	상수도 및 관개용수 이설 증 1식	증550,600
5.가설 사무실 부지임대료 감액	부지임대기간 66개월	466,700	부지임대기간 26개월	183,878	부지임대기간 감40개월	감282,822
6. 암선변경에 따른 우물통 연장 및 수량변경 보고 P14(강북)	우물통연장 34M	435,188	우물통연장 36.5M	550,304	우물통연장 2.5M	증115,116
7.강재가물막이 설치			가물막이 14기	82,147	가물막이 증 14기	증82,147
8.북단IC 수목이식(R-A,D)	수목이식11,266주	95,540	수목이식 2,588주 수목제거 25,214주	174,400	수목이식 감8,678 수목제거 증25,214주	증78,860
9.북단IC 교통안전시설물 추가설치			교통안전시설물 1식	72,000	교통안전시설물 증1식	증72,000
10.북단IC 지장수목 물량변경(R-D)	수목이식 2,588주 수목제거 25,214주	185,600	수목이식 3,226주 수목제거 25,071주	220,900	수목이식 증638주 수목제거 감143주	증35,300
11.오탁방지막 폐기물처리(폐합성수지)			폐합성수지 499M3	19,349	폐합성수지 증499M3	증19,349
12.북단IC 무인단속카메라 이설			무인단속카메라 1개소	16,500	무인단속카메라 증1개소	증16,500
13.북단IC 수목이식(R-B,C)	운반거리 10KM	35,800	운반거리 2.9KM	19,700	운반거리 감 7.1KM	감16,100
14.임목폐기물 처리비 반영			임목폐기물 처리 288TON	10,994	임목폐기물 처리 증288TON	증10,994
15.세륜.세차시설 이동설치			세륜.세차시설이동 1개소	10,000	세륜.세차시설이동 증1개소	증10,000
합 계		23,142,528		22,769,228		감373,300

(단위 : 천원)

설계변경 요약서 (총괄 5회)

(단위 : 천원)

공사비 증․감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	232,178,900	233,290,000	증 1,111,100
도 급 비	176,063,000	176,826,000	증 763,000	실정보고 13건 증763,000천원
관급비	49,115,900	49,464,000	증 348,100	수상(P11,P13)콘크리트,철근누락외 4건 증348,100천원
이전비	7,000,000	7,000,000	-

설계변경 내역

□ 실정보고(13건) : 증 763,000천원

(단위 : 천원)

(단위:천원)

구 분		당 초		변 경		증 감		비 고
		주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
변 경 내 역 (A)	1.수방대비 계류시설 반영			앵커설치 4set	315,088	앵커설치 증4set	증315,088
	2.항로표지(등부표)설치			등부표설치 4기 (법적예비품1기)	490,000	등부표설치 증4기 (법적예비품1기)	증490,000
	3.전구간 육상구조물 확인보링 시행	확인보링14개소	86,820	확인보링55개소	341,100	확인보링41개소	증254,280
	4.D구간 지하 미확인 지장물 조사			SBH 가설흙막이 공원,강변북로 1식	64,723	SBH 가설흙막이 공원,강변북로 증1식	증64,723
	5.북단 상수도 이설공사 변경	상수관로1,370m 관개용수363m	497,600	상수관로1,394m 관개용수430m 기타 1식	672,492	상수관로 증24m 관개용수 증67m 기타 증1식	증174,892
	6.북단IC 난지물재생센터 주변 EGI펜스 설치			EGI펜스315m	41,980	EGI펜스 증315m	증41,980
	7.북단IC C,D램프 재설계	기보강구간 철거후 보호공 33m(말뚝등)	893,900	기보강구간 처리 33m R-D(P2)변경 1개소 양방향재하시험 1회	542,948	기보강구간 보호공 감33m R-D(P2)변경 증1개소 양방향재하시험 증1회	감350,952
	8.두부보강 변경	볼트조립식두부보강 1,409공	460,000	일체식두부보강 1,409공	522,000	일체식두부보강 증1,409공	증62,000
	9.북단IC 매립폐기물처리	사토처리 88,847㎥	5,375,000	매립폐기물처리 91,153t(재활용17,100t)	4,728,600	매립폐기물처리 감 91,153t(재활용17,100t)	감646,400
	10.수상(P11,P13)누락분 반영	레미콘 3,165㎥ 철근 437,782ton	381,900	레미콘 3,421㎥ 철근 655.075ton	534,800	레미콘 증256㎥ 철근 증217,293ton	증152,900
	11.분류하수관 F구간 선형변경	L=34m 레미콘 10,889㎥ 철근 1,228ton	5,564,700	L=50m 레미콘 11,226㎥ 철근 1,293ton	5,881,889	L= 증 16m 레미콘 337㎥ 철근 65ton	증317,189
	12.북단IC 강변북로 가시설 설치			Sheet Pile 140m	105,500	Sheet Pile 증140m	증105,500
	13.분류하수관 보호공 말뚝공사 변경	복합말뚝 1,060공 강관말뚝 1,958m	7,937,400	복합말뚝 1,005공 강변북로1,910m	7,719,200	복합말뚝 감55공 강변북로 감48m	감218,200
	소 계		21,197,320		21,960,320		증763,000
미변경내역(B)			154,865,680		154,865,680		-
합 계(A+B)			176,063,000		176,826,000		증763,000

설계변경 요약서 (총괄 6회)

(단위 : 천원)

공사비 증․감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	233,290,000	233,671,918	증 381,918
도 급 비	176,826,000	176,766,000	감 60,000	실정보고 12건 감60,000천원
관급비	49,464,000	49,905,918	증 441,918	램프F신설외 6건 증441,918천원
이전비	7,000,000	7,000,000	-

설계변경 내역

□ 실정보고(12건) : 감 60,000천원

(단위 : 천원)

(단위:천원)

구 분		당 초		변 경		증 감		비 고
		주요내역	금 액	주요내역	금 액	주요내역	금 액
변 경 내 역 (A)	1.북단 지장물이설(전기분야)	-	-	전기공사 1식	409,900	전기공사 증1식	증409,900
	2.차량용 방호울타리 및 난간변경	방호책외1식	6,859,700	방호책외 규격변경1식	6,832,900	방호책외 규격변경 1식	감26,800
	3.북단IC 교통소통대책변경으로 인한 램프F 신설	-	-	연장 227m 폭 5.75m	111,100	연장 증227m, 폭 증5.75m	증111,100
	4.북단IC 램프F신설로 인한 보강토옹벽 반영	연장 227m 보강토옹벽누락	111,100	연장 227m 보강토옹벽246㎡	181,450	연장 227m 보강토옹벽 증246㎡	증70,350
	5.양화대교 P13 수상구간 조사 및 하상잔재물 처리	-	-	하상잔재물처리1식	59,813	하상잔재물처리 증1식	증59,813
	6.북단IC 램프F신설로 인한 지장수목이식(1차)	-	-	단풍나무 7주	2,610	단풍나무 증7주	증2,610
	7.북단IC 램프F신설로 인한 지장수목이식(2차)	-	-	교목 115주 관목 1,300주	22,600	교목 증115주 관목 증1,300주	증22,600
	8.북단IC 횡단배수관 변경설계	-	-	강관및흄관379m 맨홀및집수정14EA	142,700	강관및흄관 증379m 맨홀및집수정 증14EA	증142,700
	9.북단IC L형옹벽 및 보강토옹벽 뒷채움 잡석 설계누락분 반영	보강토옹벽 968㎡ 콘크리트누락 뒷채움잡석 누락	254,800	보강토옹벽 968㎡ 콘크리트 557㎥ 뒷채움잡석 688㎥	333,050	보강토옹벽 증없음 콘크리트 증557㎥ 뒷채움잡석 증688㎥	증78,250
	10.북단IC D구간 지하지장물 (강관D1500)구간 대안공법	말뚝107공 역T형거더60EA 콘크리트504㎥	1,419,500	말뚝107공 역T형거더60EA 콘크리트591㎥	1,458,400	말뚝 증없음 역T형거더 증없음 콘크리트591㎥	증38,900
	11.북단IC 임시가설도로 (램프A,B)반영	교통안전시설물1식	476,800	교통안전시설물1식 램프A,B포장 600m	489,549	교통안전시설물 증1식 램프A,B포장 증600m	증12,749
	12.북단 매립폐기물 처리방법 변경	폐기물처리 91,153ton	4,634,700	폐기물처리 113,721ton	3,652,528	폐기물처리 증22,568ton	감982,172
	소 계		13,756,600		13,696,600		감60,000
미변경내역(B)			163,069,400		163,069,400		-
합 계(A+B)			176,826,000		176,766,000		감60,000