업무연락전

지시번호

SMIH-14-20108

연번(문서번호)

SMIH-14-20108

지시일자

작성일자

2014-03-19

지 시 자

이한규

처리기한

제    목

상주감리(조경) 투입기간 연장 승인 통보

내    용

1. 방재시설부-207(2014. 3.18.)호와 관련임.

2. 우리 본부에서 시행중에 있는 “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 외 1개소 전면 책임감리용역”과 관련하여 조경감리원 투입기간을 아래와 같이 승인하오니 감리업무에 철저를기하시기 바랍니다.

가. 아  래

구 분	직무분야	성명	당초 투입기간	연장 투입기간	비고
상주감리	조경	이의헌 (동명기술공단)	‘14.3.10~6.20 (기간중 1개월 배치계획됨)	‘14.3.20~6.20 (3개월)	2개월연장

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부