2. 새로운 광화문 광장 조성 방안 자료

□ 추진배경

○ 2009년 광화문광장 개장 이후 “거대한 중앙분리대”, “역사성 미흡”이 라는 사회적 논란 지속

○ 역사·도시공간·문화·교통 등 전문가로 운영한 광화문포럼 제안에 대한 타당성, 기술적 실현가능성, 추진방안 등에 대한 면밀한 검토 필요

□ 추진경위

○ 2016.9.~2017. 6. 광화문포럼 구성 및 운영(전문가 56인 그룹)

- 역사, 도시계획, 교통 등 최고 전문가와 10개월간 20회 이상 포럼 개최

○ 2017. 4. 시민 1,000명 광화문광장 시민의식 변화 설문조사

○ 2017. 5. 시민참여단 100명 구성, 워크숍 통한 시민 의견 수렴

○ 2017. 5.31. 광화문광장 시민대토론회를 통한 포럼결과 발표

○ 2017. 8.24. 기본계획용역 계약 및 착수

□ 추진방향

○ 국가중심축 조성 및 광화문 일대 역사성 회복

- ‘북악~경복궁~광화문~숭례문’으로 연결되는 국가중심축 조성

- ‘광화문 월대’ 복원 및 ‘해태상’ 이전 등 훼손된 역사성 회복

○ 시민이 누리는 행복한 문화 공간 조성

- 음악 공연, 축제 등 거리 퍼포먼스의 무대 공간 운영

- 시민들의 일상적, 자발적인 활동 등 시민문화 발현 공간화

○ 보행과 사람 중심의 공간 조성

- 교통섬이 아닌 전면 보행광장으로의 확대 개편, 광장과 경복궁 연결 검토

- 동서축 간선(사직~율곡로) 기능 유지 및 광역버스 등 대중교통 접근성 유지

□ 추진 계획

○ 2017. 8. 24.	종합기본계획 용역 착수

○ 2017. 8. ~ 2018.1.	기술적 타당성 검토 및 기본계획 수립

○ 2018. 2.	기본계획 용역 완료

5. 세운상가 재생사업 현황 자료

선제적 공공사업(데크 정비 등) 시행 및 활성화 프로그램 운영을 통해낙후된 세운상가군 및 주변지역에 대한 경제·사회·문화적 활력 회복

1		사 업 개 요

□ 사업개요

○ 1단계 구간 : 종묘~세운광장∼ 세운상가군(세운․청계․대림상가)

- 규  모 : L=575m, 폭 50~22m

- 사업비 : 535억원 / 사업기간 : `15.2.~`17.9

○ 2단계 구간 : 세운상가군(삼풍․PJ․인현․진양상가)~필동~남산

- 규    모 : 세운상가군 L=575m, 폭 50~22m, 퇴계로~남산 구간 L=1,200m

- 사 업 비 : 438억원 / 사업기간 : `17.1.~`20.12.

□ 사업내용

○ [보행재생] 종묘 ~ 남산을 연결하는 입체 보행네트워크 단계별 구축

- 1단계  구간 `15. 6월 국제공모당선작 선정, `16. 3월 공사 착공하여 `17. 9월 준공

- 2단계 구간 `17. 6월 국제공모당선작 선정, `18. 3월 공사 착공, `20. 4월 준공

▸ 국제설계공모(`17.3.~6.) ➠ 기본 및 실시설계(`17.7.~`18.2.) ➠ 공사(`18~20년)

○ [산업재생] 4차 산업혁명을 이끌 창의제조산업 혁신처 조성

- 창의제조산업의 플랫폼 세운 메이커스 큐브 운영(17개 기업 입주)

- 전력거점 기반으로 전략기관과 협력, 스타트업 인큐베이팅

- 서울옥상(전망·휴식), 세운중정(전시·이벤트), 세운광장(복합문화) 등 지역 명소화

○ [공동체재생] 거버넌스 운영 등 주민 주도 지역재생 기반 마련

- (주체형성) 세운시민협의회 운영, 수리협동조합 설립, 기술장인 선정

- (역량강화) 시민대학, 상인대학, 손끝기술학교 등 세운상가는 대학 운영

- (협동사업) 산업․문화예술 활성화 주민공모사업, 상가군 시설개선 지원

2		예산 및 내역 (연도별 예·결산)

구분	14년도		15년도		16년도		17년도
	편성	집행	편성	집행	편성	집행	편성	예산 현액
세운상가 (1단계)	240	217	4,066	4,066	20,230	7,160	28,994	42,015
세운상가 (2단계)	-	-	-	-	-	-	2,177	2,177

3		운 영 실 적

○ 세운상가군 활성화(재생) 종합계획 수립 발표(기자설명회 '15.2.24.)

○ 1단계구간 공공공간 설계 국제공모 당선작 발표(기자설명회 `15. 6.16.)

○ 초상화 인터뷰(270회) 등을 통한 시정 신뢰도 회복 노력('15)

○ 사전 Boom up, 공감대 형성을 위한 다양한 주민 참여 프로그램 운영(`15)

- UCC 공모전(`14.12.~`15.3.), 국제 컨퍼런스(3.12.~3.15.), 심포지엄(4.24.)

- 대림상가 패션쇼(10.16.), 을지로 라이트웨이(11.13.~11.21.), 상상력발전소(11.13.~11.27.)

○ 다시세운 프로젝트 착수 대외 발표('16.1.28.)

○ 세운상가 젠트리피케이션 방지 상생협약 체결('16.1.28.)

○ 1단계구간 공공선도사업 착공('16.3.) / 2단계구간 기본구상 완료('16.12.)

○ 전략기관인 씨즈, 팹랩, 시립대 시티캠퍼스 유치협약('16.11.)

○ 세운장인과 청년의 콜라보레이션을 통한 세운 self 재생사업 추진(`16)

- 주민공모사업(`16.8.~12.), 세운상가는 대학(`16.8.~12.), 수리수리얍('16.7.)

- 세운리빙랩 시범운영(‘16.9.~12.), 상상력발전소(`16.10.)

○ 전략거점 개소식 및 대외발표(프레스투어, `17.3.2.)

- 전략거점 : 세운 SEcloud, 세운 메이커스 라운지

- 전략기관 : 서울시립대, (사)씨즈, 서울시사회적경제지원센터, (사)팹랩서울

○ 세운 메이커스 큐브 입주자 선정(‘17.5.)

○ 2단계구간 공공공간 설계 국제지명현상설계 공모 당선작 선정('17.6.)

○ 청계상가, 대림상가 젠트리피케이션 방지 상생협약 체결('17.8.22.)

○ 대규모 프렌차이드 업종 제한을 위한 상생협약 ('17.8.22.)

○ 장인, 입주기업 등  자원을 활용 현장중심 교육 서울 로봇고 MOU체결(‘17.9.11.)

- 서울로봇고와 MOU체결 / 방과 후 및 계절학기 수업 진행(‘17.10.~)

- 장인·입주기업을 통한 실질적 기술 습득 교육을 통환 인재양성

○ 장인, 입주기업 등  자원을 활용 현장중심 교육 서울 교육청 MOU체결(‘17.9.19.)

- 세운상가를 기반으로 한 기술(현장) 중심교육 확대 및 행정적 협력

- 메이커 문화 정착 등 저변확대를 위해 초·중 대상으로 영메이커 교육 협력

○ 다시세운 프로젝트 1단계(종묘~세운~청계~대림상가) 개장(‘17.9.19.)

- 다시세운광장, 공중보행교 등 종묘~을지로 구간 입체보행축 조성

4		향후 추진계획

□ 1단계 구간(세운상가~대림상가)

○ 지역 활성화 프로그램 지속 운영(`17.10. ~ )

- 상상력과 손끝 기술이 만나는 “세운 메이커페스티벌”(9.23.)

- 상상력발전소(10월) / 을지로 라이트 웨이(11월) / 빛초롱 축제 (11월)

○ 조성이 완료된 거점공간 안정적 운영(`17.10. ~)

- 창의제조산업의 플랫폼 세운 메이커스 큐브 운영(17개 기업 입주)

- 전력거점 기반으로 전략기관과 협력, 스타트업 인큐베이팅 지원

- 서울옥상(전망·휴식), 세운중정(전시·이벤트), 세운광장(복합문화) 운영

○ 거버넌스 운영 등 주민 주도 지역재생 지속추진

- 시민대학, 상인대학, 손끝기술학교 등 주민(상인)역량 프로그램 운영

- 산업․문화예술 활성화 주민공모사업, 상가군 시설개선 지원 등

□ 2단계 구간(삼풍상가~진양상가)

○ 공공공간 조성공사 기본 및 실시설계 완료(`18.2.)

○ 공공공간 조성공사 착공 및 준공(`18.3. ~ `20.4.)

※ 다시·세운 프로젝트 완성을 위해서는 2단계 구간 반드시 시행 필요