2		공항펌프장 일대 침수해소(마곡 1,2)

강서구 마곡동 일대 상습 침수를 해소하기 위하여 마곡 1,2 빗물펌프장을 신설 및 재설치하여 수해 예방 추진

□ 사업개요

○  위    치 : 서울시 강서구 마곡동 일원

○  기    간 : 2012. 12. ~ 2015. 12.

○  규    모 : 빗물펌프장 신설(2,600㎥/min), 재설치(4,080㎥/min)

○  사업내용

- 마곡2펌프장(신설)   : 모터펌프 1,200Hp × 5대, 600Hp × 2대

토출암거 114.4m, 저류지 용량 195,000㎥

- 마곡1펌프장(재설치) : 모터펌프 1,770Hp × 7대, 930Hp × 2대

토출암거 6.0m,    유수지 용량 300,000㎥

○  총사업비 : 44,223백만원(이설비, 지급자재비 포함)

○ 추진부서 : SH공사

□ 추진현황(전체 공정률 : 63%, 2펌프장 공정률 : 93%)

○ ’12. 12. : 공사 착공

○ ’13. 12. : 2펌프장 토목구조물 완료

○ ’14.  6. : 신설저류지 터파기 완료

○ ’14. 12. : 기존 구조물 철거

○ ’15. 03. : 2펌프장 펌프 설치 완료

○ ’15. 12. : 1펌프장 준공(예정)

□  기대효과

○ 마곡동 일대 침수위험 해소 및 노후시설물 정비

작 성 자	하천관리과	과장 : 이진용(☎2133-3860)	치수설비팀장 : 김중영(3876)	담당 : 김재웅(3878)

□  위치도

□  공사중 사진

3		자치구 안전치수과장 간담회 개최

‘15년도 풍수해 대비 시, 자치구 상호간 효율적인 사전 재난예방,대비, 대응, 복구를 위해 자치구 수방담당 과장 간담회를 개최 수해안전대책 추진 철저

□ 간담회 개요

○ 일 시 : ’15. 2. 26.(목) 10:00~11:00

○ 장 소 : 서울안전통합상황실(충무기밀실)

○ 참석대상 : 물관리정책관, 물재생계획과장, 하천관리과장

- 25개 자치구 수방담당 과장

○ 회의주제 : ’15년도 수해안전대책 추진방향 및 자치구 협조사항

○ 회의진행 : 자치구 협조사항 설명, 자치구 의견청취, 토론

○ 자치구 협조사항

- 주요 침수취약지역(27개소) ’15년 대책 수립 및 이행 철저

※ 권역별 자치구 도시안전본부장 주관 회의 예정(3월~4월)

- 방재시설 및 수해취약시설 우기 전 점검․정비 등 수방대비 사항

- 방재시설 확충사업은 우기철 활용 가능토록 집중추진

- 맞춤형 행동매뉴얼 작성 활용

- 비상 시 담당국장 정위치 등 재난대응 강화

- 공무원 돌봄서비스, 현장기동반 연락체계 재정비 및 운영

- 하수관거, 빗물받이 준설 추진 철저

- 소규모 침수방지시설(물막이판 등) 설치 추진

- 시민홍보 참여 활성화 및 재난발생 시 복구인력 배치 등 대응사항 등

- 자치구 건의사항 수렴 및 토론

작 성 자	물재생계획과장 :하상문☎2133-3780 하수관리팀장 : 김재승☎3789 담당 : 배원영☎3790 하천관리과장 :이진용☎2133-3860 치수계획팀장 : 손경철☎3862 담당 : 진학성☎3863

4		2015 산사태 예방사업 추진계획

산사태 취약지역에 대한 예방사방사업을 주택사면 위주의 집중정비와 친자연적 공사시행으로 우기전 완료 목표

□ 산사태 예방 사방사업

○ 대 상 지 : 남산, 우면산, 관악산 등 310개소

○ 사업내용 : 사방댐 15개소, 사방사업 241개소, 산림내 사면정비 54개소 등

○ 사업기간 : ’14. 10. ~ ’15. 6.(우기전 완료 목표)

○ 총사업비 : 258억원(국비 151, 시비 107)

○ 추진사항 : ’15. 1. 20 : 공사비 1억이상 설계심의 완료(52개소)

실시설계 마무리, 계약심사(일상감사) 후 예산재배정 중

○ 향후계획

- ’15. 2. : 실시설계 완료, 계약심사, 공사발주 및 계약(업체선정)

- ’15. 3. ~  6. : 공사시행 및 준공

- ’15. 2. ~ 12. : ’16년 사방사업 대상지 선정 및 설계 실시

○ ’15년 예방사방사업 개소수 : 310개소 (중구, 용산, 영등포, 송파 : 대상지 없음)

구별	등급별 개소수			구별	등급별 개소수			비고
	계	C	D		계	C	D
계	310	156	154	마포구	8	2	6
종로구	59	36	23	양천구	6	3	3
성동구	6	4	2	강서구	7	7
광진구	5	5		구로구	12	8	4
동대문	3	1	2	금천구	5	2	3
중랑구	3	1	2	동작구	7
성북구	10		10	관악구	31	21	10
강북구	7	2	5	서초구	29	16	13
도봉구	3		3	강남구	8	3	5
노원구	13	5	8	강동구	2	2
은평구	45	15	30	중부사업소	3	2	1
서대문	35	18	17	서울대공원	3	3

○ 중점사항

- 주택 경계사면 위주의 집중정비 : ’14년 50개소 ⇒ ’15년 204개소

- 친자연적 공사시행으로 자연훼손 최소화

작 성 자	산지방재과장 김영수 ☎2133-2171 사면정비팀장 정상모 ☎2184 담당 김계영 ☎ 2186