문서번호	토목부-11406
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

생태육교 등 재설계 비용 반영 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

생태육교 등 재설계 비용 반영 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

생태육교(파형강판) 재설계, 아리수동산 조성, 가재골입구 방음림 조성, 대우아파트 진·출입로 변경에 따라 주민요구사항 반영하여 경비실 이전및 이면도로 종단인하 등 설계도서의 작성비용을 도급내역에 반영을 위하여 검토 보고 드림

관련근거

○ 가재골입구 잔여부지 방음림 조성 요청(민원인 –이○○외 30인)

○ 고덕대우아파트앞 방음벽→방음림조성 검토 요청(고대1604-01호, ‘16. 4. 7.)

○ 제10차 총괄건설정책자문단 자문회의 의견 송부(도로계획과-6709호, ‘16. 5.16.)

○ 생태육교 공사비 분담 협약 체결 추진(토목부-10405호,‘16.5.24.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4차로 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사,  감 리 사 : ㈜한국건설관리공사

추진경위

○ ‘16. 1.12. : 가재골입구 소음민원 조치방안 검토(업무연락전 본부-16-179)

○ ‘16. 1.22. : 아리수 동산 설계서 작성 제출(업무연락전 본부-16-443)

○ ‘16. 3.22. : 제8차 총괄건설정책자문단 자문회의 결과에 따른 파형강판 안전성 확보방안 업무지시(업무연락전 본부-16-2035)

○ ‘16. 4.21. : 대우아파트 방음림 조성 및 출입구 변경 민원사항 검토결과 제출(업무연락전 본부-16-3046)

○ ‘16. 5.18. : 생태육교 안전성 확보방안 제10차 총괄건설정책자문단 자문회의 결과 통보(업무연락전 본부-16-3891)

검 토

○ 고덕시영아파트재건축정비사업조합으로부터 생태육교 1Arch 추가 요구와  제10차 총괄건설정책자문단의 자문회의 결과에 따른 생태육교(파형강판) 재설계 반영

○ 암사정수장앞 약수터 → 아리수동산 변경, 대우아파트 진·출입로 변경에 따른 경비실 이전 설치, 대우아파트 뒷길 이면도로 종단완화 추가 등 설계를 위한 설계용역비 반영 필요

- 설계용역 과업 범위

· 생태육교(파형강판) 관련 재설계(파형강판 규모 축소, RC 박스 콘크리트 추가, 생택육교 상부 목재데크 설치 등)

· 조경공사(아리수동산 공원조성, 가재골입구 잔여지 방음림조성)

· 대우아파트 관련 협의사항 반영(진·출입로 위치변경, 경비실 및 문주, 이면도로 종단완화 추가 등)

설계비 단가 검토

○  ｢엔지니어링사업대가의 기준｣에 의해 산출한 설계용역비 보다 견적가가 적게 들어와 견적가에 협의율(90.57%) 적용시 경제적

- 설계용역업체 견적서 제출 현황

(단위:천원)

견적업체	(주)경화 ENG	(주)네오 기술단	비고
견적가	61,200	67,000	VAT별도
협의 견적가(90.57%)	55,428	-
선 정	○

※ 강제협의율(90.57%) 적용 : ‘계약당사자의 책임없는 사유’에 해당되는 경우 신규비목 계약단가는 계약당사자간에 협의에 의해 결정하고 협의가 이루어지지 않는 경우 공사계약일반조건 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단가 적용.

∴ (강제)협의율(90.57%) = [설계가(100%)+낙찰율(81.143)] / 2

※ ｢엔지니어링사업대가의 기준｣에 의한 설계비 산출

(단위:천원)

공 종	용 역 비	비 고
실시 설계비	61,200	공사비(22.2억원)×해당요율(3.177%)×재설계요율(80%)+도서인쇄비 등
부가 가치세	6,120
총 용역비	67,320

공사비(용역비) 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비고
직접공사비	1식	-	-	0
제 경 비	1식	-	55,428	55,428	설계용역비
공사원가	1식	-	55,428	55,428
부가가치세	1식	-	5,543	5,543
도급공사비	1식	-	60,971	60,971

감리단 검토의견

○ 생태육교(파형강판) 재설계, 아리수동산 조성, 가재골입구 방음림 조성, 대우아파트 진출입로 변경에 따라 주민요구사항을 반영하여 경비실 및 이면도로 등 설계도서의 작성비용을 도급내역에 반영함이 적절하다고 사료됨.

※ ‘공사계약일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경 5.발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 산출내역은 설계도서작성 제반기준에 맞게 작성됨.

조치계획

○ 설계도서 작성 비용 반영을 위하여 감리단에서 실정 보고한 검토의견과 같이 승인하고 증액되는 설계도서 작성비용(60,971천원)에 추후 설계변경소위원회(자문회의) 심의 상정후 결과에 따라 반영하고자 함.

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.