투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	서부이촌동 보행육교 승강기(엘리베이터) 납품연기 요청

1. 서울지방조달청 분할납품요구 및 통지(12-16-2-62224-00)와 관련입니다.

2. 우리과에서 감독하여 설치하고 있는 서부이촌동 엘리베이터 관급자재(물품) 납품기간을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여주시기 바랍니다.

□ 요청내용

- 당초 : 2016년 12월 13일 ~ 2017년 04월 28일

- 변경 : 2016년 12월 13일 ~ 2017년 05월 20일

붙임 : ㈜금영제너럴 납품 연기 공문 1부. 끝.

	기전설비과장
주무관			기전설비과장
협조자
시행	기전설비과-1919	(	2017.5.10.	)	접수	총무과-7662	(	2017.5.10.	)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	대시민공개