붙임1

기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	건 축

건 명	뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역

요청기관명	서울특별시 일자리정책담당관
제출년월일	2018년 8월

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역 ○용 역 비 : 15,000천원 ○용역기간 : 착수일로부터 30일 ○사업규모 : 문정동 테라타워 A동 G10호(건물: 330.9㎡, 토지 66.29㎡) ※ 송파구에서 약30%(100㎡)를 일자리허브 시설 조성예정 ○입찰참가자격(면허 등) : 수의계약 - 건축사법에 의한 건축사업무신고를 한 건축사사무소 등)
자체시행 가능여부	○용역시행 목적 - 다수기업이 입점한 송파구 문정지구내에, 뉴딜일자리사업 참가자를 위한 직무·취창업 교육장, 일자리 정보제공 및 상담공간, 스터디 공간, 기업홍보 및 취업면접 등 청년일자리관련 복합공간으로 조성하고자 설계용역을 추진함 ○추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) - 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5조(추정 가격이 20백만원 이하의 소액 수의계약) - 뉴딜일자리 복합문화공간 조성계획(일자리정책담당관12482, 2018.8.6)호
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함) - 건축 외 구조, 전기, 기계, 소방, 통신 설계 변경 및 내역 작성 등 업무가 포함되어 있어 자체시행 어려움
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부: 미반영 (투자심사결과서, 상위계획 반영내용 첨부) ○2030 서울생활권계획 협의대상 여부 □ 대상, ■ 비대상 ※ 협의대상시 관련부서 의견조회(기술심사담당관 → 생활권계획추진반) ○용역추진경위 - 뉴딜일자리 전용공간 조성관련 조사 결과보고(일자리정책담당관-11714, 2018.7.16) - 뉴딜일자리 복합문화공간 조성계획(일자리정책담당관12482, 2018.8.6)호

과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 구조 안전에 영향이 없도록 건축 외 구조, 전기, 기계, 소방, 통신 설계도서와 내역서를 변경 작성한다. ○과업의 범위 - 변경 설계도서 및 내역서 작성, 관련기관 협의 ○주요 과업내용: 실시설계(변경), 내역 작성
사업추진계획 (절차)	○ ’18. 8. : 기술용역타당성 심사 ○ ’18. 8.~ 9. : 설계용역 시행 ○ ’18.10.~11. : 시공업체 선정·계약체결 후 공사시행 ○ ’18.11. : 공사 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 해당사항 없음 ※ 당해 사업과 유사한 용역사업의 성과품 자료, 인근 지역의 지질조사보고서, 환경영향평가보고서, 교통영향평가보고서 등 활용 가능한 자료를 조사하고 활용계획 수립
리스크관리심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부: 해당사항 없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 해당없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 해당없음
사업의 예상효과	○ 뉴딜일자리의 지역별 거점공간조성을 통해 사업의 안정적 수행 및 참가자의 직무역량, 민간취업율 향상 ○ 문정지구 입주기업과 뉴딜참여자들의 구인·구직 매칭을 통한 중소기업 구인난 및 청년실업문제 해소 기여

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서

2. 용역 대가 산출근거

가. 실비정액가산방식 : 공종(항목)별 등급기술자 투입인원 수 산출근거

나. 각종 적용요율 근거