지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입

□ 총사업기간 : 2016 ~ 2025년(10년 분할 매입)

□ 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비, 개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입, 시설비및부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 2015년도에 도시계획시설(유수지) 사업 실시계획인가를 위한 공람공고, 실시계획 인가고시, 지적현황측량, 토지보상계획 열람공고, 토지 감정평가 등 12월에 관련절차가 완료되고, 토지 소유자인 KBS와 보상협의에 추가 기간이 소요되어 연내 매매계약 체결이 불가하므로 사고이월 하고자 함

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		3,910,555,700
토지보상비	토지보상비 1식	3,910,555,700

확 인 자 :  하천관리과장  이 진 용 (인)

조 사 자 :       시설7급  조 세 호 (인)

지출원인행위 미필 이월명세서(설비)

□ 사 업 명 : 공릉빗물펌프장 증설공사

□ 사업기간 : 2013. 5. 15 ~ 2016. 6. 30

□ 예산과목 : 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 한전 전기시설 분담금

- 상수도 급수공사 납부금

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		42,480,930
일 반	한전 전기시설 분담금(2,000kW)	37,480,930
일 반	상수도 급수공사비 납부금(25mm)	5,000,000

조 사 자 : 공업6급  이 기 철  (인)

공업7급  양 우 창  (인)

확 인 자 : 공업5급  김 창 균  (인)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 진관동 북한산로 하수관개선공사

□ 사업기간 : 2015. 6. 2 ~ 2016. 4. 15

□ 예산과목 : 하수관사업특별회계, 하수시설관리, 하수관로신설개량, 진관동북한산로하수관개선, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 설계변경(우수관거 선형변경 등)에 따른 사업기간 연장에 따른 잔여공사구간 정비 시 지장물에 대한 이설비 필요

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계	하수관개선공사에 따른 이설비	23,422,980
이설비	○ 도시가스 이설비 : 10,500,000원 - 7개소 × 1,500,000만원 = 10,500,000원 ○상수도 이설비 : 7,650,000원 - 9개소 × 850,000원 = 7,650,000원 ○ 통신 이설비 : 2,000,000원 - 2개소 × 1,000,000원 = 2,200,000원 ○ 전기 이설비 : 1,500,000원 - 3개소 × 500,000원 = 1,500,000원 ○ KT 등 기타 이설비 : 1,572,980원	23,422,980

확 인 자 : 은평구 안전치수과  직)시설5급  성명)신기호(인)

조 사 자 : 은평구 안전치수과  직)시설6급  성명)조규영(인)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 상도동 성대시장주변 침수해소공사(3차)

□ 사업기간 : 2015. 2. 2 ~ 2016. 2. 29

□ 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 수방대책 사업, 상도동 성대시장주변 침수해소, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 부족예산(150백만원) 확보 후 설계변경 가능하므로 ‘16년 예산확보시까지 원인행위 미필

- ‘16년 예산편성 후 설계변경 및 집행

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		39,983,380
집행잔액 등	◦ 1식 × 39,983,380 = 39,983,380	39,983.380

확 인 자 : 직) 안전치수과장 성명) 남 궁 용 (인)

조 사 자 : 직) 시설7급      성명) 권 영 배 (인)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량공사

□ 사업기간 : 2015. 4. 21 ~ 2016. 4. 15

□ 예산과목 : 하수관사업특별회계, 하수시설관리, 하수관로신설개량, 반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 도시가스 이설비 선납하였으나 추가 이설 물량 발생하여 2016년 정산 후 추가 납부 예정

- 통신관로 및 맨홀 이설 예정

- 폐기물 운반 및 처리비용을 2016년 서초구 폐기물 처리용역 발주 후 반영 예정

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		74,065,450
이설비	- 도시가스 이설비 추가분 납부 : 15,000,000원 - 통신관로 및 맨홀 이설 : 48,922,180원 - 폐기물 운반 및 처리비용 : 10,143,270원	74,065,450

확 인 자 : 서초구 물관리과  직)시설5 성명) 김장희  (인)

조 사 자 : 서초구 물관리과  직)시설7 성명) 김춘호  (인)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)

□ 사업기간 : `11.11.1~`16.7.31

□ 예산과목 : 시설비(401-01)

□ 지출원인행위 미필사유

- 종합시운전비 : 신규비목 단가협의 중으로 지출원인행위 미필이월

- 간접비 : 최종 준공전 계약상대자와 협의를 거쳐 금액 확정예정

- 이전비 : 인수인계시 유지관리부서 요구사항 대비 반영

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		1,246,214,730
종합시운전	종합시운전 1식 = 353,600,000원	353,600,000
간접비	간접비 청구금액 = 567,994,000원	567,994,000
이전비	유지관리부서 요구사항 대비 토목분야(221,700,730) 및 전기분야(102,920,000) 이전비 반영 = 324,620,730원	324,620,730

확 인 자 :      직)5급      성명) 윤방식 (인)

조 사 자 :      직)6급      성명) 김상용 (인)