문서번호	시설과-565
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
협 조
	총무과장
	주무관
	주무관

서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사 실정검토 보고서(제 1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

『서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사』

실정 검토 보고서(제1차)

『서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사』시행중 시공자가 제출한 실정보고 사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사

□ 공사기간 : 2014. 12. 04 ~ 2015. 02. 02

□ 시 공 자 : ㈜주원공영 대표 김 형 균

□ 도 급 비 : 380,255,097원

□ 주요 공사내용

○ 코끼리 야외 방사장 수동식 출입문 3개소 자동문으로 교체

○ 코끼리 내실 수동식 출입문 7개소 자동문으로 교체

○ 코뿔소 내실 수동식 출입문 6개소 자동문으로 교체

○ 코끼리 훈련벽 4개소(내부 1개소, 외부 3개소)

○ 외부 코끼리 훈련벽 사육사 관리부분 바닥 콘크리트 타설 - 추가

○ 아시아 물소 내실 수도 출입문을 외부에서 개폐가능한 반자동 슬라         이딩 문으로 교체 - 추가

○ 코끼리 체중계량시 사육사 안전을 위한 출입문 설치 - 추가

○ 코끼리 격리실이 관리통로에서 보이도록 일부 창살 교체 - 추가

○ 기타 부대공사 등

2		실정보고 사항검토

□ 공종추가 및 변경사항

(단위 : 천원)

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견	소요예산 (개략금액)
∘ 코끼리 출입문	∘ 아시아코끼리 내실 출입문 형태 변경 (철판문 7.2mm → 원 형강 사선 형태 문으로 변경)	∘ 철판문은 사육사와 교감이 어려움 - 동물복지과-101(‘15.1.9)	-
	∘ 코끼리방사장 출입문 신규설치(W:1800, H:2400)	∘ 코끼리 체중계량시 사육사 안전을 위한 시건장치 용도의 출입문 필요 - 동물복지과-101(‘15.1.9)요청	증 1,071
∘ 콘크리트 공사	∘ 야외 코끼리훈련벽 사육사 관리공간이 흙바닥이어서 우천시 관리가 어려움	∘ 바닥에 레미콘 타설 필요 - 동물복지과-101(‘15.1.9)요청	증 287
	∘ 코끼리방사장 폰드가 계단으로 되어 있어 청소시 전동수레 사용이 불가 함	∘ 계단 일부를 전동수레의 출입이 가능하도록 경사로 설치 요함 - 동물복지과-101(‘15.1.9)요청	증 100
∘ 작업부산물	∘ 옥외 철거되는 반 원형 철제휀스 재 사용	∘ 철거된 반 원형 철제휀스 일부 재사용하고 고재 처리비 정산 - 동물복지과-101(‘15.1.9)요청	증 228
∘ 아시아 물소 출입문	∘ 아시아 물소 내실1과 내실2사이 철문을 사육사가 수동 개폐하는 형태이므로 안전사고 위험 노출	∘ 사육사 안전을 위해 관리통로에서 개폐조작이 가능한 미닫이 문으로 교체 - 동물복지과-406(‘15.1.27)요청	증 4,500
∘ 코끼리 내실과 관리 통로 사이의 철창	∘ 기존 100mm 난간파이프 간격이 밀실하여 동물의 행동관찰과 훈련시 먹이 급여가 어려움	∘ 기존 창살의 중간부위(높이 약 1m)를 1/2 철거후 32mm원형강 용접 - 동물복지과-406(‘15.1.27)요청	증 988
∘ 코끼리 격실 출입문	∘ 출입문 상부 I형강이 양호하고 구조체와 안정적으로 연결되어 있어서 철거 불 필요	∘ 기존 I형강을 재 사용하고 정산	감 1,187
∘ 코끼리 방사장 출입 문 구동방식 변경(3 개소)	∘ 현 설계된 기계식의 경우 수동으로 전환시 많은 시간이 소요	∘ 유지관리 등이 용이하도록 유압식으로 변경하는 것이 타당	-
∘ 공사기간	∘ 추가공사로 인한 절대공기 부족	∘ 공기연장 필요 함	-
계			증 5,987
제경비			증 2,522
도급비			증 8,509

□ 공사기간 연장

○ 주관과 요청으로 공종이 신설․추가되어 절대공기가 공사기간이 부족         하므로 공사기간을 연장하는 것이 타당 함

사 업 명	변 경 전	변 경 후	비 고
서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사	‘14.12.05 ~ ’15.02. 02	‘14.12.05 ~ ’15.02.16	14일간

3		예 산 현 황

□ 사업비 변경

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액	제1차 실정보고	비 고
서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사	도 급 금 액	380,763,639	388,763,639	증 8,508,542
	이 전 비	-	-	-
	총 공사비	380,763,639	388,763,639	증 8,508,542

※ 증가되는 공사비는 도급비 범위 내에서 준공시 정산처리 예정

□ 예산과목

○ 공원 이용시민 만족도 향상, 동물의 건강 증진 및 종 보존, 공원안         전시설 보수 및 정비, 시설비, 동물사 및 방사장 안전시설 설치

4		조 치 의 견

□ 위와 같이 변경내용을 시공자에게 선 시공 지시하고, 공기연장 후 준공시 정산 설계변경 시행코자 함