문서번호	시설과-6152
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
협 조
	조경과장
	주무관
	전문관
	주무관
	주무관
	주무관

서울대공원 식물표본 전시실 리모델링공사

시행계획(안)

2016.  9.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울대공원 식물표본 전시실 리모델링공사 시행계획(안)

30년된 식물표본 전시실을 리모델링하여 전시환경을 개선하고 식물교육 활성화를 통하여 공립수목원의 위상을 높이고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 식물표본 전시실 리모델링 추진계획(조경과-716호 ‘16. 2. 12)

□ 식물표본 전시실 리모델링 현황사항 보고(조경과-716호 ‘16. 8. 31)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울대공원 식물표본전시실 리모델링 공사

□ 사업기간 : 2016. 9 ~ 2016. 12

□ 규    모 : 지하1층 지상2층, 연면적 1,477㎡

□ 사업금액 : 496,020천원

(단위 : 천원)

구 분	공 종	공사금액	비 고
예정공사비	건축공사	200,150	폐기물처리 포함
	전기공사	166,060
	기계공사	76,430
	통신공사	37,330
	소방공사	16,050
합 계		496,020

※ 각 공사는 관련법에 의거 별도 발주 시행

Ⅲ		공 사 계 획

□ 식물표본 전시실

층 별	실 명	세 부 공 사	비 고
지하1층	샤워실	· 남·녀 샤워실 설치 · 탈의실 설치 · 세탁실 설치
지상1층	제1표본전시실	· 기존 전시장 철거 · 바닥재 및 천정재 철거 · 바닥재 및 천정재 설치 · 벽체 석고보드 설치 및 페인트
	제2표본전시실	· 기존 전시장 철거 · 바닥재 및 천정재 철거 · 바닥재 및 천정재 설치 · 벽체 석고보드 설치 및 페인트
	북 카페	· 바닥재 및 천정재 철거 · 바닥재 및 천정재 설치 · 벽체 석고보드 설치 및 페인트
	남·녀 휴게실	· 바닥난방 공사 · 칸막이 설치 · 벽체 및 천정재 설치
	관리사무실	· 바닥, 벽체, 천정 마감재 철거 · 출입문 교체
	계단 및 홀	· 바닥마감재 설치 · 벽체도장 · 천정텍스 설치
	숙직실	· 칸막이 철거 · 전기온돌 판넬 설치 · 벽체 및 천정재 교체
	현관	· 출입문 교체 · 외부계단 보수 · 천정재 교체
지상2층	세미나실	· 벽체도장 · 천정재 및 바닥재 교체
	조직배양실	· 바닥 디럭스타일 교체 · 벽체 페인트 도장 · 천정재 교체 · 내부칸막이 설치 등
기 타		· 벽체 등 구조체 균열보수 · 노후 홈통 교체 등

Ⅳ		예산 및 계약방법

□ 소요예산 : 496,020천원

□ 예산계획

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사관리기능 및 야생동물 종보전,      식물원 및 동물사조경관리, 시설비, 식물표본전시실 노후시설 정비

(318,020천원)

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물의건강증진 및 종보전, 동물사 관     리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설보수 및 정비, 시설비,      건축물 정밀점검 및 보수보강(88,000천원)

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물의건강증진 및 종보전, 동물사 관     리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전시설보수 및 정비, 시설비,      전력케이블 및 수전설비 정비(90,000천원)

※ 3개 사업 집행잔액 및 낙찰차액 사용(원장방침 : 조경과-4489호, ‘16. 8. 31)

□ 계약방법

○ 건축공사

- 공개경쟁입찰 : 건설산업기본법 시행령 제7조(별표1)에 의한 실내건축                          공사업 또는 시설물유지관리업 면허를 보유한 업체

○ 전기·설비·통신·소방공사

- 공사별로 관련법에 의거 공개경쟁입찰 또는 수의계약 별도 발주

Ⅴ		향후계획(안)

□ 2016.  9 : 공사발주

□ 2016. 10 : 계약 및 착공

□ 2016. 12 : 준공

Ⅵ		조 치 의 견

□ 시설물 관리부서와 공사시기 등을 협의하여 조속히 시행코자 함. 끝.