서울도시철도 9호선 건설사업

기본계획 변경(안)

□ 기본계획 변경 관련근거

○ 도시철도법 제6조(노선별 도시철도 기본계획의 수립 등)

○ 도시철도법시행령 제6조(기본계획 중 경미한 사항 변경) 제1항 제2호

- 사업기간을 1년의 범위에서 변경

□ 추진경위

○ 2000. 9. 6 : 9호선 1단계 기본계획 확정 (건설교통부)

○ 2000.10   : 9호선 1단계 사업면허 승인

○ 2007.10. 9 : 9호선 기본계획변경 확정(건설교통부)

․1단계 : 2001년 ~ 2008년 (2009년 개통)

․2단계 : 2007년 ~ 2015년

※ 2-1단계 : 2007년 ~ 2013년

○ 2007.10.29 : 9호선 2단계 사업면허 승인

○ 2008.12.30 : 9호선 기본계획변경(사업기간) 확정(국토해양부)

․1단계 사업기간 변경 : 2001년 ~ 2009년 5월

○ 2009. 7.24 : 9호선 1단계 개통

○ 2010. 4. 5 : 9호선 기본계획변경 확정 통보(국토해양부)

․1단계 : 2001년 ~ 2010년 5월

․2단계 : 2007년 ~ 2015년

※ 2-1단계 : 2007년 ~ 2013년

○ 2010. 5.25 : 9호선 기본계획변경 확정(국토해양부)

․1단계 사업기간 변경 : 2001년 ~ 2010년 12월

○ 2014. 4.15 : 9호선 기본계획변경 확정(국토해양부)

․2-1단계 사업기간 변경 : 2007년 ~ 2014년

□ 기본계획(사업기간) 변경사유

○ 9호선 2-1단계 구간의 전동차 영업시운전(‘14.12.20~’15.2.

25) 및 운영기관 인수·인계 기간 필요

□ 기본계획 변경내용(9호선 2단계 우선시행구간)

○ 사업기간

- 1단계(변경없음) : 2001년 ~ 2010년

- 2단계(변경없음) : 2007년 ~ 2015년

※ 2-1단계 : 5개월 연장

당초 : 2007년 ~ 2014년

변경 : 2007년 ~ 2015년 5월

○ 사업구간 (변경없음)

○ 건설 및 운영계획 (변경없음)

○ 경제적 타당성 분석 (변경없음)

○ 재무적 타당성 분석 (변경없음)