(재)서울디자인재단

N

대표이사방침 제(869)호

수신

내부결재

(경유)

제목

서울라이트 *************************** 계획

1. 「서울라이트 함체 제작·설치공사 계획(수정)」(시설팀-3301, 23.07.21.)과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 전기공사 기간 연장이 필요하여 아래와 같이 계약기간을 변경하고자 합니다.

가. 건    명 : 서울라이트 *************************** 계획

나. 변경사유 : ***************************

다. 관련근거 : [지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준] 제9장 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제. 해지

제2의 계약기간의 연장 가항 1-다 8)을 근거로 함

라. 변경내용

구 분	변경 전	변경 후
계약기간	**********************	***************************
계약금액	*************	****
과업범위	**************	****

마. 사업일정(일정 변동 가능)

일 정	내 용	비 고
2023. 8. 24. ~ 2023. 11. 30.	건축공사 산출내역 및 현장 검토	-
2023. 12. 1. ~ 2023. 12. 10.	착수보고(공사일정 수립 등)	-
2023. 12. 11. ~ 2024. 2. 21.	함체 제작 및 설치 공사 진행	-
2024. 2. 22. ~ 2024. 2. 29.	준공검수	-

붙임 1. 서울라이트 함체 제작·설치공사 계획(수정) 1부.

2. 계약 체결_서울라이트 프로젝터 함체 7기 제작·설치 전기공사 1부.

3. 공사계약서_DDP 서울라이트 프로젝터 함체 7기 제작·설치 전기공사 1부.

4. 계약변경 합의각서 1부.  끝.

선임					11/30 홍성엽			시설팀장				11/30 이재만		DDP운영본부장						11/30 박진배		대표이사				11/30
																										이경돈
협조자			책임				11/30 한라경
시행		시설팀-5575 (2023.11.30.)													접수
우	03098					서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층																		/
전화번호				02-2153-0024												/	james@seouldesign.or.kr							/	부분공개(5,7)