서울문화비축기지 사업개요 및 추진현황

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서울시 마포구 성산동 산53-1일대

❍ 사업규모 : 140,022㎡(공원101,510, 임시주차장 35,212, 접근로 3,300)

❍ 사업기간 : 2013.1.~2017.4.

❍ 사업내용 : 문화공원 및 주차장 부지 조성 등

❍ 소요예산 : 46,889백만원

구분	1단계(문화공원)	2단계(주차장부지조성)	비고
규모	101,510㎡	38,512㎡

□ 추진경위

❍ ‘12.09.01. : 시장 현장답사(고건 전총리,마포구청장,마포구청장등)

❍ ‘12.10.30. : 투융자사업 심의 통과

❍ ‘13.03~’14.4 : 기본구상 및 마스터블랜 수립

❍ ‘14.08.25. : 국제 현상설계공모 바표

❍ ‘14.12~’15.7: 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

❍ ‘15.09.10 : 공원 조성계획 셜정 및 지형도면 고시

❍ ‘15.10.29 : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가

❍ ‘15.12.30 : 1단계(문화공원) 공사 착공

❍ ‘16.07.11 : 2단계(임시 주차장 부지) 공사 착공

❍ ‘17.04     : 준공예정(’17.4.28 준공행사)

□ 추진경위

❍ 조성공사 추진현황

- 1단계 문화공원(101,510㎡/장기계속공사)

· 총공사비 : 31,572백만원(도급24,738, 관급6,342, 이설·폐기물492)

· 시공업체 :(주)택시빌 등 8개사 공동도급

· 공 정 율 : 65%

- 2단계 임시 주차장 부지(38.512㎡/장기계속공사)

· 총공사비 : 5,322백만원(도급4,197, 관급839, 이설·폐기물286)

· 시공업체 : 에스지신성건설(주) 등 4개사

· 공 정 율 : 25%(‘16.7.11 착공)

❍ 지장물 이전·존치 계획(서울시 사회적경제지원센터, 사회적기업)

- 점유면적 : 2건 666.5㎡(서울시 사회적경제지원센터 304,

문화로놀이짱 362.5㎡)

- 점 유 자 : 사회적경제지원센터(‘15.1~), 문화로놀이짱(’10‘9~)

- 추진경과 : 1·2차 조치방안 논의 후, 3차(‘16.8.10합의)

- 합의내용

· 서울시 사회적경제지원센터(문화로놀이짱 포함)가 이전되어 점유한는 공간 및 토지를 구분화고, 서울시 사회적경제담관 책임 하에 이전·관리·운영 등

※ 이전 점유면적 : 1,548,.48㎡(현장여건 반영 결과)

· 점유 공간 및 토지 내의 기획·조정·조율 등에 관한 모든 사항은 문화비축기지 운영 거버넌스 안에서 결정

※ 현재 기득권 및 향후 물리적 점유 불인정, 위치·규모·디자인은 설계자의 의견 결정

❍ 서울문화비축기지 내 1,541.48㎡는 “서울시 사회적 경제 지원센터 이전부지”에 포함되어 재산관리부서로 재산관리관을 변경 완료

(분임재산관리관 : 사회적경제담당관)

□ 관리운영 현황

❍ 서울문화비축기지 조직개편【조직담당관-483(‘17.1.20)】

❍ 문화비축기지 주요시설 현황

1. 건축물현황

구 분	연 면 적	층 수	구조 및 마감	비 고 (용도)
계	8,119.89 (1,046.30)
1번 탱크	553.87	1층	∘철근콘크리트조 ∘커튼월, 노출콘크리트	파빌리온,화장실
2번 탱크	1,353.78	1층	∘철근콘크리트조 ∘노출콘크리트	공연장, 매점, 화장실
3번 탱크	(1,046.30)	1층	∘원형보존
4번 탱크	1,227.86	1층	∘철골조 ∘커튼월, 노출콘크리트	전시장, 기계·전기실
5번 탱크	889.85	2층	∘철근콘크리트조 ∘노출콘크리트	전시장, 화장실
6번 탱크	2,947.91	지하3층/2층	∘철근콘크리트조 ∘노출콘크리트, 철판마감	정보교류공간, 대회의실, 다목적강의실, 업무공간, 화장실, 기계·전기실, 카페테리아, 옥상정원
지원시설	448.77	지하2층/1층	∘철근콘크리트조 ∘노출콘크리트	화장실, 샤워실, 장비보관실, 기계·전기실
펌 프 실	300.0	1층	∘철근콘크리트조 ∘노출콘크리트
변 전 실	320.0	1층	∘철근콘크리트조 ∘노출콘크리트	사무실, 화장실
안내시설	77.85	1층	∘철근콘크리트조 ∘내후성강판	안내실, 화장실

2. 화장실현황

구 분	소변기	양변기		장애인	세면기	비 고
		남	녀
계	26	18	51	10	45
1번 탱크	3	2	6	-	5
2번 탱크	8	6	16	2	14
5번 탱크	1	1	1	-	2
6번 탱크	6	4	12	2	9
지원시설	4	2	10	2	6
변 전 실	2	2	4	2	5
안내시설	2	1	2	2	4

3. 주차장현황

구 분	주차대수				비 고
	계	소형차	대형차	장애인
계	59	50	5	4
정문주차장	59	50	5	4

※법정주차면적 : 소형차 2.3×5, 장애인 3.3×5, 대형차 3.5×14

4. 공원포장

(단위 : ㎡)

구 분	위 치	물 량	비 고
계		16,562
재활용강판	주동선	225	공원
콘크리트	주동선	8,993	공원
소포석차도	부진입부	190	공원
쇄석깔기	콘크리트포장 주변	727	공원
디딤돌놓기	관람동선	216	공원
야자매트	산책로	734	공원
마사토	활동공간	3,173	임시주차장부지
화강석판석	진입부	64	임시주차장부지
잔디매트	문화마당	2,039	임시주차장부지
콘크리트	휴게시설하부	201	임시주차장부지

5. 관수시설

구 분	수량(EA)	규 격	비 고
Q·C밸브	21	25㎜	공원 14ea 임시주차장부지 7ea

6. 식재물량

○ 수목식재 : 25종 45,210주

구 분	계	식재수량		비 고
		교 목	관 목
계	45,210	305	44,905
공 원	17,981	228	17,753	교목 7종, 관목 18종
임시주차장	27,229	77	27,152	교목 7종, 관목 18종

○ 수목이식 : 6종 254주

구 분	계	식재수량		비 고
		교 목	관 목
계	254	254	-	교목 6종
공 원	234	234	-	교목 6종
임시주차장	20	20	-	교목 4종

○ 초화류식재 : 20종 42,950본

구 분	초 종	식재수량	비 고
계	20	42,950
공 원	20	18,550
임시주차장부지	14	24,400

○ 잔디식재 : 5,025㎡

구 분	계	식재수량(㎡)			비 고
		이 식	신식(평떼)	양잔디
계	5,025		5,025
공 원	936		936
임시주차장부지	4,089		4,089

○ 기타 : 13,901㎡

구 분	계	식재수량(㎡)			비 고
		파 종	야생화매트	세덤매트
계	13,901	11,178	2,644	79
공 원	10,381	8,978	1,324	79
임시주차장부지	3,520	2,200	1,320	-

7. 시설물 설치

○ 휴식시설

구 분	단 위	설치내용		비 고
		수 량	종 류
계
연식의자	m	86	2종	공원
의자	개소	91	4종	공원(41개소 4종) 임시주차장부지(50개소 4종)

○ 관리시설

구 분		단 위	설치내용		비 고
			수 량	종 류
계
공 원	목재데크	식	2	· 2종
	목재계단	식	6	· 6종
	조형가벽	식	1
	조형개비온	식	1
임시주차장부지	목재계단	식	2	· 2종
	목재경사로	식	2	· 2종
	목재데크	㎡	2,626	· 2종
	자전거보관대	개소	8
	볼라드	개소	8
	음수대	개소	3

8. 공원등 및 방송설비

○ 공원등

구 분	수 량	규 격	비 고
계	284
LED 보안등	69	LED 20W X 4
LED 볼라드	43	LED 12W X 1
LED 투광등	85	LED 20W X 1	Tank 1, 3, 안내판
LED 경관등	16	LED 20W X 1	Tank 4 입구
LED 스텝등	45	LED 10W X 1	Tank 2,6
LED 지중등	26	LED 7W X 1	Tank 2

○ 방송설비

구 분	수량(개소)	규격(W)	비 고
계	67
옥외 스피커	67	등주부착현 20W

○ CCTV

구분	수량	규격	비고
계	67
옥외형 CCTV	19	Speed Dome Type
옥외형 CCTV	7	Weather Proof Type
옥내형 CCTV	34	Dome Type
옥내형 CCTV	7	Speed Dome Type