문서번호	녹색에너지과-24643
결재일자	2013.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	전력관리팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
협 조

서울복합화력발전소 안전성 검증 참여계획

2013. 12.

기후환경본부

(녹색에너지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울복합화력발전소 안전성 검증 참여계획

서울복합화력 지하건설에 따른 안전성 검증 과정에 중부발전․마포구와 함께 서울시가 TF팀을 구성하여 주도적으로 참여코자 함

＜시장님 요청사항 11.1(금) 도로계획과 업무보고시＞

□ 안전성 검증 추진현황

○ 발전소 지하화 안전성 확보계획 용역완료(인가 시행전 단계)

- 용역기간 : '12.2월 ∼ '12.7월, 한전기술(주)

- 용역결과 : 강제 환기시스템, 가스누출 차단장치, 원격감시 등 보완조치 제시

○ 전문기관 안전성 검증용역 수행(설계․시공단계)

- 용역기간 : '13.12월 ∼ '16.9월

- 한국가스안전공사(가스분야), 한국소방학회(소방분야), 대한설비공학회(환기분야)

- 검증범위 : 시뮬레이션 위험성 평가, 설계 및 시설 기준 적정성 검증

□ 안전성 검증 참여방안

○ 서울시 TF팀 구성․운영('14.1월 ∼ '16.9월)

- 구  성 : 녹색에너지과장, 팀장(6명) 및 외부 전문가(6명)

► 내부 : 녹색에너지과(집단에너지팀장, 전력관리팀장), 환경정책과(환경조성평가팀장),

기후대기과(대기개선팀장), 예방과(가스위험물안전팀장), 도기본(환경설비과장)

► 외부 : 가스, 화재, 환기 분야 전문가(서울시 자문위원 중 부문별 2인씩 위촉)

- 운  영 : 사업주요 단계별 TF팀 자문의견(마포구, 중부발전과 협의)

○ 안전성 검증용역 참여 계획

- 기 완료된 ‘안전성 확보계획 용역’에서 제시된 보완사항 외 추가 보완사항 검토

- ‘전문기관 안전성 검증용역’ 진행 단계별로 서울시 TF팀 참여.

따로붙임 : 서울복합화력발전소 관련 자료 1부.  끝.

[참고자료]

서울복합화력발전소 추진개요

○ 추진기간 : ’13.06 ～ '16.09 (사업비 10,181억원)

○ 규    모 : 건축 연면적 88,477㎡ (부지면적 118,779㎡)

○ 발전용량 : 387MW ➞ 800MW로 증설 (400MW×2기)

구 분		발전소·통합사무실	지상부 공원화	문화창작발전소	한강변 관리기본계획
사업내용		(지하) 전력·열공급 시설 (지상) 통합사무실	공원조성(88,350㎡)	기존시설 활용 (4,5호기)	한강변 관리 마스터플랜, 중점관리지역 세부관리방안
역할	계획주체	중부발전	마포구, 중부발전	문화관광부	서울시 수립
	설치주체	중부발전	중부발전	문화관광부, 중부발전	서울시 수립
	관리운영	중부발전	마 포 구	문광부 · 마포구	서울시·자치구 운영
주요일정		‘13. 9 발전소 착공 ‘14. 3 통합사무실 설계 ‘16. 9 공사완료	‘13. 7 현상설계공모 ‘13.10 당선작 선정 ‘16.9~’18.12 공사	‘13.10 기본계획 착수 ‘15. 1 현상설계공모 ‘16.9~’18.12 공사	‘13. 8. 용역착수(MP선정) ‘13.10 당인리 가이드라인 수립중 ‘15. 7 용역 완료

‘안전성 확보계획 용역('12.2월∼7월)’내역

○ 지하공간 24시간 강제 환기시스템 상시 가동

○ 가스 누출 근원적 차단을 위한 특수설비 설치

○ 가스 화재 원격감시 시스템 및 사고 대응체계 구축

○ 대형 설비별 독립 방화구역 설치 및 화재차단 방화셔터 작동

‘설계·시공 안전성 검증용역('13.2월∼'16.9월)’내역

구 분	전문기관	검증 용역 범위
가스분야	한국가스안전공사	□ 가스 폭발/화재 시뮬레이션 위험성 평가 □ 허용가능 위험수준 설계 및 건설 유도 □ 가스시설 국제규격 기반 안전성 검증
소방분야	한국소방학회	□ 화재 위험성 평가 □ 피난 및 대피 시뮬레이션 검증 □ 성능위주 소방설계
환기분야	대한설비공학회	□ 환기시스템 시뮬레이션 검증 □ 환기시스템 설비기준 적정성 검증 □ 지하발전 관련 지침 및 기준 검증