서울시(도로계획과) 소관사업 추진상황(총괄)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
광역도로	동부간선도로	서울시 5.45km (6-7차로) 총연장:11.14㎞	당초 : 04.10 - 15.12 변경 : 04.10 - 17.12	당초 : 242,692 변경 : 269,808	장암지하차도 공사중 (48%)
	덕송~상계	서울시 0.84km (4차로) 총연장:2.38㎞	당초 : 07.04 - 13.12 변경 : 07.04 - 15.12	당초 : 23,882 변경 : 23,882	공사완료 (100%)
	고양화전 ~신사	서울시 1.07km (4차로) 총연장:5.0㎞	당초 : 04.04 - 14.12 변경 : 04.04 –16.12	당초 : 44,813 변경 : 50,955	터널접속도로 공사중 (95%)
	감일~초이	서울시 0.14km (6차로) 총연장:5.2㎞	당초 : 04.04 - 15.12 변경 : 04.04 - 16.06	당초 : 14,749 변경 : 14,749	서울시구간 완료 (100%)
	사가정~암사	총연장 2.74km (4-6차로)	당초 : 01.01 - 13.12 변경 : 01.01 - 16.06	당초 : 309,350 변경 : 432,159	개통 후 부대공사중 (99%)
	태릉~구리	총연장 4.67km (8차로)	당초 : 07.12 - 19.12 변경 : 07.12 - 19.12	당초 : 117,184 변경 : 117,184	총사업비 변경 및 중앙투자심사 추진중
	상도교~호장교	서울시 0.65km (4차로) 총연장:1.40㎞	당초 : 08.07 - 15.12 변경 : 08.07 - 17.12	당초 : 10,000 변경 : 13,055	공사착공 준비중

동부간선도로

(담당자 : 노지훈, 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 동부간선도로 월계1교 ~ 의정부시계

- 규    모 : 도로확장 폭 4 → 6~7차로, 연장 5.45km(총연장 11.14㎞)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2017년

- 총사업비 : 269,808백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정 :

- ‘99년’12월 ∼ ‘04년’02월 : 기본설계

- ‘04년’09월 ∼ ‘07년’08월 : 실시설계

- ‘07년’10월 ∼ ‘19년’12월 : 공사

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 장암지하차도 시공중 (공정 : 48%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12. 31까지( 90%)

※ 전체 공정율 :  48%

○ 향후계획

- ‘17년12월 : 공사 준공

덕송~상계

(담당자 : 정재훈, 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 남양주시 별내동 ∼ 서울시 노원구 상계동

- 규    모 : L=0.84km, B=25m(총연장 2.38㎞)

- 사업기간 : 2007년 ∼ 2015년

- 총사업비 : 23,882백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘07년’04월 ∼ ‘08년’09월 : 기본설계

- ‘08년’10월 ∼ ‘09년’06월 : 타당성 재조사

- ‘07년’04월 ∼ ‘11년’06월 : 기본 및 실시설계

- ‘11년’06월 ∼ ‘15년’12월 : 공사

○ 추진현황 : 정상

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 공사완료(‘16. 2 개통)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12. 31까지( 100%)

※ 전체 공정율 : 100%

○향후계획

- `16년04월 : 사업비 정산

고양화전~신사

(담당자 : 정재훈, 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 고양시 덕양구 화전동～서울시 은평구 신사동

- 규    모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 1,07㎞(총연장 5.0㎞)

※ 미개설 터널구간 총 867m(서울 366m, 고양시 501m)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2016년

- 총사업비 : 50,955백만원

○ 연차별 투자실적 :  별첨

○ 추진일정

- '04년04월 : 기본계획구상(KOTI)

- '05년09월 : 예비타당성조사(KDI)

- '05년12월 ~ '07년02월 : 터널구간 기본 및 실시설계 시행

- '02년12월 ~ `16년09월 : 공사

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 터널 종점부 접속도로 시행 중 (공정 : 95%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31.까지(100%)

※ 전체 공정율 : 95%

○ 향후계획

- '16년09월 : 공사 준공

감일~초이

(담당자 : 김대희, 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 상일동(천호대로) ~ 하남시 감북동 감북보금자리

- 규    모 : 도로개설 폭 6차로 연장 0.14㎞(총연장 5.20㎞)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2016년

- 총사업비 : 14,749백만원

○ 연차별 투자실적 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘04년04월 : 광역도로 지정

- ‘07년12월 : 대도시권 광역교통시행계획 고시(건고시 제2007-658호)

- ‘11년12월 : 서울신 구간 사업시행 협약체결(서울시↔하남시)

- 보상 및 공사시행 : 하남시, 비용부담 : 서울시가 하남시에 납부

- ‘12년02월 ~ `15년12월 : 공사(하남시)

- ‘15년05월 : 서울시 구간 개통

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료(하남시)

- 공  사 : 서울시 구간 완료(연장 0.14㎞) (공정 : 100%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31까지(100%)

※ 전체 공정율 :  100%

○ 향후계획

- `16년06월 : 사업비 정산

사가정~암사

(담당자 : 김대희, 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 암사동 414-22 ~ 구리시 아천동 58-1

- 규    모 : 도로개설 폭 4~6차로 연장 2.74㎞(서울시 2.1㎞, 구리시 0.64㎞)

- 사업기간 : 2001년 ~ 2016년

- 총사업비 : 432,159백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘01년01월 : 사가정길~암사동간 도로건설 추진 검토(시장방침)

- ‘04년04월 : 제2차 수도권 광역교통5개년계획 계속사업으로 지정

- `01년06월 ~ `03년09월 : 기본설계

- `03년12월 ~ `05년09월 : 실시설계

- ‘06년04월 ~ `16년06월 : 공사

- ‘14년11월 : 개통

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 교량 및 연결도로 완료(연장 2.74㎞) 후 개통(‘04. 11) (공정 : 99%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31까지(99%)

※ 전체 공정율 :  99%

○ 향후계획

- ‘16년06월  : 공사 준공

태릉~구리

(담당자 : 정재훈, 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 중랑구 묵동 ~ 경기도 구리시 인창동

- 규    모 : 폭 6차로→8차로, 연장 4.67㎞(총연장 4.67㎞)

※ 총 연장 중 「구리~포천 민자고속도로」에서 중랑IC 2㎞구간 공사시행

- 사업기간 : 2007년 ~ 2019년

- 총사업비 : 117,184백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진일정

- '09년03월 ~ '09년07월	: KDI 예비타당성조사(기획재정부)

- '09년06월 ~ '14년06월 : 사업시행방안 회의(국토해양부, 서울시, 구리시)

- '14년12월 ~ `15년12월 : 기본계획

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 기본계획 완료, 기본 및 실시설계 예정

- 공  사 : 시기 미도래

- 보  상 : 시기 미도래

※ 전체 공정율 :  10%

○ 향후계획

- '16년04월 : 총사업비 변경 요청

- `16년05월 : 중앙투자심사 예정

상도교~호장교

(담당자 : 노지훈, 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 도봉구 도봉동 4번지 ~ 의정부시계간

- 규    모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 0.65㎞(총연장 1.47㎞)

서울시구간 연장 650m (1단계 완료 280m, 2단계 추진 370m)

- 사업기간 : 2008년 ~ 2017년

- 총사업비 : 13,055백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정 :

- ‘08년03월 : 투자심사

- ‘11년11월 ~ `12년03월 : 기본계획(의정부시)

- `13년01월 ~ `14년12월 : 실시설계(의정부시)

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 착공 준비중 (공 정 :  -  %)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31까지( 40%)

※ 전체 공정율 :  10%

○ 향후계획

-  ‘16년 ~ `17년 : 공사 시행