		2020. 5. 14(목) 조간용
		이 보도자료는 2020년 5월 13일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :	도시기반시설본부 토목부			토목부장	김용제	3708-2540
				터널건설과장	최진우	3708-2565
				담당주무관	최승룡	3708-2567
	안전총괄실 교량안전과			교량안전과장	하현석	2133-1940
				강구조교량팀장	박찬규	2133-1960
사진없음 □	사진있음 ▣		매수 : 5매	담당주무관	이상문	2133-1964
서울시, 개봉철도고가차도 성능개선…오류IC방향 14일 06시 가교개통 - 교량하부 보수․보강, 교량상부 거더 및 바닥판 교체, ‘21년 11월 준공 - 1단계 오류IC방향, 2단계 구로IC방향 순차적으로 가교 이용 및 성능개선 방식 진행 - 시, “시민 불편이 없도록 통행불편 최소화 노력, 공사 구간 통과 시 안전운전 당부”

□ 서울시는 개봉철도고가차도(구로구 개봉동)를 성능개선하기 위해 설치한 가설교량을 먼저 개봉교차로→오류IC방향으로 오는 14일(목) 06시에 개통해 차량을 우회한다고 밝혔다.

□ 성능개선공사는 시민들의 통행불편이 없도록 공사로 인한 차량통제를 하지 않고 가설교량을 통해 차량을 우회해 양방향 교통 순환이 원활하게 진행된다.

□ 건설된 지 43년이 지나 노후화된 개봉철도고가를 통행하는 시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 교량하부 보수·보강은 물론 교량 상부 거더(Girder) 및 바닥판 교체 등 성능개선 공사가 지난 ‘19.9월부터 ‘21.11월까지 추진된다.

○ 남부순환도로상에 있는 개봉철도고가는 연장 149m, 폭 23m로  철도 1호선 선로를 가로질러 개봉동과 오류동을 연결하는 교량이다.

□ 개봉철도고가를 통행하는 시민들의 편의와 원활한 차량 통행을 위해 성능개선공사는 1단계 오류IC 방향, 2단계 구로IC방향으로 순차적으로 가설교량 이용 및 성능개선 하는 방식으로 진행된다.

○ 개봉교차로→오류IC방향 개봉철도고가차도를 이용하는 차량이 가설교량을 이용하게 되면 오류IC 방향 2차로를 차단하고 본선교량 2개 차로를 9월까지 철거 및 성능개선하게 된다.

○ 또, 오류방향 본선교량 2개 차로 성능개선공사가 완료되면 가설교량은 구로IC방향 본선교량 3개 차로 철거 및 성능개선공사가 끝나는 ’21.5월까지 구로방향 차량이 이용하게 된다.

□ 시 관계자는 가설교량으로 차로가 변경되므로 공사기간 중 차량속도를 시속 40㎞ 이하로 줄이고 안전거리를 충분히 확보하는 등 운전자의 주의가 필요하다고 당부했다.

□ 한제현 서울시 도시기반시설본부장은 “시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 중차량 통행도 가능한 1등급 교량으로 성능 개선한다”며 “공사기간 중 다소 불편하겠지만 안전을 위해 차량 서행과 우회도로를 이용해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

※ 붙임 : 개봉철도고가 성능개선공사 현황. 1부.

[참고자료]

개봉철도고가 성능개선공사

′18년 정밀안전진단 결과에 따라 개봉철도고가를 1등급 교량(DB24)으  로의 성능개선 및 안전한 교량으로 유지관리 시행

1		사업개요

○ 위    치 : 서울시 구로구 개봉동 235[남부순환도로상 개봉철도고가]

○ 규    모 : 상,하행( 폭 23m , 연장 149m )

- 바닥판 교체면적 : 3,292 ㎡

- 거더 교체 : 54 본

- 가교 설치 및 철거 : 177 m (2차로)

○ 사업기간 : 2019. 05. 03. ～ 2021. 11. 02.

○ 총사업비 : 20,069백만원

2		추진현황

○ '18.7.~'19.3. : 실시설계

○ '19.  4. 24. : 공사계약

○ '19.  5.  3. : 공사착수

○ '19.5.~'19.9. : 유관기관 협의(한국철도공사 및 철도시설공단, 경찰청 등)

○ '19.  6. 25. : 주민설명회(1회)

○ '19.  7.  8. : 주민설명회(2회)

○ '19.  9.  5. : 철도보호지구내 공사시행 알림(한국철도시설공단)

○ '19.  9. 12. : 가설교량 착공

○ '20.  5.  14. : 가설교량 개통

3		향후계획

○	`20.11.	:	오류IC방향 철거 및 성능개선공사
○	`21.07.	:	구로IC방향 철거 및 성능개선공사
○	`21.11.	:	가설교량 철거 및 준공

4		위 치 도

5		현황사진

【1단계】오류방향 성능개선

오류역방향

시흥IC방향

오류IC

성능개선공사구간

가교(우회도로)

오류IC방향

경인선 전철

개봉

교차로

개봉역방향

【2단계】개봉방향 성능개선

오류역방향

개봉

교차로

오류IC

가교(우회도로)

오류IC방향

개봉역방향

경인 전철

성능개선공사구간