서울시 재정집행 점검회의(7월) 결과 보고

Ⅰ		회의 개요

ㅇ 일시/장소 : ‘21. 7. (코로나 19대비 자치구 집합회의 미시행)

ㅇ 참석인원 : 자치구는 유선통화로 대체

ㅇ 주요내용 : ‘21년 사업 및 이월사업 추진현황 및 향후 집행계획 전달

* 총 127개소 : ‘21년 어린이보호구역 지정 및 확대 67개소, 영상정보 47개소, 노인 8개소, 보행자우선도로 5개소

Ⅱ		회의 내용

□ 이월사업 점검

ㅇ 추진현황 및 계획(‘21. 7. 15. 기준)

- 이월사업 1개소 중 준공완료 1개소(광진구 안전한 보행환경 조성

- 사업예산 80백만원 중 80백만원 집행완료(집행률 100%)

(단위 : 백만원)

사업량 (개소)	추진현황(‘21.7.15.기준)						추진계획
	진행상황				집행현황		8월		9월		10월		11월
	계	설계중	공사중	준공	예산액	집행액	사업량	집행액	사업량	집행액	사업량	집행액	사업량	집행액
계	1			1	80	80
안전한 보행환경	1			1	80	80

□‘21년 사업 점검

ㅇ 추진현황 및 계획(‘21. 7. 15. 기준)

- ‘21년 사업 127개소 중 설계중 72, 공사중 49, 준공 6개소

- 사업예산 10,975백만원 중 2,118백만원 집행(집행률 19%)

(단위 : 백만원)

사업량 (개소)	추진현황(‘21.7.15.기준)						추진계획
	진행상황				집행현황		8월		9월		10월		11월
	계	설계중	공사중	준공	예산액	집행액	사업량	집행액	사업량	집행액	사업량	집행액	사업량	집행액
계	127	72	49	6	10,975	2,118	5	200	15	2,180	20	2,280	69	4,197
어린이보호구역	67	40	26	1	1,810	175	5	200	5	200	5	200	52	1,035
무인교통단속장비 (신호기 등)	47 (24)	24 (24)	18	5	7,865	1,943			8	1,480	9	1,580	22	2,862
노인보호구역	8	4	4		350	-					4	200	4	150
보행자우선도로	5	4	1		950	-			2	500	2	300	1	150

ㅇ 중점관리 대상 : 47개소(보호구역 3, 무인교통단속장비 47, 보행환경 4)

-  3개소(보호구역 표준모델 정비)는 설계완료하여 공사발주 준비중으로 조기공사착공 할 수 있도록 촉구

-  과속단속카메라는 47건 405대 설치공사중이며, 조속히 완료하도록 독려, 도로교통공단 검사업무 폭증 지연 ’20년 484대 중 246대는 ’21년 상반기 검수 완료하고, 현재 잔여 75대 검수 진행중임

-  4개소(보행환경)는 설계완료하여 공사발주 준비중으로 조기 공사착공 할 수 있도록 촉구

□ 집행률 관리대책

ㅇ 중점관리 대상사업 격주, 일반사업 매월 진행상황 확인을 통해 목표 집행액* 달성 유도

ㅇ 사업추진 부진 사업장에 대하여 전문가 자문 및 현장점검을 통해 집행률 제고방안 마련

Ⅲ		향후 계획

ㅇ 영상정보 인프라 사업은 상반기 교부금액 기준이며, 하반기 교부한 사업비에 대하여 수요조사완료 하였으며 조속히 추진. 끝.