회의록

담당	PM	서울시

	회의록
	단계	실행 및 통제	프로세스명	회의관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	2013년 행정포털개선사업	작성부서	가비아

제목	03.12 주간회의	장소	정보화기획단 회의실
		회의일자	2014.03.12
작성자	PMO 이중희 차장	회의시간	10 : 30
참석자	김기항 팀장, 김대원 주무관, 김윤수 주무관 최광민 PM, 김재기 부장, 박철민 차장, 이중희 차장
회의내용
1. 사업관리 - 산출물 품질검토 진행 중 - 중간감리 체크포인트 정리 진행 중 : 컨설턴트 미팅 예정, 감리가이드 등 점검 - 작업분할표 세분화 진행 중 2. 시스템 개발 - 뉴스, 업무공지 등 메인에 노출되어진 게시판 콘텐츠를 팝업레이어 형태로 VIEW할 수 있도록 개발 진행 검토필요 - 설계 : 스토리보드 리뷰 및 확정 - 메뉴의 용어 재정의 및 신설 메뉴 설정 검토필요 - 기술요소 검증 : 동적카운팅 Ajax - 이노릭스 솔루션의 버전에 따른 추가공수 발생 우려가 있어 일정 조정이 필요함 - 요구사항 추적 및 맵핑을 통해 확정된 사실을 기초로 작업세분화 분할표 작성 필요 관리자 화면 개발은 오픈 이후에 준공기한까지 완수할 계획임 - 게시판 추가/정리 및 재배치에 필요한 콘텐츠 분석필요 - 준공전 테스트일정 확인을 위한 개발일정 점검필요 - 시범운영일정계획 수립 등 전반적인 오픈 일정 및 준공일정 재 산정후 일정조정 필요함 3. 모바일 - 주이스 외주계약 내부품의 반려 이슈로 금주까지 진행

	회의록
	단계	실행 및 통제	프로세스명	회의관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	2013년 행정포털개선사업	작성부서	가비아