서울애니메이션센터 재건축 사업 안내문

서울시에서 알려드립니다.

(총괄부서 : 서울시 경제진흥본부 문화융합경제과)

리라초등학교․유치원과 인접한 서울애니메이션센터 재건축 사업 추진에 따른 학생․건물의 안전 우려에 대해, 사업 추진일정, 작업 절차, 안전 및 환경관리 방안 등을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 석면해체․제거작업

(2018년10월 중, 초등학교․유치원 휴업일에 가급적 작업 예정이며, 세부일정은 확정 후 추가 안내)

가. 해체작업 시작 전에 작업장 내부를 밀폐하여 석면먼지 외부 방출 예방

(불침투성 비닐 시트 밀폐 ‘보양작업’)

나. 작업장 내부를 외부보다 음(-)압으로 유지하여 오염공기 외부 방출 예방

(1차, 2차 필터 및 고성능 필터(HEPA 필터)를 장착한 ‘음압기’ 설치)

다. 해체 전 물 등을 석면 물질에 스며들게 하여 해체 중 석면 먼지 최소화

(‘습식작업’ 실시)

라. 작업장 외부에 측정기를 설치하여 석면 비산 농도 측정 및 공개

(농도 측정값 중구 홈페이지 공개 : http://www.junggu.seoul.kr/ “분야별 안내/청소환경/석면관리정보”)

마. 해체된 석면 폐기물을 전문 업체를 통해 안전하게 처리

바. 보양작업에서 해체, 폐기물처리의 전 과정을 석면전문기관의 감리 실시

2. 철거공사

(2018년12월 말~2019년3월 예정)

가. 굴삭기에 압쇄기 장착 및 유압의 힘으로 압축하여 콘트리트 및 벽돌을 깨거나 절단하는 공법으로 소음 및 진동 등 최소화(‘압쇄공법’ 적용)

나. 먼지 발생 및 유출을 최소화하기 위한 작업 중 ‘물 뿌리기’, 부지 경계에 ‘방진벽․방진망’ 등 설치

(저소음 무진동 압쇄공법)	(방진벽 및 방진망)	(방진덮개)

《2019년4월~9월은 문화재 조사 예정》

3. 건축공사

(2019년10월~2022년6월 예정)

가. 시공순서: 가설공사(2개월) → 흙막이 공사(3개월) → 1층 바닥슬래브 공사(2개월) → 지하층 공사(12개월) → 지상층 공사(4개월) → 마감공사(10개월)

나. 노후화된 인근 건물·옹벽의 안전을 고려하여, 보다 안전한 흙막이 공법 적용

(부지 전체에 ‘CIP, Cast-In-Placed pile’ 공법 적용)

다. 지하층 공사 시 소음 및 먼지 최소화를 위한 Top Down 방식 적용

(지상1층 바닥슬래브 공사 후 지하층 터파기를 하고 같은 방식으로 바닥슬래브 공사를 지하1층에서 지하4층까지 아래쪽으로 차례로 실시)

라. 공사 중 인접 건물 및 주변 지반의 영향여부 측정을 위한 계측기 설치

(크랙게이지, 건물경사계, 지중경사계, 지하수위계 등)

마. 공사 중 환경관리를 위한 공사차량 적재함 덮개 사용, 살수․세륜 시설 설치 및 부지 경계에 방진벽․방진망 설치

(건축공사 시공 순서 및 개념도)

4. 지하안전 관련 조사

가. 2017년 및 2018년 2회에 거쳐 총 7개소의 시추조사 등을 통해 ‘지반조사’를 완료하고 설계에 반영

나. 지반조사 결과, 지하수 변화 영향 및 지반안전성 검토 등 지하안전 확보방안 수립을 위한 ‘지하안전영향평가’ 용역 진행 중

서울시에서는 재건축 사업 추진 과정에서 소음․진동․먼지 발생 등으로 인한 리라초등학교·유치원 학생·교직원 및 건축물의 피해가 없도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.