서울역고가 주변도로 보행환경 정비방안

서울역 고가가 “보행길” 전환(‘17.4)에 따라 주변도로 (보도)정비 및 도로공간을 재편하여 보행 친화공간으로 확대 추진

※ 부시장 지시사항(소통전략회의 9.3) : 고가 보행길 전환에 따른 주변보행공간 조속 정비

□ 추진방향

○ 서울역고가 보행길과 연계, 주변도로를 정비하여 보행친화공간 개선

○ 서울역일대 수많은 역사·문화·쇼핑장소를 연결, 도보관광 네트워크 구축

○ 서울역일대 도시재생 사업구역내 생활도로까지 보행친화공간 확대 추진

	<서울역7017 프로젝트 일정>
◊설 계 : 기본설계(9.30) ⇨ 실시설계(2016.1.27) ◊철거공사 : 공사착수(12월말) ⇨ 공사완료(‘16. 4.) ◊본공사 : 공사발주(‘16.1) ⇨ 공사착수(’16.3) ⇨ 공사완료(‘17.3) ⇨ 개장(’17.4)

□ 정비노선

청파로

만리재로

소월길

퇴계로

1단계

2단계

□ 노선별 사업추진 계획

구 분	퇴계로	소월길	만리재길(안)
추진부서	도시교통본부(보행자전거과)	안전총괄본부(보도환경개선과)	?????
사업규모	◊위치: 회현역5번~퇴계로2가 ◊규모: 6차로, 연장 1.1㎞ ◊내용: 차로축소, 보도정비 ◊예산: 24억원(공사비) ◊기간 : ’15. 9 ~ ’17.12	◊위치: 숭례문~남산(힐튼호텔) ◊규모: 4차로, 연장 0.5㎞ ◊내용: 보도정비 ◊예산: 포괄비 (설계후 확정) ◊기간 : ’16. 1 ~ ’16.11	◊위치: 서계동223~공덕동456 ◊규모: 4~6차로, 연장 1.5㎞ ◊내용: 차로폭 조정 및 보행환경 개선 ◊예산 :10억원 ◊기간 :‘15.1~’17.12
추진내용	◊’15.9 : 사업시행방침수립 - 설계(자체예산 활용) ※ ’16. 사업비 확보 : 20억원		◊‘16년사업비 : 18.45억원 -꽃길조성 사업(2.45억원) -만리재로 가로수정비(7억원) -만리재로 보도정비(3.5억원) -만리재로 노후조명개선(5.5억원)
향후계획	◊’15.10 : 설계계약(착수) ◊’15.10~’16. 4 : 설계용역 ◊’16. 6~’17.12 : 공사 - (’17.12완료) 회현역~회현사거리	◊’16. 6 : 공사 착수 - 걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리 예산, 자치구 재배정 ◊’16.11 : 공사 준공	◊’16.1 ~ 8 : 개선안 마련 ◊’16. 9~’17.4 : 공사

□ 만리재길 정비계획(안)

○ 서울역고가 통행금지에 따른 교통량 변화를 예상하여 퇴계로(회현역~ 회현역사거리) 도로공간 재편용역을 도시교통본부에서 시행중임

○ 교통량 변화에 따라 만리재길에 대해서도 퇴계로 도로공간 재편 용역에 포함시행하여 개선방안 마련

○ 공사시행은 안전총괄본부 보도환경개선과에서 시행하되 공사비는 기 마련된 예산(18.45억원)으로 우선 시행

○ 부족사업비는 추경예산 등으로 확보하여 2017.4월 공사 완료