서울특별시 소관사업 추진 현황 (총괄)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
광역철도	진접선 (당고개~진접)	14.5km	당초 : 2012 - 2019	당초 : 403,700 (차량기지건설공사비)	서울시 추진상황 : 차량기지건설공사 설계 중
	하남선(상일~검단산) 복선전철 건설공사 (1공구)	1.116km, 정거장1개소	당초 : 2011 - 2020 변경 : 2011 - 2020	당초 : 1,059,080 변경 : 986,833	9.0%
광역도로	동부간선도로	서울시 5.45km (6-7차로) 총연장:11.14㎞	당초 : 04.10 - 15.12 변경 : 04.10 - 17.12	당초 : 242,692 변경 : 269,808	장암지하차도 공사중 (48%)
	덕송~상계	서울시 0.84km (4차로) 총연장:2.38㎞	당초 : 07.04 - 13.12 변경 : 07.04 - 15.12	당초 : 23,882 변경 : 23,882	공사완료 (100%)
	고양시 화전동 ~신사사거리	서울시 1.07km (4차로) 총연장:5.0㎞	당초 : 04.04 - 14.12 변경 : 04.04 –16.12	당초 : 44,813 변경 : 50,955	터널접속도로 공사중 (95%)
	감일~초이	서울시 0.14km (6차로) 총연장:5.2㎞	당초 : 04.04 - 15.12 변경 : 04.04 - 16.06	당초 : 14,749 변경 : 14,749	서울시구간 완료 (100%)
	사가정~암사	총연장 2.74km (4-6차로)	당초 : 01.01 - 13.12 변경 : 01.01 - 16.06	당초 : 309,350 변경 : 432,159	개통 후 부대공사중 (99%)
	태릉~ 구리IC간 확장	총연장 4.67km (8차로)	당초 : 07.12 - 19.12 변경 : 07.12 - 19.12	당초 : 117,184 변경 : 117,184	총사업비 변경 및 중앙투자심사 추진중
	상도교~호장교간 도로확장	서울시 0.65km (4차로) 총연장:1.40㎞	당초 : 08.07 - 15.12 변경 : 08.07 - 17.12	당초 : 10,000 변경 : 13,055	공사착공 준비중

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
환승 주차장	광나루역	200면	당초 : 2015 - 2017 변경 : 2016 - 2018	8,767	기본설계 검토중
	강동대로역	200면	당초 : 2015 - 2017 변경 : 2018 - 2020	10,016	시기 미도래
	신방화역	200면	당초 : 2014 - 2015 변경 : 2015 - 2017	19,149	공사중 (공정률 24%)
환승시설	도봉산역	364면	당초 : 2008 - 2013	36,846	사업완료 (’13.5.)
	사당역	200면	당초 : 2015 - 2017 변경 : 2016 - 2019	당초 : 48,780 변경 : 미정	기본설계 검토중 (서울메트로 참여)
	개화역	399면	당초 : 2008 - 2012	36,076	사업완료 (’12.4.)
	복정역	530면	당초 : 2015 - 2017 변경 : 2016 - 2019	당초 : 37,700 변경 : 미정	기본설계 검토중 (도시철도공사 참여)
공영 차고지	구리 토평 공영차고지	198면	-	10,355	사업대상 아님
	서울 우면 공영차고지	400면	-	43,200	사업보류 (주민반대)
	서울 금천 공영차고지	80면	-	35,000	사업보류 (석수역정거장 건립예정지구)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
공영 차고지	서울 구로 공영차고지	100면	-	35,000	사업보류 (주민반대)
	서울 염곡 공영차고지	156면	당초 : 2010.1 - 2017.12 변경 : 2010.1 - 2018.12	139,077	3단계 진행중 (공유재산관리계획)
	서울 상계 공영차고지	30면	-	12,000	사업대상 아님

광역철도-1		진접선(당고개~진접)

(담당자 : 박창복, 도시철도계획부, 772-7141)

○ 사업개요

- 위    치 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 일원

- 규    모 : 차량기지 신설 254,666㎡, 인입선 3.07km, 창동차량기지 철거 1식 등

- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2019. 12

- 총사업비 : 4,037억원(설계비 155억, 공사비 3,559억, 감리비 153억,보상비 134억, 부대비 36억 등)

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘10년 09월               : 예비타당성 조사 완료

- ‘12년 12월 ∼ ‘13년 12월 : 타당성조사 및 기본계획

- ‘12년 12월               : 기본계획고시(국토교통부 제2013-806호)

○ 추진현황(정상․부진․시기미도래 등으로 표기)

- 설  계 : 기본 및 실시설계 용역업체 선정 중

- 공  사 : 시기미도래

- 보  상 : 시기미도래

※ 전체 공정율 :  %(계획대비가 아닌 실제 공정율 기재)

○향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 정상추진

- 향후계획

· `15. 04. : 기본 및 실시설계 계약 및 착수

· `16. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

· `16. 12. : 차량기지건설공사 계약 및 착공

· `19. 12. : 차량기지건설공사 완료

광역철도-2		하남선(상일~검단산) 복선전철 건설공사

(담당자 : 정삼기, 부서명 : 도시기반시설본부, 연락처: 02-772-7211)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 상일동역 ~ 서울시계

- 규    모 : 연장 1.116km, 정거장 1개소, 입출고선 1.365km

- 사업기간 : 2011 ~ 2020

- 총사업비 : 357,830백만원 ( 경기도포함 : 986,833백만원)

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘10년 03월 ∼  ‘11년 04월 : 예비타당성조사

- ‘11년 12월 ∼  ‘13년 12월 : 타당성조사 및 기본계획

- ‘14년 04월 ∼  ‘15년 07월 : 기본 및 실시설계

- ‘15년 03월 : 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 계약(1-1, 1-2공구)

- ‘15년 03월 : 하남선(5호선연장) 건설공사 계약 (1-1, 1-2공구)

- ‘16년 03월 : 정거장 및 본선 복공판 설치 및 지장물 이설 중

○ 추진현황

- 설    계 : 완료

- 공    사 : 토목 - 파일천공 및 복공판 설치, 지장물 이설 등  (공 정 : 4.7%)

건축, 설비 등 - 미착공 (공 정 : 0%)

- 보상(이설등) : 한전 및 통신, 도시가스, 지역난방 이설  (공정 : 70.5%)

※ 전체 공정율 :  9.0 %

○향후대책 및 계획

- 부진사유 : 지장물 이설협의 및 보상 등 사전협의에 따른 기간소요

- 향후계획 : 공정만회 대책 수립 및 추진

광역도로-1		동부간선도로

(담당자 : 노지훈, 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 동부간선도로 월계1교 ~ 의정부시계

- 규    모 : 도로확장 폭 4 → 6~7차로, 연장 5.45km(총연장 11.14㎞)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2017년

- 총사업비 : 269,808백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정 :

- ‘99년’12월 ∼ ‘04년’02월 : 기본설계

- ‘04년’09월 ∼ ‘07년’08월 : 실시설계

- ‘07년’10월 ∼ ‘19년’12월 : 공사

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 장암지하차도 시공중 (공정 : 48%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12. 31까지( 90%)

※ 전체 공정율 :  48%

○ 향후계획

- ‘17년12월 : 공사 준공

광역도로-2		덕송 ~ 상계

(담당자 : 정재훈, 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 남양주시 별내동 ∼ 서울시 노원구 상계동

- 규    모 : L=0.84km, B=25m(총연장 2.38㎞)

- 사업기간 : 2007년 ∼ 2015년

- 총사업비 : 23,882백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘07년’04월 ∼ ‘08년’09월 : 기본설계

- ‘08년’10월 ∼ ‘09년’06월 : 타당성 재조사

- ‘07년’04월 ∼ ‘11년’06월 : 기본 및 실시설계

- ‘11년’06월 ∼ ‘15년’12월 : 공사

○ 추진현황 : 정상

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 공사완료(‘16. 2 개통)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12. 31까지( 100%)

※ 전체 공정율 : 100%

○향후계획

- `16년04월 : 사업비 정산

광역도로-3		고양시 화전동 ~ 신사사거리

(담당자 : 정재훈, 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 고양시 덕양구 화전동～서울시 은평구 신사동

- 규    모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 1,07㎞(총연장 5.0㎞)

※ 미개설 터널구간 총 867m(서울 366m, 고양시 501m)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2016년

- 총사업비 : 50,955백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진일정

- '04년04월 : 기본계획구상(KOTI)

- '05년09월 : 예비타당성조사(KDI)

- '05년12월 ~ '07년02월 : 터널구간 기본 및 실시설계 시행

- '02년12월 ~ `16년09월 : 공사

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 터널 종점부 접속도로 시행 중 (공정 : 95%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31.까지(100%)

※ 전체 공정율 : 95%

○ 향후계획

- '16년09월 : 공사 준공

광역도로-4		감일 ~ 초이

(담당자 : 김대희, 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 상일동(천호대로) ~ 하남시 감북동 감북보금자리

- 규    모 : 도로개설 폭 6차로 연장 0.14㎞(총연장 5.20㎞)

- 사업기간 : 2004년 ~ 2016년

- 총사업비 : 14,749백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘04년04월 : 광역도로 지정

- ‘07년12월 : 대도시권 광역교통시행계획 고시(건고시 제2007-658호)

- ‘11년12월 : 서울신 구간 사업시행 협약체결(서울시↔하남시)

- 보상 및 공사시행 : 하남시, 비용부담 : 서울시가 하남시에 납부

- ‘12년02월 ~ `15년12월 : 공사(하남시)

- ‘15년05월 : 서울시 구간 개통

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료(하남시)

- 공  사 : 서울시 구간 완료(연장 0.14㎞) (공정 : 100%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31까지(100%)

※ 전체 공정율 :  100%

○ 향후계획

- `16년06월 : 사업비 정산

광역도로-5		사가정 ~ 암사

(담당자 : 김대희, 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강동구 암사동 414-22 ~ 구리시 아천동 58-1

- 규    모 : 도로개설 폭 4~6차로 연장 2.74㎞(서울시 2.1㎞, 구리시 0.64㎞)

- 사업기간 : 2001년 ~ 2016년

- 총사업비 : 432,159백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘01년01월 : 사가정길~암사동간 도로건설 추진 검토(시장방침)

- ‘04년04월 : 제2차 수도권 광역교통5개년계획 계속사업으로 지정

- `01년06월 ~ `03년09월 : 기본설계

- `03년12월 ~ `05년09월 : 실시설계

- ‘06년04월 ~ `16년06월 : 공사

- ‘14년11월 : 개통

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 교량 및 연결도로 완료(연장 2.74㎞) 후 개통(‘04. 11) (공정 : 99%)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31까지(99%)

※ 전체 공정율 :  99%

○ 향후계획

- ‘16년06월  : 공사 준공

광역도로-6		태릉 ~ 구리IC간 확장

(담당자 : 정재훈, 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 중랑구 묵동 ~ 경기도 구리시 인창동

- 규    모 : 폭 6차로→8차로, 연장 4.67㎞(총연장 4.67㎞)

※ 총 연장 중 「구리~포천 민자고속도로」에서 중랑IC 2㎞구간 공사시행

- 사업기간 : 2007년 ~ 2019년

- 총사업비 : 117,184백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진일정

- '09년03월 ~ '09년07월	: KDI 예비타당성조사(기획재정부)

- '09년06월 ~ '14년06월 : 사업시행방안 회의(국토해양부, 서울시, 구리시)

- '14년12월 ~ `15년12월 : 기본계획

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 기본계획 완료, 기본 및 실시설계 예정

- 공  사 : 시기 미도래

- 보  상 : 시기 미도래

※ 전체 공정율 :  10%

○ 향후계획

- '16년04월 : 총사업비 변경 요청

- `16년05월 : 중앙투자심사 예정

광역도로-7		상도교 ~ 호장교간 도로확장

(담당자 : 노지훈, 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 도봉구 도봉동 4번지 ~ 의정부시계간

- 규    모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 0.65㎞(총연장 1.47㎞)

서울시구간 연장 650m (1단계 완료 280m, 2단계 추진 370m)

- 사업기간 : 2008년 ~ 2017년

- 총사업비 : 13,055백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정 :

- ‘08년03월 : 투자심사

- ‘11년11월 ~ `12년03월 : 기본계획(의정부시)

- `13년01월 ~ `14년12월 : 실시설계(의정부시)

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 완료

- 공  사 : 착공 준비중 (공 정 :  -  %)

- 보  상 : 전체물량대비/2015.12.31까지( 40%)

※ 전체 공정율 :  10%

○ 향후계획

-  ‘16년 ~ `17년 : 공사 시행

환승주차장-1		광나루역 환승주차장

(담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 광진구 광장동 307-3 일대

- 규    모 : 주차장 200면, 지하2층, 연면적 6,800㎡

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

- 총사업비 : 8,767백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘16년 2월 ∼  ‘16년 8월 : 기본설계

- ‘16년 9월 ∼  ‘16년10월 : 계약준비 및 공사착수

- ‘17년12월               : 공사준공 예정

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 설계 용역자 선정중

- 보  상 : 부지내 사유지 보상 완료

○ 향후계획

- ‘17년12월 준공 예정

환승주차장-2		강동대로역 환승주차장

(담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 송파구 방이동 433-1번지 일대

- 규    모 : 주차장 200면, 연면적 5,800㎡

- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

- 총사업비 : 10,016백만원

○향후계획(시기미도래)

- 강동대로역 환승주차장은 지하철 9호선 건설에 따른 중앙교통영향심의위원회(2002.9.6.) 의결사항으로서, ′07년 12월 대도시권 광역교통시행계획에 반영됨

- 2015년4월 지하철9호선 2단계 사업(종합운동장역까지)이 마무리 되었고, 강동대로역은 3단계 구간에 포함되어 당해 사업과 연계추진

※ 9호선 3호선 추진현황 : 공정률 57%,□18년12월 개통예정

환승주차장-3		신방화역 환승주차장

(담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 강서구 방화동 217-96일대(마곡지구 주차장용지 I2)

- 규    모 : 주차장 200면, 지하1층/지상3층, 연면적 9563㎡

- 사업기간 : 2016년 ~ 2017년

- 총사업비 : 19,149백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진 일정

- ‘13년 7월 ∼  ‘13년12월 : 건립계획 방침수립, 투자심사, 대행위탁계약체결(SH공사)

- ‘14년 1월 ∼  ‘14년 7월 : 기본설계 완료, 토지매입계약체결(SH공사)

- ‘14년11월 ∼  ‘15년9월 : 실시계획작성 고시, 실시설계, 계약발주 및 공사착수

○ 추진현황(정상)

- 설  계 : 기본 및 실시설계 완료

- 공  사 : 토공사 완료, 지하1층 기초 및 바닥판 공사중

- 보  상 : 토지 매입 완료

※ 전체 공정율 : 24.1%

○ 향후계획

- ‘16년10월 준공 예정

환승시설-1		도봉산역 광역환승센터

(담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉동 288-19일대

- 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 16,597㎡, 주차면 364면

- 사업기간 : 2008년 ~ 2013년

- 총사업비 : 36,846백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진 실적(정상)

- ‘08년 4월 ∼ ‘10년 1월 : 건립계획 방침수립, 기본 및 실시설계용역, GB관리계획 승인

- ‘10년 1월 ∼ ‘10년11월 : 공사계약 및 착공, 인허가 협의 완료

- ‘10년11월 ∼ ‘13년 6월 : 공사시행, 준공 및 시운전

○ 참고사항

- ‘13년7월 개관

환승시설-2		사당역 복합환승센터

(담당자 : 김인수, 교통정책과, 2133-2236

임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 서초구 방배동 507-1 일대

- 규    모 : 대지면적 17,777㎡, 주차면수 200면

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

- 총사업비 : 미정

※서울메트로의 사업참여 규모에 따라 총사업비 및 환승센터 규모 변경 예정

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘15년 7월∼‘15년12월 : 지구단위계획 수립

- ‘16년 1월∼‘16년 6월 : 부지 현물출자(시→서울메트로),

- ‘16년 6월∼‘16년12월 : 기본 및 실시설계, 국토부 복합환승센터 지정요청

- ‘17년 1월∼‘18년12월 : 공사 발주 및 공사시행(서울메트로)

○ 추진현황 및 향후계획(정상)

- 현재 수립한 지구단위계획상 최고높이 100m, 용적률 930% 규모로 건축할 수 있는 부지로서, 우리시에서 서울메트로로 현물출자 진행중임

- 향후 서울메트로 주관으로 복합환승센터를 포함한 역세권 개발 예정

환승시설-3		개화역 광역환승센터

(담당자 : 임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 강서구 개화동 490일대

- 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 16,788㎡, 주차면수 399면

- 사업기간 : 2008년 ~ 2012년

- 총사업비 : 36,076백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진 실적(정상)

- ‘08년5월∼ ‘09년10월 : 건립계획 방침수립, 투자심사, 기본 및 실시설계용역

- ‘09년11월∼‘10년1월 : GB관리계획 승인, 공사계약 및 착공

- ‘10년 2월∼ ‘12년 4월 : 공사시행, 준공 및 시운전

○ 참고사항

- 2012.4월 개관

환승시설-4		복정역 복합환승센터

(담당자 : 김인수, 교통정책과, 2133-2236

임종민, 주차계획과, 2133-2363)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 송파구 장지동 600-2 일대(위례택지지구내 주차장용지)

- 규    모 : 대지면적 18,459㎡, 주차면수 530면

- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

- 총사업비 : 37,700백만원(LH공사 광역교통개선부담금)

※도시철도공사의 사업참여 규모에 따라 총사업비 및 환승센터 규모 변경 예정

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정

- ‘08년 3월∼ ‘10년10월 : 위례신도시 광역교통개선대책 수립(국토부)

복합환승센터 시범사업(사당․복정) 참여계획 수립(시)

- ‘14년 6월∼ ‘14년 9월 : 도시철도공사의 사업참여 요청 및 타당성조사 지시

- ‘15년 4월             : 부지내 행복주택 포함요청(국토교통부)

- ‘15년 7월∼ ‘15년12월 : 도시철도공사의 예비 타당성 용역 완료

- ‘16년 2월∼ ‘16년12월 : 지구단위계획 변경 및 부지 정형화 협의(시→국토교통부)

○ 추진현황 및 향후계획(부진)

- 부지내 도시철도공사의 수익시설과 국토교통부의 행복주택을 포함하기 위해서는 현 지구단위계획을 변경하여 건축가능 용적을 확대해야 하며,

- 부지가 위례 신도시 택지개발지구내 위치하므로 부지 정형화 등 협의 필요

- 향후 위 사항들에 대한 국토교통부 협의 결과에 따라, 도시계획사항을 확정하고 설계 착수 예정

공영차고지-1		구리 토평 공영차고지

(담당자 : 김은진, 주차계획과, 2133-2372)

○ 사업개요

- 위    치 : 경기도 구리시 토평동 465-39일원

- 규    모 : 대지면적 9,954㎡ 차고지 198면

- 사업기간 : -

- 총사업비 : 10,355백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

- 해당사항 없음

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업대상 아님

공영차고지-2		서울 우면 공영차고지

(담당자 : 김은진, 주차계획과, 2133-2372)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 서초구 우면동 547일대

- 규    모 : 차고지 400면

- 사업기간 : -

- 총사업비 : 43,200백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업보류 : 주민 반대로 도시계획시설 입안 보류

공영차고지-3		서울 금천 공영차고지

(담당자 : 김은진, 주차계획과, 2133-2372)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 금천구 시흥동 980일대

- 규    모 : 대지면적 8,900㎡, 차고지 80면

- 사업기간 : -

- 총사업비 : 35,000백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업보류 : 신안산선 석수역정거장 건립 예정지구

공영차고지-4		서울 구로 공영차고지

(담당자 : 김은진, 주차계획과, 2133-2372)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 구로구 천왕동 6-2

- 규    모 : 대지면적 11,000㎡, 차고지 100면

- 사업기간 : -

- 총사업비 : 35,000백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업보류 : 주민반대로 도시계획시설 입안 철회

공영차고지-5		서울 염곡 공영차고지

(담당자 : 김은진, 주차계획과, 2133-2372)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 서초구 염곡동 300일대

- 규    모 : 차고지 156면

- 사업기간 : 2010년~2018년

- 총사업비 : 139,077백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

○ 추진(예정) 일정 : 건설공사 시행과정별로 추진일정(예정)을 작성

- ‘16년’ 3월 ∼  ‘16년’12월 : 공유재산관리계획 및 예산확보

- ‘17년’ 1월 ∼  ‘18년’12월 : 매입비 지급 및 소유권이전

○ 추진현황 및 향후계획

- 2009년「공영차고지 조성현황 및 추가조성계획」에 따라 서초구 염곡동 300일대를 연차적으로 매입하여 공영차고지를 조성(총 3단계)하는 계획으로 현재 2단계 완료하였으며, 나머지 3단계도 추진중임

공영차고지-6		서울 상계 공영차고지

(담당자 : 김은진, 주차계획과, 2133-2372)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 노원구 상계동 690

- 규    모 : 대지면적 2,862, 차고지 30면

- 사업기간 : -

- 총사업비 : 12,000백만원

○ 연차별 투자실적 : 별첨

- 해당사항 없음

○ 추진현황 및 향후계획

- 사업대상 아님