㈜도화엔지니어링외 1개사	감리 검토 의견서	2015. 04. 23
검 토 건 명	서원마을 완충녹지 민원요청에 대한 검토
관 련 근 거	도시기반시설본부-15-2147 (2015.04.20)	작성자 : 곽경표

1. 검토요지

구리암사대교 연결도로건설공사 구간의 서원마을 주민대표들로부터 완충녹지 조성구간에 대한 보완시설 요청사항에 대해 유지관리기관인 강동구청과 협의된 사항을 검토보고 함.

* 첨부 : 서원마을 주민요청 사항 보고 (2015.03.12)

2. 민원 내용

가. 위치도 및 평면도

나. 요청내용 및 조치사항

요청내용	개 념 도	조치사항
1.완충녹지 성토 2m 상향 요구 (마을에서 교량이 안보이도록 일부구간 상향요구)		•암사IC RAMP-F 적재토사 유용조치 (V=788㎥) • 소요공사비 : 430천원
2. 조경석 설치 • 마을도로에서 완충녹지까지 4m 정도 후퇴 마운딩조성하고 측구 뒤 조경석 설치		• 조경석 쌓기 (H=1.2m, L= 58m) • 소요공사비 : 20,660천원
3. 자전거도로가 조성되는구간은 녹지가 부족하므로 7.5m 도로와 접속되는 사면에조경석을 쌓아 조성되는 공간에 수목식재하여 마을에서 교량 차폐 요구		• 조경석 쌓기 (H=1.2m, L= 23m) • 소요공사비 : 8,170천원

요청사항	개 념 도		조치사항
4. 조경석앞 V형 측구는 주민안전을 위해 그레이팅 뚜껑 설치 요구	V형측구	U형측구	• 스틸그레이팅 뚜껑 설치 시 V형측구⇒U형측구 로 변경 필요 (길이:58m) • 소요공사비 : 증4,050천원

3. 검토의견

☐ 서원마을 완충녹지 조성구간 보완요청 민원에 대하여 발주처와 유지관리기관인 강동              구청에서 협의통보 된 사항에 대해 아래와 같이 검토하여 보고함.

가. 성토높이 조정(2m 추가 성토)

- 현장 내 발생 유용토를 활용하여 조성 가능함.

나. 조경석 쌓기 및 수로뚜껑 설치

- 완충녹지가 마을도로에 근접하여 경사지게 조성되므로 강우 시 토사유출에  대한               우려와 높게 조성되는 사면에 대한 시각적 미관을 고려하여 주민들이 요청한 바와               같이 도로경계에서 약 4m정도 이격하여 사면 하단부에 조경석설치 및 수로에 뚜껑을             추가설치하면 보다 안정성이 확보될 것으로 판단 됨.

다. 자전거도로와 7.5m도로 사이 자연석 쌓기

- 자연석 쌓기로 부지를 확보하여 그 공간에 수목식재 시는 자전거 도로주변 및                   마을주변이 친환경적으로 쾌적하게 조성되므로 주민의견 반영이 타당 함.

라. 소요 공사비 : 약 33백만 원

공 종	단위	수 량			공사비 (단위 천원)
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
비다짐성토	㎥	-	788	788	-	314	314
조경석쌓기	ton	-	88	88	-	19,273	19,273
v형측구	m	58	-	감58	2,853	-	-2,853
U형측구	m	-	58	58	-	7,272	7,272
직접공사비					2,853	26,859	24,006
제경비					1,547	12,411	10,864
관급자재비					1,560	-	-1,560
총공사비					5,960	39,270	33,310

붙임 : 1. 유관부서 협의공문 사본 1부

2. 서원마을 주민요청사항 보고 1부

3. 요청구간 평면도 및 단면도

4. 시공사 관련공문 사본 1부 끝.

확인자 : 책임감리원  우 재 경 (인)

서원마을 주민요청 사항 보고

□ 일 시 : 2015. 03. 12(목) 09시~10시

□ 민원인

o 서원마을 : 김삼달 회장 등 마을대표 6인

o 현장관계자 : 감리단장, 연결도로 소장, 암사대교 소장

□ 요청내용 : 서원마을 회장으로 공사 관련 면담 요청 사항 임,

1. 암사대교가 마을에서 안보이도록 완충녹지 성토 높이 추가 요구

- 당초 계획고 보다 2m 정도 추가

<검토의견> 추가 성토해도 문제점 없음

2. 완충녹지 조성구간에 토사유출 방지를 위해 조경석 설치 요구

- 규모 : 조경석 높이 1.2m, 길이 58m

3. 녹지하단부 설치 U형수로 안전위해 스틸그레이팅 뚜껑 설치요구

- 당초 V형 측구 → U형 측구 L=73m

4. 자전거도로와 7.5m 도로 사면경계부에 자연석 쌓고 수목 추가식재 요구

- 조경석 높이 1.2m, 길이 23m

5. 완충녹지는 도로에서 약 4m 이격하여 설치하고, 이격공간은 골재 포설 요구

- 완충녹지앞 마을 휴게공간 기능으로 활용하겠다 함.

□ 보고내용

o 현장 면담결과를 본부에 보고 조치가능 여부를 알려줄 것을 요청

o 소요 공사비 : 약 35,000천 원

첨부 : 1. 평면도 및 사업비 신출서 각 1부 끝

2015. 03. 12(목)

보고자 : 구리암사대교연결도로건설공사 책임감리원  우재경