문서번호	도로시설과-4784
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장

석관동 두산아파트앞(동부간선로)

방음벽 설치공사 추진 계획 보고

2014. 3

도 시 안 전 실

(도로시설과)

석관동 두산아파트앞(동부간선로)

방음벽 설치공사 추진 계획 보고

동부간선로 월릉IC 두산아파트 주변 소음 저감을 위한 방음벽 설치공사 추진 계획 보고임

□ 사업 개요

❍ 위    치 : 동부간선로(성수방향) 월릉 IC 두산아파트 앞(석관동)

❍ 규    모 : 방음벽 신설 H=6m, L=250m

❍ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2014. 12

❍ 총사업비 : 1,000백만원(민간대행사업비)

❍ 사업시행 : 서울시설공단

□ 추진 경위

❍ 2011. 8.23 : 소음저감대책 요구(233회 임시회, 이경애 의원)

❍ 2011.11.14 : 소음측정(보건환경연구원)

- 소음 측정값 : 71dB(111동 10층, 119동 16층)

❍ 2012. 9.23 : 저소음 포장 24a 시행(북도도로사업소)

❍ 2013. 8.12 : 소음민원 재발생에 따른 현장 조사(이경애 의원 등 주민대표, 도로시설과)

❍ 2013. 9.23 : 무인과속단속 카메라 설치 요청(市 → 서울지방경찰청)

※ 소음 목적 무인단속장비 설치 곤란 회신(‘13.9.23)

❍ 2013.12.   : 2014년 방음벽 설치 예산 편성

❍ 2014. 2. 4 : 두산아파트 입주자 대표 면담(공단)

❍ 2014. 2.18 : 방음벽 설치 사업계획 자료 제출(공단 → 市)

□ 추진 방법

❍ 실시설계 용역 시행

- 현장 여건에 적합한 방음벽 설치 규모 및 형식 결정

※ 디자인심의 및 교통소통대책 심의 병행

- 소요예산 : 45,000천원(추정)

∙ 용역 타당성심사 후 예산 배정

❍ 공사 시행

- 실시설계 용역 및 디자인심의 결과에 따라 계약심사 후 공사 시행

□  향후계획

○ ‘14. 3. : 실시설계 타당성 심사 및 용역 발주

○ ‘14. 4. ~ 5월 : 용역시행

○ ‘14. 5. : 계약심사 및 공사 발주

○ ‘14. 6. ~ 12월 : 착공 및 공사 시행

첨 부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.