석면처리 감리용역 과업내용서

2018. 5.

서 울 특 별 시

공예박물관조성추진반

Ⅰ.용역과업설명서

1.1 과업의 목적

본 과업은 공예박물관 건립공사 석면해체․제거․처리 작업에 대한 감리용역으로서 석면안전관리법 제30조의 규정에 따라 석면해체·제거작업 단계에서 관계규정 등의 내용에 따라 대상사업장의 석면해체·제거작업 및 처리가 적법하게 이루어지는지의 여부를 확인하고 기술지도를 하는데 있다.

1.2 용어의 정의

가. 발주자

석면해체·제거․처리 작업 및 이에 관한 감리용역을 발주하는 발주기관을 말한다.

나. 석면해체․제거 작업자

「산업안전보건법」제38조의4제1항에 따라 고용노동부장관에게 등록한 자(이하 “시공자”라 한다)를 말한다.

다. 감리자

석면해체·제거작업에 관한 발주자의 권한을 대행하여 석면해체·제거작업공사가 관계법령에 따라 적법하게 시공되는지 여부의 확인과 품질·시공관리에 대한 기술지도를 수행(이하 “감리자”라 한다)하는 영업자를 말한다.

라. 석면해체 감리원

석면해체·제거작업 감리업무를 수행하고자 하는 자로서 석면안전관리법 제30조에 따른 일정 요건을 갖춘 자(이하 “감리자”라 한다)를 말한다. 감리자에 소속되어 감리업무를 직접 수행하는 사람(이하 “감리원”이라 한다)을 말한다.

마. 공사관리관

발주자로서의 감독업무 및 감리자와 계약으로 정한 사항, 기타 사항의 업무를 수행하는 발주자의 소속직원을 말한다.

1.3 과업의 위치

서울시 종로구 율곡로3길 4 구 풍문여고 기존 건물

1.4 과업의 대상

기존 건축물 내 석면이 포함된 건축자재 해체․제거․처리

1.5 과업의 기간

용역 착수일로부터 20일

Ⅱ. 일반과업내용서

2.1 감리업무의 수행

가. 석면해체·제거작업 사업장 주변 석면배출허용기준 준수여부 관리

나. 「산업안전보건법」제38조의5제1항에 따른 석면농도기준 준수여부 관리

다. 해당 석면해체·제거작업 계획의 적절성 검토 및 계획대로 해체·제거작업이 수행되고 있는지 여부 확인

라. 개선계획의 타당성 검토 등 사전적인 평가, 자문 관련 사항

마. 인근지역 주민들에 대한 석면 노출방지 대책 검토, 확인

바. 해당 석면해체·제거업자의 관련 법령, 규정 준수여부 검토, 확인

사. 법 제30조제3항 각 호 및 제4항 관련 사항

아. 감리원은 계약서, 과업내용서, 설계도서와 각종 법규에 따라 업무를 수행할 수 있도록 용역착수와 동시에 필요한 도서를 충분히 숙지하고 감리업무를 성실히 수행하여야 한다.

2.2 감리원의 근무자세

가. 감리원은 본 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전관리 등에 대한 기술지도를 하여야 한다.

나. 감리원은 당해공사의 특성, 공사의 규모 및 현장조건을 감안하여 현장별로 수립한 체크리스트에 따라 설계도서에서 정한 규격 및 치수 등에 대하여 시설물의 각 공종마다 검측업무를 수행하여야 한다.

다. 감리원은 발주자가 검측업무를 요청할 경우에는 즉시 검측업무를 수행하고 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.

라. 감리원이 업무와 관련하여 발주자에게 보고할 경우에는 지원업무수행자를 경유하여야 하며, 지원업무수행자가 관련자료의 제출 및 검토요구 시 이에 응하여야 한다.

2.3 감리업무의 범위

가. 착수단계의 감리업무는 다음에 정하는 기준 이외에는 관계규정에 의한다.

1) 착수단계

가) 감리원은 설계도면, 시방서, 내역서 등의 내용을 완전히 숙지하여야 하고 공사현장여건에 부합되도록 경제적이고 시공성이 뛰어나며 품질향상에 기여하도록 새로운 공법개선, 예산절감에 노력하여야 한다.

나) 감리원은 공사계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장실정과의 부합 여부  등 현장시공을 주안으로 하여 검토하여야 한다.

다) 설계도서 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시에는 설계도서 등을 검토한 후 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 제출하여야 한다.

라) 감리회사 및 감리원은 발주처에 착수보고 후 감리자지정현황신고서를 석면해체·제거작업개시 전까지 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

마) 감리원은 해당관할 시장·군수·구청장에 감리자지정현황신고서 미제출로 인한 공사지연이 발생시 추진방안을 검토하고, 수정·보완하여 완료하도록 한다.

2) 시행단계

가) 해당공사가 설계도서 등에 일치되게 시공되는가를 현장에서 확인하는 것이 기본적인 업무이므로 모든 업무에 우선하여 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

나) 감리원은 시공확인 및 검측사항에 대하여 각 작업 단계별 공사착수 이전에 Check List를 작성하여 발주자의 별도승인을 받아야 한다.

다) 발주자의 지시사항 또는 시공자의 제안에 의하여 설계변경이 필요한 경우에는 감리원은 설계변경 타당성 여부를 검토하여 발주자에게 보고하여야 한다.

라) 감리원은 본 공사와 연관되는 공사로서 상호조정이 필요한 경우에는 합동조정회의 등을 실시하여 적극적으로 협조하여야 한다.

마) 감리원은 본 공사의 계약서, 설계도서, 시방서 및 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 시공하는 경우에는 재시공 등 필요한 조치를 하여야 하며, 시공자가 이에 따르지 아니하거나 공사에 중대한 결함이 발생할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 공사를 중단하게 하고 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

바) 감리원은 본 공사의 인·허가와 관련하여 발생되는 제반사항에 대해 발주자의 지시에 따라 업무를 수행하여야 하며, 필요시 인·허가서류 작성 등 관련 업무에 협조하여야 한다.

3) 준공단계

감리회사 및 감리원은 석면해체·제거작업이 완료된 때에는 별지 제2호서식의 감리 완료보고서를 15일 이내에 시장․군수․구청장에게 제출하여야 한다.

2.4 감리원의 운영

가. 감리원이 작성하여야 할 일지에는 6하 원칙에 의거 문제점 및 책임소재를 명확히 규명할 수 있도록 작성하여야 한다.

나. 발주자는 당해공사와 관련하여 공법의 변경, 특수공종 등 기술적인 사항에 대하여 자문을 요구할 수 있으며 감리자는 지체없이 이에 응하여야 한다.

다. 감리원은 엄격한 품질관리를 위하여 품질시험을 철저히 시행하여야 하며 부적합사항에 대해서는 기술적인 검토 후 재시공이 완료될 때 까지 후속 공사를 진행하지 않도록 한다.

라. 공사준공 후 중대한 결함사항이나 부실공사가 발생하였을 경우에 이의 원인이 감리원의 관리, 감독소홀에 기인한 것으로 입증될 경우에는 감리원은 모든 책임을 져야 하며, 이에 대한 발주자의 어떠한 조치에도 이의를 제기할 수 없다.

2.5 감리원의 날인등록

당해 감리용역에 참여하는 감리원은 공사착공과 동시에 개인별 사용인감 및 날인을 발주자에게 제출하여 등록하여야 한다.

2.6 감리원의 연장근무

가. 감리원은 시공자의 공사시공, 서류작성, 안전관리의 업무 등 공사시행 상 필요한 경우이거나 발주자가 지시하는 경우에는 야간이나 공휴일에도 근무하여야 한다.

나. 감리원은 당해공사의 적정한 품질확보, 공사관리 등을 위하여 필요시 작업개시 전부터 완료시 까지 근무하여야 한다.

다. 근무요령

1) 시공자로부터 추가 작업(연장, 연휴, 공휴일작업) 계획서를 제출받아 적정여부 검토 후 시공자에게 작업승인을 통보하고 지원업무수행자에게 제출한다.

2) 감리원은 추가근무(연장, 연휴, 공휴일)시 근무일지를 작성하여야 한다.

3) 추가근무 상황을 공사감독관에게 보고하여야 한다.

2.7 발주자에게 보고하여야 할 사항

가. 감리원은 감리업무를 착수하는 즉시 비상연락처의 전화번호 및 FAX, 우편연락처 등을 발주자에게 제출하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며, 변경되었을 경우에도 제출하여야 한다.

나. 설계도서 등의 사전검토

1) 감리원은 공사계약서, 설계도면, 시방서, 내역서 등의 계약내용과 당해 공사의 조사, 설계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여야 하고 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 기할 수 있도록 설계도서를 검토하여 발주자에게 보고하여야 한다.

2) 감리원은 설계도서, 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장실정과의 부합여부 등에 대하여 아래사항을 포함하여 검토하여야 한다.

가) 현장조건의 부합여부

나) 시공 가능여부

다) 타 공정과의 상호 부합여부

라) 설계도서의 누락, 오류여부

마) 시공 시 예상되는 문제점 등

다. 시공계획의 검토확인

감리원은 시공자로 하여금 각 공종을 시작하기 전에 해당공종에 대하여 구체적인 품질확보 방안이 포함된 시공계획서를 제출받아 승인 후 시공토록 하여야 한다.

2.8 실정보고

가. 감리원은 현지여건상 당초 설계대로 시공이 불가능하거나 구조상 변경이 필요한 경우에는 시공자로 하여금 대안을 제시토록 하고 이를 검토한 후 최적의 방안을 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

나. 실정보고 후 발주자의 승인지시가 있을 때 까지 후속작업을 진행하여서는 안된다.

다. 감리원은 공사시공 중 불가항력적인 재해의 발생, 공사중단의 필요성 등 감리원의 권한에  속하지 아니하는 사태가 발생될 경우 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

2.9 사진촬영

가. 감리원은 시공자가 공사 시공중의 주요부분에 대한 사진을  촬영하여 비치토록 하여야 한다.

나. 감리원은 시공 후 확인할 수 없는 부분에 대해서는 시공자로 하여금 사진 촬영하여 보관하였다가 준공 후 CD에 수록하여 발주자에게 제출토록 하여야 한다.

다. 사진첩은 각 공종별로 구분하여 작업순서대로 일목요연하게 작업광경을 알아볼 수 있도록 보관하여야 한다.

2.10 공사 중지명령

가. 감리원은 시공자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용과 적합하지 않게 시공하는 경우에는 공사 중지명령 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

나. 감리원으로부터 중지명령 등의 지시를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

다. 감리원이 시공자에게 공사중지명령 등 필요한 조치를 취한 때에는 지체 없이 이를 발주자에게 보고하여야 한다.

라. 감리원은 시공자가 재시공 또는 공사 중지명령 등에 대한 필요한 조치를 이행하지 않을 때에는 시공자에 대한 제재조치를 취하도록 발주자에게 요구하여야 한다.

2.11 공정관리

가. 일반사항

감리원은 당해 석면처리가 과업내용서 등에 의거하여 완성될 수 있도록 공정관리를 계획하고 수립, 운영할 수 있도록 조치하여야 한다.

나. 진도 관리

1) 감리원은 당해 용역자자로부터 공정표에 의거한 월간 및 주간 상세공정표를 사전에 제출받아 검토․확인하여야 한다.

2) 감리원은 매주 또는 매월 정기적으로 예정공정과 실시공정을 비교하여 공정의 진도를 확인하여야 한다.

3) 감리원은 주간단위의 공정계획 및 실시를 시공자로부터 제출받아 검토/확인하고, 필요한 경우 용역자와 합동으로 공사추진회의를 실시하고 회의록을 유지하여야 한다.

다. 공정보고

1) 감리원은 수정공정계획을 수립할 때에는 해당 용역업체로부터 수정공정계획표를 제출받아 검토 후 발주자에게 보고하여야 한다.

2) 감리원은 추진계획과 실시사항을 정기감리보고서에 포함하여 발주자에게 보고하여야 한다.

3) 감리원은 용역자가 준공기한 연기원을 제출한 경우에는 타당성 여부를 확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

2.12 안전관리

가. 감리원은 건설공사의 안전시공을 위해 안전조직을 갖추도록 하여야 하고 안전조직은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하여야 한다.

나. 감리원은 시공자 관계법규 및 제반규정에 의하여 작성한 건설공사 안전관리계획서를 용역 착수 전에 제출받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 보완하도록 한다.

다. 감리원은 시공자의 안전관리자를 지도․감독하여야 하며 안전관리계획서의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 안전관리 업무에 대해 확인하여야 한다.

라. 감리원은 산업재해예방을 위한 안전관리지도에 적극적인 노력을 경주하고 시공자에게 안전관계법규를 이행하도록 감리하여야 한다.

2.13 민원관리

가. 감리원은 민원이 발생될 수 있는 요소를 검토하여 시공자에게 사전에 방지토록 조치하고 발생된 민원은 발주자에게 보고하고 시공자와 논의 후 조속히 처리하여야 한다.

나. 발주자에게 제출된 민원에 대하여 조사하도록 지시를 받은 경우에는 필히 기일엄수하여 조사․보고하여야 한다.

다. 불가피하게 기일을 엄수하여 보고하지 못할 경우에는 그 사유를 첨부하여 발주자 민원처리지침에 따라 중간보고를 하여야 한다.

라. 감리원은 민원에 대한 정보를 사전 입수한 경우에는 발주자에게 보고하고 민원발생원인 및 대책 등을 수립하여 사전 대처하여야 한다.

마. 민원인이 감리원 또는 현장관계자와 면담요구가 있을 시에는 요구사항을 친절하고 성실하게 청취한 후 민원내용, 현지여건 및 검토의견을 발주자에게 즉시 보고하고 사전대책을 수립 후 조치하여야 한다.

바. 감리원은 시공자가 하도급이 있는 지를 수시 확인하고 이와 같은 경우가 있을 시에는 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

사. 감리원은 필요한 경우 시공자의 노임지불대장을 수시 확인하여야 하며, 노임 체불이 있을 시에는 이에 대한 대책을 수립하여 발주자에게 보고하여야 한다.

2.14 설계변경

가. 감리원은 시공 중 발생되는 설계변경 사항은 발주자가 제시하는 설계변경 처리규정에 의거 조치하고 이에 따르는 행정사항은 감리원이 주도하여 처리하여야 한다.

나. 감리원은 공사시행 과정에서 경미한 설계변경사항이 발생한 경우에는 설계변경 관련서류를 시공자로부터 제출받아 검토․확인하고 발주자에 서면보고한 후 발주자의 지시에 따라 처리한다.

다. 발주자의 지시에 의한 설계변경이 발생한 경우에는 감리원은 시공자로부터 설계변경 관련서류를 제출받아 검토․확인하여야 한다.

라. 감리원은 시공자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 개선사항 등으로 인한 설계변경을 요청한 경우에는 기술검토의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

마. 감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액조정 업무처리를 지체함으로서 시공자가 자재수급 및 기성부분을 인정받지 못하여 공사추진에 지장을 초래하지 않도록 적기에 설계변경계약이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

2.15 기록관리

가. 감리원은 다음 각호의 문서가 포함된 감리보고서를 매월 문서 및 CD로 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

1) 감리보고서 표지

2) 감리원 업무일지

3) 품질시험․검사 현황

4) 검측요청․결과 통보서

5) 설계변경현황

6) 주요공사 단계별 시공현황

7) 안전사고 보고서

8) 기타

나. 감리원은 당해 공사에 관하여 다음 각호의 사항을 포함한 최종감리보고서를 문서 및 CD로 작성하여 감리기간 종료 후 20일이내 발주자에게 제출하여야 한다.

1) 사업개요 : 석면해체·제거작업공사 및 감리용역 개요

2) 기술검토내용 실적

3)  공사추진내용 실적 : 인력, 장비투입현황 등

4)  검측내용 : 공종별 불량률, 부실 유형별 원인 및 방지대책

5) 우수시공 및 실패시공 사례

6) 품질시험․검사, 품질관리비 사용실적

7) 안전관리실적 : 안전관리 활동, 안전관리비 사용실적, 안전사고 발생건수 및 원인 및 방지대책

다. 감리원은 업무일지를 작성할 때에 업무내용을 요약․정리함과 동시에 공사 추진내용, 검측결과, 현장실정보고 등을 빠짐없이 작성하여야 한다.

2.16 발주자의 자문요구

발주자는 본 용역과 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 감리원에게 자문을 요구할 수 있으며 감리원은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

2.17 기성 및 준공검사

가. 기성․준공검사

1) 감리원은  공사자로부터  기성 또는  준공검사원을 접수하였을 때에는 신속하게 검토·확인한 후 감리자에게 제출하여야 한다.

2) 감리자는 기성 또는 준공검사원을 접수하였을 경우에는 발주자에 보고하여야 한다.

3) 기성 또는 예비준공검사를 함에 있어 감리원으로도 검사가 가능하다고 인정되는 경우에는 발주자와 협의하여 감리원을 검사자로 임명할 수 있다.

4) 검사자는 당해공사의 검사를 완료하고 검사조서를 작성하여 검사결과를 감리자에게 보고하여야 하며 감리자는 검토 후 신속히 발주자에게 통보하여야 한다.

5) 검사자는 당해 공사의 현장에 감리원 및 시공자 또는 그 대리인 등을 입회시켜 계약서, 시방서, 설계서, 기타 관계서류에 따라 검사하여야 한다.

6) 검사자는 검사에 합격되지 아니한 부분이 있을 때에는 공사자에게 보완하도록 조치하고 재검사하여야 한다.

2.18 하자처리

감리자 및 감리원은 공사 준공 후 발주자와 공사자간의 시설물의 하자 보수처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있을 경우 검토의견서를 제출하여야 하며, 발주자가 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다.

2.19 발주자의 지도감독

가. 발주자는 지원업무수행자로 하여금 당해공사 수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원업무, 감리원의 지도․점검업무 등을 수행한다.

나. 감리원은 지원업무수행자가 공사의 원활한 추진을 위하여 필요한 사항 또는 잘못된 사항 등을 시정하기 위한 지시에 정당한 사유가 없는 한 따라야 한다.

다. 감리자는 감리원의 업무수행 능력부족 또는 고의․과실 등으로 설계변경지연, 검측지연, 준공검사지연 등의 사실이 발견되어 발주자가 해당 감리원의 교체를 요구한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하고 이로 인한 모든 책임은 감리자가 갖는다.

Ⅲ. 특별과업내용서

1.  감리용역은 석면해체·제거작업공사의 계약을 체결한 후 감리용역기간을 감독관 협의 및 승인 후 조정할 수 있다.

2.  석면해체작업 감리용역은 착수 및 준공일은 감독관과 협의하여 조정할 수 있다.

3. 감리원의 배치기준은 감리원 자격 기준에 맞는 감리원 자격을 갖춘자 1인 이상을 배치할 수 있다.

4. 감리원은 본공사의 주공정에 맞추어 공사현장에 상주하여 총 공사 준공기간 내 감리업무 배치계획을 적절히 수립하여 수행하여야 한다.

5. 과업의 연면적은 현장여건에 따라 변동될 수 있다.

6. 석면해체·제거작업 및 석면처리 완료시까지 감리업무를 수행하여야 한다.

Ⅳ. 보안유의사항

1. 국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어있는 함에 보관하고 열쇠는 감리원이 소지하여야 한다.

2. 모든 비밀문서는 관리번호를 부여하고, 보관관리기록부에 기록한 후 시건장치가 이중으로 되어있는 함에 보관하며 열쇠는 감리원이 소지하여야 한다.

3. 감리원은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주자의 사전서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

4. 편집된 모든 도서 및 자료는 다른 목적에 사용할 수 없으며, 감리업무수행 중 취득한 사실을 누설하여서는 아니 되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 경우에는 감리원은 물론 감리자가 모든 책임을 갖는다.

5. 감리원은 보안대책을 수립하여 감리자 및 참여직원이 서명한 보안각서를 제출하여야한다.

6. 사무실 및 설계도서 등의 보안상관리는 관리책임자 정․부를 지정하여 대장으로 기록 관리하여야 하며 특히 개인용 컴퓨터(PC) 및 주변장치에 대한 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

Ⅴ. 부실측정 및 조치

1. 발주자는 감리원이 감리를 성실하게 수행하지 아니하여 부실공사가 발생할 경우에는 부실의 정도를 측정하여 감리자 및 감리원에 대하여 관련법에 따라 처분할 수 있다.

2. 부실정도의 측정기준, 불이익 내용, 업무정지 기간 등은 관련규정에 의한다.

3. 감리업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 인하여 발주자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 감리자가 이를 배상하여야 한다.

Ⅵ. 기타사항

1. 일반 과업내용서의 내용과 특별 과업내용서의 내용이 서로 상이한 경우에는 특별과업내용서가 우선한다.

2. 일반 및 특별 과업내용서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주자와 협의하여 시행한다.

3. 일반 과업내용서에 명시되지 아니한 내용 및 서식은 감리업무수행지침서에 따른다.

4. 인수한 설계도서는 공사완료 후 발주자에게 반납하거나 또는 발주자와의 협의에 따라 폐기처분한다.

[별지 제1호서식]					(앞 쪽)
감리자 지정 현황 (변경)신고서														처리기간
발주자	회사명					대표자
	소재지	(전화번호: )
감리자	회사명					법인(사업)번호
	대표자					감리업등록번호
	소재지	(전화번호: )
시공자	회사명			대표자						공사업등록번호
	소재지	(전화번호: )
감리 용역 현황	용역명
	현장 주소	(전화번호: )
	용역 개요	1. 석면이 함유된 분무재, 내화피복재량( ㎡) 2. 제1호 이외의 석면건축자재량( ㎡)
	기간 및 금액	공사기간	～					공사금액					천원
		공사감리기간	～					공사감리금액					천원
감리원 배치 현황	직 무	등 급	성 명					주민등록번호					감리원 배치기간(일수)
													～ ( )
													～ ( )
													～ ( )
변경 내역	구 분		변경 전								변경 후
	변경내용
	※ 감리원이 변경된 경우 아래의 해당 사유에 표기 □군 입대 □4주 이상의 입원 또는 치료 □부도ㆍ폐업으로 인한 퇴직 □이민 □사망 □발주자의 교체 요청 □퇴사 또는 휴직 □양도ㆍ양수 또는 법인합병으로 인한 퇴직 □3개월 이상의 공사 착공 지연 또는 공사 중지
감리자 확인	위에 적힌 내용이 사실임을 확인합니다. 감리자 회사명: 대표자명: (서명 또는 인) 확인자 성명 및 연락처:
「석면안전관리법」 제30조제2항 및 석면해체작업 감리자 기준 고시 제6조제1항에 따라 감리자 지정(변경) 현황을 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 시장․군수․구청장 귀하
□ 첨부서류: 뒤쪽 참고
210mm×297mm(신문용지 54g/㎡(재활용품))

(뒤쪽)

□ 첨부서류

1. 배치 현황 신고의 경우

가. 석면해체제거작업 예정공정표 사본 1부

나. 석면조사분석 결과서 사본 1부

다. 감리용역계약서 사본 1부

라. 감리원의 재직증명서 각 1부

2. 배치변경 신고의 경우

가. 감리용역계약이 변경된 경우

1) 감리용역계약의 변경을 증명할 수 있는 서류 1부

2) 석면해체제거작업 예정공정표 사본(감리금액ㆍ감리기간이 변경된 경우만 제출) 1부

나. 감리원이 변경된 경우

1) 감리원의 재직증명서 각 1부

[별지 제2호서식]
감리 완료보고서													처리기간
발주자	회사명					대표자
	소재지	(전화번호: )
감리자	회사명					법인(사업)번호
	대표자					감리업등록번호
	소재지	(전화번호: )
시공자	회사명			대표자						공사업등록번호
	소재지	(전화번호: )
감리 용역 현황	용역명
	현장 주소	(전화번호: )
	용역 개요	1. 석면이 함유된 분무재, 내화피복재량( ㎡) 2. 제1호 이외의 석면건축자재량( ㎡)
	기간 및 금액	공사기간	～					공사금액				천원
		공사감리기간	～					공사감리금액				천원
		공사감리 완료일
감리원 배치 현황	직 무	등 급	성 명					생년월일				감리원 배치기간(일수)
												～ ( )
												～ ( )
												～ ( )
감리자 확인	위에 적힌 내용이 사실임을 확인합니다. 감리자 회사명: 대표자명: (서명 또는 인) 확인자 성명 및 연락처:
「석면안전관리법」 제30조제2항 및 석면해체작업 감리자 기준 고시 제7조에 따라 감리 완료보고서를 제출합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 시장․군수․구청장 귀하
210mm×297mm(신문용지 54g/㎡(재활용품))