보 고 서
			담당	팀장	공사감독1처장
					09/18
문서번호	공사감독1처-8622
보존기간	준영구		협 조	선임주임
결재일자	2015.09.18.
공개여부	공개
제 목	설계(정산)변경 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 한강공원 야외수영장 보수공사

나. 공사기간 : 2015. 03. 16. ~ 2015. 10. 01

다. 공사개요 : ⦁ 콘크리트 단면보수

- 단면보수 : 3,198㎡, 수조 타일시공 : 3,192㎡

⦁ 구조물 신축이음(죠인트) 정비 : 169m

⦁ 도장공사

- 도막탑코팅 : 19,368㎡, - 수성페인트 : 4,632㎡

⦁ 풀 월류부 정비 등 부대공 1식

라. 도급금액 : 1,607,638,000원

마. 시 공 사 : (주)평광건설 대표 권정훈

바. 발 주 청 : 한강사업본부 기반시설과

2		설계변경 사유

가. 변경사유 : 현장 실정보고 및 발주청 작업지시, 실물량 정산에 따른 물량 증․감 사항임.

나. 변경내용

1) 한강사업본부 합동점검에 따른 조치계획 실정보고

○ 관련근거 : 공사감독1처-3863(2015.05.04), 기전설비2과-1272(2015.05.07)

○ 수 량 : (뚝섬 수영장)

수조 벽체 화강판석 보수(철거후 재설치) : 130㎡

샤워장 및 탈의실주변 콘크리트 바닥정비(화강판석) : 340㎡

유수풀 주변 블록 평탁화

(잠실 수영장)

그늘막 파손부 정비 : 2개소

(잠원 수영장)

매표소 입구 휀스 재설치 : 36m

여과기주변 안전휀스 설치 : 32m

(여의도 수영장)

바닥재 도포구간 바닥균열(현장조사 시행)

배수구 구체 콘크리트 보수 : 2개소

(망원 수영장)

매표소앞 배수구 및 뚜껑정비

폐기물 수량 : (증) 11㎥

○ 소요 공사비 :

도급비 : 112,310천원(제잡비 포함)

관급비 :  24,128천원

2) 긴급보수 작업인원 정산

○ 관련근거 : 공사감독1처-7712(2015.08.27), 기전설비2과-1009(2015.04.15)

기전설비2과-1399(2015.05.20), 기전설비2과-1606(2015.06.05)

기전설비2과-1770(2015.06.19), 예비준공검사시 지시사항

기반시설과-89(2015.07.07), 기반시설과-686(2015.08.26)

○ 수 량 : 작업인원 : (증) 7인

○ 소요 공사비 : 증) 1,133천원(제잡비 포함)

3) 퇴직공제 부금, 보험료(장기요양,국민건강,국민연금), 안전관리비, 환경관리비 정산

○ 관련근거 : 건설산업기본법 시행령 83조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

○ 소요 공사비 : 감) 87,777천원

4) 폐기물처리용역 물량 정산

○ 관련근거 : 공사감독1처-3863(2015.05.04), 기전설비2과-1272(2015.05.07)

○ 수 량 : 폐기물 처리 및 운반 : (증) 25ton

○ 소요 공사비 : 증) 626천원

다. 주요 공종 수량 증 ․ 감

공 종	단위	증감	조정수량	합계	뚝섬	여의도	망원	잠실	잠원	광나루	난지
콘크리트 균열보수(습식)	m	325	-	-
			325	325.5		325.50
휀스철거	kg	271.8	4,970.5	4,970.59	1241.09			3729.50
			5,242.3	5,242.37	1241.09			3729.50	271.78
고재처리(스테인리스)	kg	271.8	4,082.9	4,082.93			105.21	3834.71		143.00
			4,354.7	4,354.70			105.21	3834.71	271.78	143.00
폐기물 상차	㎥	11	98	98.02	0.28	0.32	47.88	49.36	0.18
			109	109.64	11.91	0.32	47.88	49.35	0.18
작업인원	인	7	120	120.0	20	20	20	15	15	15	15
			127	127.5	34	17	14.5	23	10	7	22
안전난간 철거및 재설치	m	45
			45	45.0	45.00
화강석판석, 두겁석 철거및재설치	㎡	43.5
			43.5	43.5	43.50
화강석판석 판석(벽체)철거 및재설치	㎡	136.3
			136.3	136.32	136.320
콘크리트열화단면제거	㎡	29.6
			29.6	29.61	29.610
화강석판석시공(바닥)	㎡	565.3
			565.3	565.33	565.330

라. 공사비 증 ․ 감 사항

□ 총 공사비                                                  (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비	1,919,918,000	1,873,440,320	감	46,477,680
도 급 비	1,607,638,000	1,665,829,000	증	58,191,000
관급자재비	192,600,000	201,351,320	증	8,751,320
이 전 비	119,680,000	6,260,000	감	113,420,000

□ 폐기물 용역비                                               (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
용 역 비	5,634,000	6,260,000	증	626,000

3		조치내용

상기 설계변경에 대하여 발주청에 보고하고, 그 결과에 따라 조치하고자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서(정산) 1부.

2. 설계변경 도서 1부.   끝.