설계VE 수행결과 요약

1. 총공사비 증감률 및 제안 건수

공 사 비(원)						아이디어 건수			비고
구 분	개 선 전	개 선 후	절 감 액	절 감 율	가치향상율	제 안	채 택	미채택
VE제안공사비				00.00%	-	44	36	8
총공사비	0	0	0	00.00%

2. 설계VE 제안결과

순	제안번호	제 안 명	공 사 비(원)			채택 여부	비고
			개 선 전	개 선 후	증 감 액
총 계		제안 44건 중 채택 36건	534,738,377	321,826,685	213,363,226(감소)
1	건축계획 -01	주차시설 설치를 위한 굴토 및 옹벽설치를 → 기존유지 및 주차방식 변경	126,389,530	20,001,271	-106,388,259	채택
2	계속	건축물 주변수목 제거	0	433,805	433,805	채택
3	계속	공동까페와 마을정원간 동선을 근접시키자	5,714,506	6,734,288	1,019,782	채택
4	계속	부출입구 방풍실 삭제	3,863,053	3,130,656	-732,397	채택
5	계속	공동까페 급배수 설비설치	0	0	0	채택	기존설치되어있음
6	계속	상담실 1,2를 채광 환기가 되는 위치로 조정 배치하자	0	0	0	미채택
7	계속	교육실 1,2 가변형벽체 설치	2,616,900	3,053,050	436,150	미채택
8	계속	계단 방화구획 위치 변경	0	0	0	채택
9	계속	세미나실과 사무실 교체	0	0	0	미채택
10	계속	기존 옹벽 옆 기계식 주차장 설치 -> 지하층을 활용한 주차장 설치	135,850,000	50,050,000	-85,800,000	채택
11	건축시공 -01	소방용수 저수조 벽체에 점검문 및 점검사다리를 설치한다	0	1,564,420	1,564,420	채택
12	계속	1층 계단실 2 출입문을 셋백시켜 복도 동선과의 충돌을 방지한다	0	0	0	채택

순	제안번호	제 안 명	공 사 비(원)			채택 여부	비고
			개 선 전	개 선 후	증 감 액
13	건축시공 -3	장애인 점형블록을 조정한다	6,365,245	6,058,770	-306,475	채택
14	계속	2층 창고 출입문을 셋백시켜 문 앞 통로공간을 확장한다	0	283,841	283,841	미채택
15	계속	1,2층 1-B축열 위치의 기존 DUST CHUTE 공간을 철거 후 공간을 활용한다	0	1,495,919	1,495,919	미채택
16	계속	2층 휴게 테라스 바닥의 마감시스템을 변경한다	1,077,319	252,545	-824,774	채택
17	계속	장애인,노약자 출입을 고려하여 출입문 크기를 확장하고 유효폭 0.9m이상을 확보한다.	83,047,134	83,180,010	132,876	채택
18	계속	PS출입문 FSD-06의 문폭 600mm를 750mm로 확장한다(FSD-05)와 동일	1,762,033	1,901,871	139,838	채택
19	계속	소방관 진입창 AW-04의 T26mm 로이복층유리를 T24mm로이복층유리로 변경한다	460,437	487,207	26,770	채택
20	계속	5층 여자화장실 창 AW15(600x600)의 크기를 확장한다	627,573	737,194	109,621	채택
21	계속	2층 휴게실 바닥마감을 변경한다	23,618	441,435	417,817	채택
22	계속	지하1층 A열 증축부분의 매트기초 노출부위 구조와 지중 외벽을 보완한다	0	0	0	채택
23	계속	지하층 계단실1 하부공간을 창고로 사용한다	0	9,152,036	9,152,036	미채택

순	제안번호	제 안 명	공 사 비(원)			채택 여부	비고
			개 선 전	개 선 후	증 감 액
24	건축구조-01	기초 변경	17,022,720	15,832,960	- 1,189,760	채택
25	계속	기존기둥열 신설기둥 삭제	16,114,471	3,712,823	- 12,401,648	채택
26	계속	1층 슬래브오픈 변경/기둥삭제	169,973	5,881,406	5,711,433	미채택
27	계속	R~3SG1 배치변경		2,406,869	2,406,869	채택
28	계속	신설코어 벽체변경	2,428,658	708,519	- 1,720,138	채택
29	기계-01	MDF실 상부에 물배관을 배제한다.	0	0	0	채택
30	계속	저수조 상부에 배수관 설치를 배제한다.	13,368	21,700	8,332	채택
31	계속	펌프실 장비 반출입 동선 확보	0	0	0	채택
32	계속	급수공급 압력을 적정수압으로 유지	0	3,832,744	3,832,744	채택
33	계속	급수배관에 By-pass 설치	0	204,116	204,116	채택
34	계속	소방용, 배수용 펌프 비상시 구동방안 구축	21,523,157	57,718,795	36,195,638	채택

순	제안번호	제 안 명	공 사 비(원)			채택 여부	비고
			개 선 전	개 선 후	증 감 액
35	전기-01	전기실 장비반입 확보	0	0	0	채택
36	계속	피뢰설비 적용	0	11,756,000	11,756,000	채택
37	계속	태양광설비 삭제	23,330,000	23,330,000	0	미채택
38	계속	지하1층 통신CABLE TRAY (물탱크 상부, 체력단련실 상부) 간섭없이 적용	7,245,667	2,245,687	-4,999,980	채택
39	계속	이중천장구간 통신 배관/배선을 라이트웨이(일체형 배관/배선)로 적용	35,000,000	16,800,000	-18,200,000	채택
40	계속	각실내 통신 outlet 수구 적정 설치	29,568,922	10,245,000	-19,323,922	채택
41	계속	MDF실 접지선 굵기 적정하게 변경	1,350,000	675,000	-675,000	채택
42	계속	이중천장구간 전등,전열,동력 배관/배선을 라이트웨이(일체형 배관/배선)로 적용	19,856,500	8,165,000	-11,691,500	채택
43	계속	전등설비 배선 4㎟ 를 2.5㎟로 적용	19,536,000	11,578,000	-7,958,000	채택
44	계속	기존 전기실내 케이블 덕트 철거하고 신규 설치	350,000	950,000	600,000	채택