【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 김구		요청일		2014년 10월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
공사개요	공사규모		-폭원4-10차도, 연장 7.96KM -지하차도(4개소) : 2,790M -교량(2개소) : 540M
	공사기간		2002 . 07 . 03 ~ 2018 . 07 . 31
	감 리 사		㈜동명기술공단건축사사무소
	설 계 사		㈜수성엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)외 1개사
자문 안건명			염곡교차로 구간 상수도 이설				요청금액		844,300천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 상수도 지장물 이설관련 관리주체인 강남수도사업소 협의결과 주･야간 병행작업으로 관련비목(염곡교차로 시상수도 이설) 증액 필요함
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 상수도 이설 관련비목을 검토한 결과 적정함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : - - 변 경 : 상수도이설 752m ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : L= 752m - 증 감 : L= 752m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 844,300천원 - 증 감 : 844,300천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 지장물(상수도)이설
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
계약금액	222,995,000천원	계약일	2002.06.28	시공사	롯데건설(주)외1개사
공사기간	2002. 7. 3 ~ 2018. 7. 31	낙찰률	59.714%	설계자	㈜수성엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동명기술공단 건축사사무소
공사규모	-폭원4-10차도, 연장 7.96KM -지하차도(4개소) : 2,790M -교량(2개소) : 540M			※ 작성자 : 김 구(☎ 3708-8667)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		상수도 이설 752m	증액
공 사 비	-		844,300천원	(증)844,300천원
적 용 요 율	-		79.855%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	79.855%
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 토목부-20270호(2014.10.20.)
	관련규정	공사계약 일반조건 제19조, 제19조의 2 강남수도사업소 시설관리과-5671(2014.3.18.)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	지장물(시 상수도) 이설공사비 증액 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인 요청 - 동기강 2014-246호(2014.10.6.)

· 실정보고 승인 – 토목부-20270호(2014.10.20.)

· 실정보고 승인 통보 – 도시기반시설본부-14-41417호(2014.10.20.)